문서번호	도로보수과-4580
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		국중진	10/20 이종엽
협조

- 회기역 로타리 주변 -

무단횡단 금지시설 설치공사 추진계획

2015. 10. 20

성동도로사업소

(도로보수과)

- 회기역 로타리 주변 -

무단횡단 금지시설 설치공사 추진계획

‘15년 교통사망사고 대응 단기개선사업으로 무단횡단 금지시설을 설치토록

예산 재배정

※ 교통운영과-19290(2015. 10. 6)호와 관련임.

▢ 예산 재배정액 : 50,800,000원

○ 시조사 교차로~회기역 교차로    : 금17,786,000원

○ 회기역 교차로 ~ 경희대 교차로  : 금33,014,000원

▢ 공사개요

연번	사업위치	사 업 내 용	규 모
1	시조사 교차로~회기역 교차로	노면표시 제거 및 도색	제거 462m, 도색 462m
		시선유도봉 신설	6개
		무단횡단금지시설 설치	135m
2	회기역 교차로~경희대 교차로	노면표시 제거 및 도색	제거 586m, 도색 586m
		무단횡단금지시설 설치	290m
		시선유도봉 신설	12개
		표지병 철거	93개

▢ 추 진 계 획

○ 시조사 교차로 ~ 회기역 교차로

- 도로가 노후되어 포장 후 무단횡단금지시설 설치

․ 포장은「2015 노후포장도로 정비공사(1구역)」에서 추진

- 노면표시는「2015 노면표시 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시

- 시선유도봉 신설은 「2015 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시

- 무단횡단금지시설 관급자재 구매․설치

․ 기설치된 무단횡단 금지시설과 유사한 디자인으로 단가 고려 선정

○ 회기역 교차로 ~ 경희대 교차로

- 노면표시는「2015 노면표시 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시

※ 도로상태 양호(2014년 재포장 시행)

- 시선유도봉 신설 및 표지병 철거는 「2015 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시

- 무단횡단금지시설 관급자재 구매․설치

․ 곡선도로임을 감안하여 단가, 유지관리 등을 고려한 제품으로 관급구매․설치

▢ 추진일정

공종	추진일정			비 고
	10월	11월	12월
시조사 교차로~회기역 교차로 포장
표지병 철거 (경희대 교차로)
노면표시 (시조사, 경희대)
무단횡단금지시설 (시조사, 경희대)
시선유도봉 신설 (시조사, 경희대)

▢ 조치계획

○ 위와 같이 2015년 노후포장도로 정비공사(1구역) 및 노면표시 유지보수공사(연간단가), 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)에 작업지시 및 관급구매․설치 하여 교통사망사고 대응 단기 개선사업을 추진코자 하며 작업완료 후 설계변경시 정산처리하고자 함.

※ 시조사 교차로~회기역 교차로 포장에 따른 부족 예산은 2015년 노후포장도로 정비공사비 사용

○ 개략공사비

구 분	물 량	규격	공사비(천원)	비고
포장공사비	50a	일반, 5cm	125,000	노후1구역
표지병 철거	93개	9*51*4mm	1,430	교통및도로부속물
시선유도봉 신설	18개	250*80*750
노면표시	2,272m	제 거	14,539	노면표시
	6,302m	재도색
무단횡단금지시설	170경간		33,159	관급구매, 설치
계			174,128

끝.