문서번호	도시철도사업부-9422
결재일자	2015.10.23.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	경전철계획과장	도시철도사업부장		시설국장
권순환	박용우	권영찬		10/23 형태경
협 조
	경전철2과장		최광무
	경전철1과장		박동룡
	주무관		박노성

『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』
통합 공정회의 개최 결과 보고(제8차)

2015. 10

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』
통합 공정회의 개최 결과 보고(제8차)

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업의 효율적인 관리와 원활한 사업추진을 위하여 제8차 통합 공정회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘15.10.21.(수) 14:00~16:30

○ 장    소

- 현장점검 : 우이~신설 4공구

- 공정회의 : 우이~신설 4공구 통합상황실(현장점검 후 실내 공정회의 진행)

○ 참 석 자 : 50명

- 본  부 : 도철사업부장․설비부장, 경전철계획과장, 분야별 담당과장 및 업무담당

- 사업자 : 법인대표, 건설사업단장, 운영관리팀장, 각 공구 책임감리원 및
현장소장(궤도 및 시스템분야 포함)

□ 회의결과

○ 보고현황

- 보고방법 : 회의 자료에 의거 각 공구 책임감리원이 보고

- 보고내용

· 분야별 공정 추진현황

· 현안사항 및 부진공정 만회대책

· 지시(협조)사항에 대한 조치결과 및 건의사항 등

○ 분야별 요구(협조)사항

<시스템분야>

- 통신기계실 작업완료 요청

․건축마감 지연 : 1, 3, 4공구

․장비 현장반입 가능토록 자재 등 정리 조치 : 3공구

⇒ 우이 1, 3, 4공구에서 시스템 감리단과 협의하여 조치

○ 주무관청 및 법인 요구(협조)사항

<도시철도사업부장>

- 지상 복공판 제거 및 포장계획을 최대한 앞당길 수 있도록 노력하여 주기 바람

- 돌출 구조물의 경우 민원 등을 감안하여 서둘러서 추진하기 바람

- 개착구간 상수도 누수 등 사고가 발생하지 않도록 복구작업시 안전에 철저를 기하여 주기 바람

- ‘15.10.22기준 공정율 및 잔여공정이 얼마나 남았는지 확인 요함

<도시철도건축부 건축계획과장 >

- 공정회의 자료작성 방식 등 공구가 통일되게 작성할 것

(건축분야의 경우 착공예정일, 준공예정일 등 공구별로 누락 및 작성방식 다름)

- 대합실, 정거장 벽체판넬 및 최종 마감공사 구간 타분야 공정상 간섭구간이 없도록 협의하여 주시고 세부 상세도면 작성시 감독 및 감리가 충분히 검토할 수 있도록 조치

<도시철도설비부장>

- 궤도공정이 연기되어 시스템 공정이 지연되지 않도록 노력해 주기 바람

- 국토부 점검 등 종합시운전을 위하여 ‘16년 9월까지 공정이 마무리 될 수 있도록 조치하여 주기 바람

- ‘15년 11월말부터 수전 계획으로 우이1, 2공구에서는 우선 시운전 구간에 대하여 궤도공사가 마무리되는 시점에서 물청소 및 쓰레기 반출을 철저히 하여 시스템 공사에 장애가 발생하지 않도록 조치 요함

⇒ 우이 1, 2공구에서 궤도 및 시스템 감리단과 협의하여 조치

<우이신설 경전철 법인대표>

- 차량반입이 완료됨에 따라 전기안전공사, 한전 등 관련기관과 협의 하고 수전계획을 수립하여 시운전에 차질이 없도록 추진하겠음

- 실시협약에 따라 유지관리 및 운영계획을 추진하고 성공적인 운영을 위하여 운영자문위원회 구성 및 운영 등 사업추진에 만전을 기하겠음

□ 향후계획

○ 금회 공정회의시 협조요청 및 요구사항은 각 분야(공구)별로  조치결과를 차기 공정회의 시 보고

○ 차기 공정회의는 현장에서 현장점검 후 실내 공정회의를 시행할 예정으로 일정계획 수립 후 각 부서 및 공구에 통보

붙임  1. 회의자료 1부.

2. 통합 공정회의 사진 1부.