작성서식	-	4/4분기 다국어 안내표지판 정비실적 보고

0		DDP 주변 안내표지판

(문화관광디자인본부, 디자인정책과)

1		사업개요

❍ 추진경위

- DDP주변 안내표지판 개선계획 수립(‘13.6.5, 본부장 방침)

- DDP주변 안내표지판 합동실태조사실시

	행정1부시장 지시사항(‘13.6.7)
◇ DDP주변 안내표지판 실태를 원점에서 재조사하여 정비추진하기 바람.

⇒ ‘13.6.19 서울시(디자인정책과,관광사업과,보행자전거과), 중구청, 서울디자인재단 합동조사

❍ 사업기간 : '13.1~'14.2월

❍ 사업내용

- 『동대문디자인플라자』개관(‘14. 3) 대비 외래관광객 및 시민 편의 제고를

위해 주변 안내표지판을 정비

․‘동대문역사문화공원’ 표기

․4개언어 표기(한․영․중․일)

- DDP주변 안내표지판 물량 : 총 105개소(보행자 32, 관광 9, 지하철 62, 사설 2)

❍ 총사업비 :  49백만원

- '13년 예산 : 49백만원

- '13년 12월말 현재 집행액 :  0 백만원(집행율 0 %)

2		추진성과

❍ '13년 4/4분기 추진실적(1~12월말)

단위사업	'14년(2월) 정비목표	'13.12월말 추진실적	'13년 예산액	'13.12월말 집행액( %)	'16년까지 정비목표
DDP주변 안내표지판 개선	105	0	49백만원	0

□ 정비 추진사항

❍ DDP 반경 500m 이내 안내표지판 현황조사(‘13.4~5)

❍ DDP 주변 안내표지판 개선계획 수립(‘13.6.5 본부장 방침)

❍ DDP 주변 안내표지판 합동실태조사 실시(‘13.6.19 1부시장 지시)

❍ DDP 개관 대비 주변 안내표지판 정비계획 수립(‘13.7.8 본부장 방침)

❍ DDP 개관 대비 주변 안내표지판 정비용역 발주(‘13.10~11)

❍ DDP 개관 대비 주변 안내표지판 외국어표기(안) 자문(‘13.12)

□ 향후 추진계획

❍ ‘14. 1 ~2 : 설치공사