문서번호	설비부-13466
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 10/29 박기형
협조

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기·통신공사』

실정보고(임시가로등 변경 등) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기·통신공사』

실정보고(임시가로등 변경 등) 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기·통신공사』의 임시가로등 변경건 등에 대한 감리보고가 있어 검토 보고 드림.

공사개요

□ 건    명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기·통신공사

□ 계 약 자 : 아람이앤테크(주) / 송림기술(주)

□ 계약기간 : 2014. 5. 15 ～ 2017. 12. 31

□ 계약금액 : 전기: 1,132백만원 / 통신: 121백만원

관련근거

□ 실정보고(임시가로등 및 보행등 설치)[율곡감2015-348, 2015. 10. 27]

□ 실정보고(카메라 추가설치 등)[율곡감2015-346, 2015. 10. 27]

실정보고 내용

구 분	실정보고 내용	비고
전기공사	○ 임시가로등 설치위치 등 변경(당초: 휀스부착형->변경:통로박스 상부) ○ 터널 보행로 보행등 및 등기구 박스 수량 변경
통신공사	○ 터널 보행로 CCTV 추가설치(사각지대 해소) ○ 통신 인입관로 및 맨홀설치의 설계도서 누락에 따른 변경 ○ 종묘측 터널 보행로 구간의 임시개통에 따른 임시카메라 설치

공사비 변경 현황

구 분		직접공사비(원)		증 감
		변경 전	변경 후
전기공사	임시가로등 설치	25,530,599	28,563,689	증)3,033,090
	터널 보행등 설치	239,712,733	257,115,764	증)17,403,031
합 계				증)20,436,121
통신공사	CCTV 설비공사	79,875,527	84,347,986	증)4,472,459
	인입관로 및 맨홀설치	-	4,200,991	증)4,200,991
	임시카메라 설치	-	12,870,984	증)12,870,984
합 계				증)21,544,434

감리 검토의견

□ 당초 휀스 부착형 임시가로등을 계획하였으나, 교통처리흐름에 따른 휀스 이동시 임시가로등을 수회 이설해야 하므로 통로박스 상부에 자립형 가로등으로 설치.

□ 당초는 통로박스 천정을 설치하는 것으로 계획하였으나 미설치로 이에 따른 등기구박스 수량의 증가는 적정한 것으로 판단함.

□ 통로박스 내 카메라 추가설치는 시민의 안전을 위하여 설치하는 것이 타당함

□ 설계내역에 누락된 통신 인입관로 및 맨홀물량 반영

□ 종묘측 보행로 임시개통에 따른 임시카메라 설치는 공사 완료시가지 보행자의 안전을 위해 설치하는 것이 타당함.

보고자 의견

□ 실정보고 사항을 검토한 결과 감리 검토의견이 타당하여 승인

□ 승인사항은 감리원에게 통보하여 추후 설계변경 시 반영될 수 있도록 조치하고자 함.

붙임  실정보고서(전기 및 통신분야) 각 1부.  끝.