투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	신곡수중보 관리동 수도배관 교체공사 설계변경(정산) 시행 및 계약의뢰

1. 기전설비과-1608(2015.10.28.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인『신곡수중보 곤리동 수도배관 교체공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행 및 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신곡수중보 관리동 수도배관 교체공사

나. 공사기간 : 2015. 10. 12 ~ 2015. 11. 5.

다. 계약업체 : ****************

라. 계약금액 : ************

마. 설계변경 사유

- 온수배관(sts 15~20A) 추가 등 실제물량 증감 반영

- 제경비(환경보전비) 감액(정산)에 따른 정산

바. 설계변경 금액                             [단위 : 원]

구 분	변경전	변경후	증․감	비 고
공급가액	15,768,182	18,632,728	증 2,864,546
부가가치세	1,576,818	1,863,275	증 286,454
소 계	17,345,000	20,496,000	증 3,151,000

사. 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 깨끗하고 안전한 한강만들기, 한강하천시설관리, 수중보유지관리, 시설비(100-401-01)

붙임 :  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경내역서(갑, 을, 도면) 각 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 산재, 고용보험 완납증명원 1부.  끝.

	시설부장
주무관	강병모		기전설비과장	김남수		시설부장	10/29 박상돈
협조자	주무관	김태중
시행	기전설비과-1622	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가, 한강사업본부)	/
전화	3780-0670	/전송	3780-0744	/	multik21@seoul.go.kr	/	부분공개