의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-23108
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		터널건설과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
강철규		권혁대	노우성	형태경	11/03 고인석
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 2174번, 김기대 의원,도시계획관리위원회)

시의원 요구자료(요구번호 2174번)를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

붙임 : 시의원 요구자료 요구자료 1부.  끝.

김기대 의원(도시계획관리위원회, 새정치민주연합)

2174. 응봉교 확장 및 성능개선 공사 관련

1) 2015년도 공정계획서

2) 감리보고서

1) 2015년도 공정계획서 : 예정공정표 별첨

○ `15. 1. ~ `15. 2. : 철도횡단구간 기존 응봉교 철거

○ `15. 2. ~ `15. 8. : 철도횡단구간 응봉교 재설치

- `15. 8.31. : 응봉교 왕복4차로 우선 개통

○ `15. 7. ~ `15.11. : 터널형방음벽 설치, 응봉교 남단 연결도로 정비

- `15. 11. 2. : 응봉교 왕복6차로 전면 개통

○ `15.10. ~ `15.12. : 응봉교 하부도로 정비(회전교차로 설치 등)

엘리베이터 설치(응봉교 동측 보도와 연결)

○ `15.10. ~ `16. 4. : 가설교량 철거, 중랑천 둔치 연결통로 정비

○ `16. 4. ~ `16. 6. : 중랑천 둔치 원상복구 및 부대공사 완료

2) 감리보고서 : CD로 별도 제출

끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토 목 부)	담당사무관	권혁대
	☎ 3708-2567	주무관	강철규
	작 성 일 : 2015.11.3.