문서번호	시설과-8160
결재일자	2015.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
조경팀장		시설과장	중부공원녹지사업소장
남상국		김한준	11/09 이용태
협조

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 건설사업관리용역』

설  계  변  경  (총차 2회, 1차 2회) 검  토  보  고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 건설사업관리용역』

설  계  변  경  (총차 2회, 1차 2회) 검  토  보  고

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사』의 문화재, 전기 공사 시행을 위한 건설사업관리기술자 투입 변경에 따른 설계변경에 대한 검토 보고임.

□ 관련 근거

□ 건설사업관리용역 설계변경서 자료 제출 : 남산 회현-제 50호 (2015. 11. 2.)

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 건설사업관리용역

□ 감 리 사 : ㈜한국건설관리공사-조경, ㈜한인전통건축감리단-문화재

㈜한국전기설계감리기술단-전기

□ 용역기간 : 전체 - 2015. 04. 21 ~ 2017. 01. 09

1 차 - 2015. 04. 21 ~ 2015. 12. 31

※ 공사기간 : 2014. 12. 19 ~ 2016. 12. 31

□ 계약금액 : 478,000천원 (총괄), 229,240천원 (1차)

□ 설계변경 보고내용

□ 변경사유 : 한양도성 흔적 형상화, 분수대 전기.기계실 철거 등 공사 시행에

따른 문화재, 전기 상주 건설사업관리기술자 투입

□ 변경내용

- 문화재 상주건설사업관리기술자 1차 용역에 부분투입(0.8개월) 변경

- 전기 상주건설사업관리기술자 1차 용역에 부분투입(1.0개월) 변경

- 1차용역의 분기보고 작성(3회 → 4회) 변경

□ 용역기간 및 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
용역기간	총 차	2015. 4. 21 ~ 2017. 1. 9	2015. 4. 21 ~ 2017. 1. 9	변경 없음
	1 차	2015. 4. 21 ~ 2015. 12. 31	2015. 4. 21 ~ 2016. 5. 31
계약금액	총 차	478,000,000	478,000,000	변경 없음
	1 차	229,240,000	319,000,000	증) 89,760,000

□ 보고자 의견

□ 설계변경 보고에 대한 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당하다고 판단

되므로 설계변경 승인하고 계약변경을 시행하고자 함.

붙임 : 1) 건설사업관리용역 설계변경서 자료 제출 공문 1부.

2) 변경 설계서(총차 2회, 1차 2회) 1부.

3) 준공기한 연기의뢰서 1부.

4) 합의각서 1부. 끝.