문서번호	시사편찬과-8498
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시사편찬과장	서울역사편찬원장
조은영	이상배	11/13 김우철

2016 서울역사편찬원 청사보수 추진계획

2015. 11.

서울역사편찬원

(시사편찬과)

2016 서울역사편찬원 청사보수 추진계획

서울역사편찬원의 노후화된 청사시설을 보수, 개선하여 안전사고 등을 예방하고, 이용시민의 안전과 편의를 제고하고 연구 및 활용 목적의 수집, 소장자료를 보전하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

관련근거

공유재산 및 물품관리조례 제17조(관리)

공유재산 및 물품관리조례 시행규칙 제4조(재산관리관의 관리책임)

사업내용

사업기간 : ‘16.1월 ~ 12월

내    용

- 서울역사편찬원 청사 지붕 보수공사 실시를 위한 설계용역

- 청사 노후설비 교체 및 소규모 보수작업 실시

추진방법 : 수의계약(2천만원 미만의 용역) 및 일반지출

사업예산 : 37,220천원(시설비 18,000, 공공운영비 19,220)

Ⅱ		추 진 방 향

배   경

청사건물이 노후화되어 지붕누수에 따른 누전으로 이용시민의 안전사고, 보존사료의 훼손 등의 위험우려

동절기 수도관, 배관 등의 동파 등이 잦아 이에 따른 설비 보수, 유지작업 필요

추진방향

지붕 보수공사전 설계용역을 실시하여 정확한 공사견적과 규모를 확인하여 집행과정 효율화

노후화된 청사 유지, 보수, 개선으로 누전사고 등 각종 위험사고를 방지하여 이용시민의 편의와 안전 제고, 소장자료 보전

시설물 보안관리 및 정기적인 청소, 방역작업으로 청결 유지

Ⅲ		추 진 계 획

서울역사편찬원 청사보수

청사지붕 보수공사에 대한 설계용역

(단위 : 천원)

구 분	소요예산 (C) = (A)*(B)	실시면적(㎡) (A)	단 가 (B)	비 고
합 계	18,000	4,350	-
건축설계	9,360	780	12
토목설계	3,485	410	8.5
내역서	1,547	1,190	1.3
현장조사	690	2	345	인원수
대관 인, 허가	1,904	1,190	1.65
구조안전 확인	1,014	780	1.35

청사 부대시설 및 설비 등 유지 관리

(단위 : 천원)

구 분		소요예산 (C) = (A)*(B)	횟 수 (A)	단 가 (B)	비 고
합 계		19,220	37	-
통신설비 유지보수		4,500	15	300	대수
청사 부대시설 및 장비유지	조명시설	3,000	2	1,500
	노후설비 (배관, 지붕, 벽면)	4,000	4	1,000
	냉난방설비 (점검, 수선, 교체)	2,920	2	1,460
보안경비 용역		2,400	12	200	월수
청소 및 방역		2,400	2	1,200

소요예산 : 37,220천원

청사지붕 보수에 대한 설계용역 :18,000천원

- 예산과목 : 서울역사편찬원 시사편찬과, 역사기반 구축․체계화, 시사편찬 및 교육, 서울역사편찬원 청사보수, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

청사 부대시설 및 설비 등 유지 관리 : 19,220천원

- 예산과목 : 서울역사편찬원 시사편찬과, 역사기반 구축․체계화, 시사편찬 및 교육, 서울역사편찬원 청사보수, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

Ⅳ		추 진 일 정

지붕보수 설계용역 업체 선정 및 계약	‘16. 1월 ~ 2월

현장 확인 및 설계용역 실시	‘16. 2월 ~ 6월

시행결과 검토 및 결과보고	‘16. 7월

청소 및 방역, 노후설비 교체작업 등(상시)	‘16. 1월 ~ 12월