투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	서 울 특 별 시 장(버스정책과장)
(경유)
제목	남산공원내(남측순환로) 노선버스 운행시간 조정 연기요청

1. 버스정책과-11407(15.07.02)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 남산공원내 불량도로 정비를 위한『남산공원 남측순환로 정비공사』및『남산공원 관광활성화를 위한 환경정비사업(추경사업)』이 시행중(야간작업)에 있으며

3. 도로정비 및 환경정비 사업의 “정밀시공 및 시공품질향상”을 위한 최소한 작업시간(야간8시간) 확보를 위하여 조정된 노선버스 운행기간을 다음과 같이 연기요청 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 조정대상 : 북부운수(2번, 3번, 5번)

나. 조정시간 : 전과동일

다. 조정기간 : 15일 연기

- 당 초 : 2015.07.10.(22:30) ~ 2015.11.19.(06:30)

- 변 경 : 2015.07.10.(22:30) ~ 2015.12.04.(06:30)

라. 조정사유 : 정비공사의 주자재(아스팔트) 양생 및 다짐시간 확보등 최소작업시간 요구. 끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	김영수		시설팀장	한종수		시설과장	11/17 김한준
협조자
시행	시설과-8435	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5962	/전송	02-3783-5969	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	대시민공개