함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결 보고(통보) [종암가압장 리모델링 공사]

1. 시설관리과-34553(2015.11.18)호와 관련입니다.

2.『종암가압장 리모델링 공사』건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고 보고(통보) 합니다.

가. 계약건명  : 종암가압장 리모델링 공사

나. 계약업체 : *******************************

************************** ***************************

다. 계약금액

- 당초 : 금86,515,800원

- 변경 : 금91,025,000원

- 증액 : 금4,509,200원

라. 계약기간

- 당초 : 2015.07.01 ~ 2015.11.20

- 변경 : 변경없음

마. 변경사유 : 물량증감 및 신규비목 발생

바. 보증서 관련사항

- 계약보증서   : 금676,380원

- 도시철도공채 : 금90,000원

- 선금보증서   : 해당없음

붙임 : 1. 공사 변경계약서 1부.

2. 계약보증서 1부.

3. 합의서 1부.

4. 계약내역서 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	은정호		행정관리팀장	김태수		행정지원과장	서경만		중부수도사업소장	11/19 代서경만
협조자
시행	행정지원과-26352	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	3146-2043	/전송	3146-2244	/	younieun@seoul.go.kr	/	부분공개