서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	1종교량 보수보강공사 책임검설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	성산대교 보수공사 관급자재 및 폐기물 수량변경 승인통보

1. 1종교량 – 259호(2015.11.17)호와 관련입니다.

2. 성산대교 보수공사 관급자재(아스콘) 수량변경 검토보고 사항에 대하여 아래와 같이 승인통보하오니 공사관리업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 아스콘 및 폐기물 물량 변경내역

구 분	물량 변경내역 (톤)			비 고
	당 초	변 경	증․감
아스콘	800	1,074	증 274
폐기물 물량	770	1,053	증 283	폐아스콘 810톤 폐아스콘(혼합폐기물) 243톤

나. 아스콘 및 폐기물 물량 증가에 따른 소요예산 변경사항

- 관급자재(아스콘) : 당초 91,240,000원 ⇒ 변경 122,535,320원

- 폐기물 처리비 : 당초 12,287,000원 ⇒ 변경  21,871,000원. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김귀용		교량기획팀장	代김귀용		교량안전과장	11/20 이용심
협조자
시행	교량안전과-5290	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	02)2133-1943	/전송	02)2133-1429	/	gyong@seoul.go.kr	/	대시민공개