서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	관급자재(아스콘) 수량 변경 요청 - 성산대교 보수공사

우리과에서 시행중인 『성산대교 보수공사』에 소요되는 관급자재(아스콘) 수량 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재(아스콘) 수량 변경 요청 내역

건명	계약 번호	품명	규 격	단위	수량			수량 변경 사유	비고
					당초	변경	증감
개질아스팔트콘크리트구매 (성산대교 보수공사)	2015100461100	아스 팔트 콘크 리트	WC-6, 13mm, PG-76-22 1등급골재 (편장석률 10%이하, 인장강도비 0.8이상)	톤	800	1,074	증)274	성산대교 보수공사 (교면포장) 두께상이	계약금액 당초 91,240,000원 → 변경 122,535,320원 증)31,295,320원

나. 예산과목 : 교량관리, 한강교량관리, 성산대교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비 (추가 추산금액 31,295,320원). 끝.

붙 임 : 관련문서 및 방침서 1부. 끝.

	교량안전과장
주무관	김귀용		교량기획팀장	代김귀용		교량안전과장	11/20 이용심
협조자
시행	교량안전과-5289	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	02)2133-1943	/전송	02)2133-1429	/	gyong@seoul.go.kr	/	대시민공개