문서번호	토목부-24613
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

- 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사-

지하차도 시설물 세척 작업비 검토 보고

2015.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 -

지하차도 시설물 세척 작업비 검토보고

시설물 인수부서인 강서도로사업소에서 지하차도 시설물(방음벽, 벽체타일, 안전휀스 등)에 대하여 인수·인계전 세척 작업을 지속적으로 요청함에 따라 세척비 반영을 위하여 검토 보고 드림.

관련근거

○ 지하차도 시설물 세척작업 요청(시설보수과-4793호, ‘15.6.24.)

○ 지하차도 시설물 정비(세척) 요청(시설보수과-7266호, ‘15.9.15.)

○ 지하차도 시설물 합동점검 결과 알림(시설보수과-8393호, ‘15.10.26.)

공사개요

○ 위 치 : 구로구 개봉동234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 규 모 : 지하차도 설치 폭4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2 ~ 3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015.12.10.

○ 총사업비 : 668백만원

○ 도 급 사 :(주)케이에스씨건설외 1사

현  황

○ 개봉역앞 지하차도 개통경과 기간이 2년 ~ 3년되었으나, 그동안 터널형 방음벽, 벽체타일, 점검자 보호용 STS난간 등 세척을 하지 않아 상태가 불량 한 상태임.

※ 지하차도 개통 경과 기간

구 분	개통 일시	현재까기 경과 기간 [2015.10월 까지]	비고
구로IC방향 임시개통	2012. 05. 30	41개월
오류IC방향 임시개통	2013. 10. 06	25개월

검  토

○ 시설물 인수부서인 강서도로사업소에서는 지하차도 시설물(방음벽, 벽체타일, 안전휀스 등)에 대하여 인수·인계전 세척 작업을 3회에 걸쳐 지속적으로 요청하였으며, 현 상태도 미관이 극히 불량한 상태이므로 세척작업 반영은 필요함.(시설물 관리부서에서는 시설물 세척을 상·하반기 년 2회 시행하고 있음)

○ 적용단가 검토 : 2015년 도로 및 시설물 유지보수공사 설계지침 적용

- [낙찰율 65.736%+100%〕/2 =협의율(82.868%)

○ 시설별 세척작업 수량

구 분	단위	세척작업 면적			공사비 (백만원)	작업시간
		내 측	외 측	계
벽체타일	㎡	6,042.10		6,042.10	10백만원	야간
STS난간	㎡	1,472.00		1,472.00	4백만원	야간
터널형방음벽 강화접합유리	㎡	12,622.06	8,021.26	20,643.32	30백만원 내측:22백만원 외측: 8백만원	지하차도내측야간 지하차도외측주간
안전시설비 싸인보드카 및 신호수외	식				25백만원
계					69백만원

○ 공사비 증·감

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	수 량	공사비	비고
1, 시설물 정비(세척작업)	지하차도 내.외부			33,839,242
- 벽체타일 세척(야간)	BOX-TYPE	㎡	6,042.10	7,715,760
- 강화접합유리 세척(내측:야간)	터널형방음벽	㎡	12,622.06	16,623,252
- 강화접합유리 세척(외측:주간)	터널형방음벽	㎡	8,021.26	6,088,134
- STS난간 세척(야간)	U-TYPE+BOX-TYPE	㎡	1,472.00	3,412,096
2, 교통안전시설 및 신호수배치				19,004,666
- 라바콘 설치	H=70cm	EA	84.00	37,548
- 교통신호수 배치(야간)	단순노무종사원	인	30.00	2,990,220	정산예정
- 교통신호수 배치(주간)	단순노무종사원	인	10.00	531,590	정산예정
- 공사안내간판 설치철거	900x1800(전면반사)	EA	4.00	509,552
- 싸인 보드카(야간)	덤프 2.5Ton	대	15.00	5,881,380	정산예정
- 싸인 보드카(주간)	덤프 2.5Ton	대	5.00	1,162,600	정산예정
- 트럭탑재형 크레인(야간)	5Ton	대	18.00	7,891,776	정산예정
직접공사비				52,843,908
제경비				9,656,092
공급가액				62,500,000
부가가치세				6,250,000
도급공사비				68,750,000

감리단 검토 의견

○ 시설물 인수부서인 강서도로사업소(시설보수과)로부터 지하차도 시설물(방음벽, 벽체타일, 안전휀스등)에 대한 시설물 정비(세척작업) 요청건에 대하여 공사중 교통소통대책에 의거 지하차도 임시개통 기간이 2~3년을 경과하여 지하차도 내부에 매연, 먼지등으로 오염되어 세척 후 인수·인계 하는것이 타당 하다고 판단됨.

○ 증액되는 공사비 68,750천원에 대하여는 본부 설계변경 자문회의(소심의) 심의 결과에 따라 설계변경에 반영하고 자 함.

조치계획

○ 개봉 지하차도는 시설물 미관 상태가 극히 불량하여 세척작업이 필요한 실정이므로 감리단 검토 의견과 같이 승인코자 하며,

○ 증액되는 공사비 68,750천원에 대하여는 본부 설계변경 자문회의(소심의) 심의 결과에 따라 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임  : 감리 검토의견서 1부.  끝.