문서번호	시설과-8783
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김영수	한종수	김한준	11/27 이용태
협 조

『2015년 남산공원 남측순한로 정비공사』

실정보고 및 설계변경 보고

2015. 11.

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『2015년 남산공원 남측순환로 정비공사』

실정보고 및 설계변경 보고

『2015년 남산공원 남측순환로 정비공사』시행과 관련하여 공사현장

여건 및 시공물량 변동에 따른 실정현황을 보고하고 설계변경에 반영

하고자 함.

1		공사개요

공 사 명 : 2015년 남산공원 남측순환로 정비공사

공사개요

○ 아스팔트포장 2.1km, 배수로 설치 1,5km

○ 상수도부설 1.0km, 차선도색 1,145㎡, 도로시설물 1식

공사기간 : 2015.06.17 ~ 2015.12.19

계약금액 : 772,866,000원

도 급 자 : (주)대찬건설  대표 조 재 생

2		현황 및 처리의견

남측순환로 매표소입구 화단경계석등 교체 (증 7,000천원)

○ 순환로변 경계석 노후, 파손으로 선형불량 및 공원미관 저해

– 매표소입구 화단경계석 및 순환로내 파손경계석 교체 (L=120m)

경계석 파손으로 유격 및 탈락 발생

남측순환로 성곽주변 비탈면 녹지공간조성 (증 7,000천원)

○ 남측순환로 성곽주변(미군부대입구) 비탈면이 장기간 노출등으로훼손되어 토사유실등을 방지하고자 초화류식재(면적300㎡)

성곽주변 비탈면 훼손

남측순환로내 예비관로 설치 (증 3,000천원)

○ 남측순환로 매표소주변 기전배선(CCTV,공원등,케이블등) 설비를

위하여 예비관로(L=8m,맨홀2개소) 확보로 향후 이중굴착 방지

매표소입구 예비관로 설치

팔각광장 진입로 정비 (증 10,000천원)

○ 팔각광장 진입로 노후 및 구배불량으로 물고임 발생등 정비필요

(절삭후 덧씌우기 L=50m)

팔각진입로 절삭후 덧씌우기

3		행정사항

○『현황 및 처리의견』으로 순환로주변 노후 및 파손경계석 교체 및 성곽주변 비탈면 녹지공간 조성으로 공원환경을 개선하고, 매표소앞 예비관로 부설로 기전배관 부설시 이중굴착을 방지하고자 하며, 팔각광장 진입로 정비로 공원환경 개선 및 보행자 불편해소.

○『2015년 남산공원 남측순환로 정비공사』시공자로 하여금 시공지시.

○ 본공사에 소요되는 예산은『남산공원 관광활성화를 위한 환경정비(추경사업)』예산을 활용하여 시행(증 27,000천원)

- 예산과목 : 남산 및 산하공원 시설물 보수정비. 시설비. 끝.