’16년 노후 옥내급수관 교체사업 추진

서부수도사업소

노후 옥내급수관 교체(갱생) 사업이 ’18년도까지 완료 할 수 있도록 특단의 대책을 수립하여 추진하겠음

□ 사업소별 연차별 추진계획

구 분	총 계	기 교 체 (’07~’14)	연차별 계획					제외대상 (재개발 사업인가)
			소 계	’15년	’16년	’17년	’18년
가구수	49,382	17,412	31,970	5,500	7,585	7,585	7,587	3,713
사업비 (백만원)	20,725	5,366	15,359	2,350	4,336	4,336	4,337

※ ’12년 전수조사 이후 재개발 사업인가지역 지원대상 제외 (3,713가구)

□ ’16년 목표달성을 위한 대책

○ 공용배관 교체에 관심이 있는 아파트 조기추진토록 적극 독려

- 마포구 도화우성아파트외 4개 단지 : 3,099세대

○ 미지원가구 개별 우편발송

□ 건의 사항

○ 옥내배관지원 홍보는 옥내배관지원팀 업무에서 분리

- 1일 업무처리내용 : 공사비지원 상담전화(50건 이상), 방문민원 응대(5건),

승인업무 처리(30건 이상) 등으로 현장홍보에 여력이 없음

○ 인력 추가 요청(내근1명, 외근1명)

○ 공사비지원금 실제공사비에 근접토록 인상

- 표준지원공사비 조정(80% → 100%)