투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	서 울 특 별 시 장(기술심사담당관)
(경유)
제목	과다 지급 공사비 환수 관련 검토요청

1. 기술심사담당관-18574(2015.11.2.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 건설공사 계약금액 조정실태 순회점검에서 지적받은 공사건에 대하여 2015.11.13. 과다 지급 공사비를 계약자에게 환수 통보하였으며,

3. 공사 계약자로부터 환수에 대한 이의 신청이 접수되어 보고 드리오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 보라매공원 외 3개소 독서쉼터 설치공사

나. 공사기간 : 2012.12.27.~2013.4.25

다. 환수금액 : 1,610,000원

라. 환수사유 : 산업안전보건관리비 과다 지급(공사안내판 및 안전PE휀스 설치 건)

마. 이의신청(요약)

- 공사안내판에 대한 산업안전보건관리비 지급은 부적절하여 환수 타당함

- 안전 PE 휀스의 경우 작업 근로자를 현장 위험요소(경사지 및 보도 단차에 의한 낙상 등)로 부터 보호하고자 설치한 사항으로 산업안전보건관비로 지급하는 것이 타당함.

붙  임 : 이의신청 공문 및 증빙 사진 각 1부.  끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	김재희		시설팀장	임록화		시설과장	12/01 진병규
협조자
시행	시설과-6116	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1160	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	대시민공개