문서번호	교량보수과-259
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
협조

기성검사(3회)검토보고

한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)

동부도로사업소

(교량보수과)

기성검사(3회) 검토보고

한강교량 일상유지보수 공사(연간단가)

우리 사업소에서 시행중인『한강교량 일상유지보수 공사(연간단가)』와

관련하여 책임단리단으로 부터 접수된 기성검사 조서(3회)에 대한

검토결과를 보고 드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가) - 동부

❍ 공사기간 : 2013. 3. 25 ~ 2014. 2. 28

❍ 도 급 액 : 1,845,000천원

❍ 공사개요 : 한강교량 5개소 유지보수

❍ 도 급 자 : 호풍건설(주)  대표  김 민 자

2		기성현황

❍ 기성내역

계약금액	전회기성	금회기성	누계기성	잔 액
1,845,000,000	1,478,000,000	163,000,000	1,641,000,000	204,000,000

❍ 기성물량

연번	교 량 명	공 사 개 요	비고
1	천호대교	- 신축이음 교체 41m, 조류방지망 설치50㎡
2	잠실대교	- 교량받침 청소 26개소, 상판보수58㎡
3	잠실철교	- 배수관 정비 104m
4	올림픽대교, 천호,잠실대교	한강교량 세척 19,646㎡

３		예산내역

❍ 예산과목

•도시안전실 도로시설과, 교량관리, 한강교량관리, 한강교량

일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

•도시안전실 도로시설과, 교량관리, 교량시설물운영, 한강교량

긴급복구비축자재정비,시설비및부대비,시설비

❍ 예산집행

(단위:천원)

구분	계약금액	전회기성	금회기성	누계기성	잔 액
계	1,845,000	1,478,000	163,000	1,641,000	204,000
한강교량	1,645,000	1,278,000	163,000	1,441,000	204,000
긴급복구	200,000	200,000	-	200,000	0

４		조치계획

❍ 한강교량 일상유지 보수공사 책임감리단으로 부터 접수된 기성

검사조서에 대한 검토결과 이상이 없으므로 관리단속과에 송부

하여 기성 처리고자 함.

따로붙임 : 1. 책임 감리단 기성관련 공문 1부.

2. 2회 기성 내역서 1부.끝.