문서번호	도시철도설비부-12788
결재일자	2015.12.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		차량과장	도시철도설비부장
김기중		황영일	12/15 정찬웅
협 조	신호과장			김영하
	정보통신과장			추경수
	설비계획과장			강재천
	시설전기과장			代박원모
	송변전과장			박동규

우이~신설 우선구간 건축한계 측정 관계자회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12. 9.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

우이~신설 우선구간 건축한계 측정 관계자회의 결과 보고

우이~신설 우선 시공구간(차량기지 ~ L04정거장)에 대한 원활한 시운전 시행을 위해 건축한계 측정 관계자 합동회의 결과를 보고 드림.

회의개요

○ 일    시 : 2015. 12. 9(수)  16:00 ~ 17:30

○ 장    소 : 우이신설경전철(주) 5층 회의실

○ 안    건 : 우선구간 건축한계 측정에 따른 준비사항 등 검토

○ 참 석 자(26명)

- 본  부 : 도철설비부 공사관리관(차량, 송배전, 시설전기, 설비계획, 정보통신과)

도철건축부 공사관리관(공사지원과)

- 감리단 : 책임감리원

- 사업시행자 : 기전공사팀장, 건설사업단

- 시공사 : 시운전팀장, 유탑 ENG, 현대로템(주), 고려개발, 두산건설, 포스코 ICT, 포스코건설, 대우건설

○ 회의전경

회의내용

○ 우선 시운전구간 경계 논의

○ 건축한계 측정 일정 및 분야별 조치사항

○ 시운전상황실 설치 등

회의결과

○ 우선시운전 구간 : 차량기지~L04정거장 후단 300m

○ 건축한계 측정 세부일정

구 분	장 소	측정일
차량기지	검수고 측정	‘15.12.17
	유치선(1,2번) 차량 → 검수고로 이동	‘15.12.18
	유치선(1,2번) 측정	‘15.12.21
	유치선(3~6번) 차량 → 유치선(1,2번) 이동	‘15.12.22
	유치선(3~6번) 측정	‘15.12.23
본선	L01~L04번 정거장 측정 (신설동 방향)	‘15.12.28
	L01~L04번 정거장 측정 (기지 방향)	‘15.12.29
저촉사항 정비	기지~LO4 정거장	‘15.12.30~ ‘16.1.3
시험 열차 최초 투입	기지~LO4 정거장	‘16.01.04

※ 건축한계 측정전 분야별 미비사항 조치필요(붙임)

○ 차량투입전 공사잔재 정리와 물청소 선행

○ 1공구 감리단 상황실을 시운전 상황실로 잠정 확정

○ `16.1.4 우선구간 시운전 일정에 차질이 없도록 사전준비 철저

향후계획

○ `15.12.17 : 건축한계 측정 대비 합동 관계자 회의 개최

붙임 : 1. 검측전 분야별 추진계획 1부

2. 회의 참석자 명단 1부. 끝.