서울특별시 고시 제2015-  호

문정도시개발구역 개발계획변경 및 실시계획변경인가 고시

서울특별시고시 제2007-207호(2007.6.28.)로 도시개발구역지정 및 개발계획 수립, 서울특별시고시 제2008-490호(2008.12.26.)로 개발계획변경, 서울특별시고시 제2009-195호(2009.5.14.)로 도시개발구역 및 개발계획변경, 서울특별시고시 제2009-218호(2009.5.28.)로 개발계획변경 및 실시계획인가, 서울특별시고시 제2011-142호(2011.6.2.)로 개발계획 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2012-271호(2012.10.11.)로 개발계획 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2013-256호(2013.8.1.) 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2013-397호(2013.11.28.) 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2013-464호(2013.12.26.) 개발계획 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2014-104호(2014.3.20.) 개발계획 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2014-107호(2014.3.20.)로 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2014-178호(2014.5.8.)로 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2014-212호(2014.6.5.), 서울특별시고시 제2014-335호(2014.9.25.) 개발계획 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2015-169호(2015.6.18.) 개발계획변경 및 실시계획변경인가,  서울특별시고시 제2015-319호(2015.10.15.)로 실시계획변경인가된 문정도시개발구역의 사업시행기간 연장을 위한 개발계획 변경 및 실시계획변경 인가 신청에 대하여, ｢도시개발법｣ 제4조, 제17조에 따라 개발계획 변경 및 실시계획변경인가하고, 같은 법 제9조 및 제18조에 따라 고시합니다.

2015년 12월  일

서 울 특 별 시 장

1. 문정 도시개발구역 개발계획

가. 도시개발구역의 명칭(변경없음) : 문정도시개발구역

나. 도시개발구역의 위치 및 면적(변경없음)

• 위치 : 서울특별시 송파구 문정동 350번지 일원

• 면적 : 548,239㎡

다. 도시개발구역의 지정목적(변경없음)

• 문정지역 주변의 대규모 개발 계획에 따른 난개발을 방지하고 공익성이 전제된 친환경적 도시개발 도모

• 신성장동력산업 및 공공행정 지원시설을 계획적으로 유치하여 서울시 지속적인 성장을 위한 비즈니스 공간 조성

라. 도시개발사업의 시행자와 그 주된 사무소의 소재지(변경없음)

• 시행자 : 서울특별시 SH공사 사장 변창흠

• 사무소 소재지 : 강남구 개포로 621(강남구 개포동 14-5)

마. 도시개발사업의 시행기간 및 시행방법

• 시행기간(변경)

구 분	기 정	변 경	비 고
시행기간	2007.06.28 ~ 2015.12.31	2007.06.28 ~ 2016.12.31

- 변경사유 : 유보지 용도 변경 검토, 택지조성 및 기반시설(컬쳐밸리 등) 공사 미완료에 따른 사업기간 연장 필요

• 시행방법(변경없음) : 수용 또는 사용방식

바. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경없음) : 생략

사. 토지등의 세목 및 그 소유자에 관한 사항(변경없음) : 생략

아. 도시개발구역 밖의 지역에서 도시개발구역의 이용에 제공되는 기반시설(변경없음) : 해당사항 없음

자. 도시관리계획의 수립 또는 변경에 관한 사항(변경없음) : 생략

2. 문정 도시개발구역 실시계획

가. 사업의 명칭(변경없음) : 문정도시개발구역

나. 사업의 목적(변경없음)

• 문정지역 주변의 대규모 개발 계획에 따른 난개발을 방지하고 공익성이 전제된 친환경적 도시개발 도모

• 신성장동력산업 및 공공행정 지원시설을 계획적으로 유치하여 서울시 지속적인 성장을 위한 비즈니스 공간 조성

다. 도시개발구역의 위치 및 면적(변경없음)

• 위치 : 서울특별시 송파구 문정동 350번지 일원

• 면적 : 548,239㎡

라. 시행자(변경없음)

• 서울특별시 SH공사 사장 변창흠

마. 시행기간

• 시행기간 변경

구 분	기 정	변 경	비 고
시행기간	2007.06.28 ~ 2015.12.31	2007.06.28 ~ 2016.12.31

- 변경사유 : 유보지 용도 변경 검토, 택지조성 및 기반시설(컬쳐밸리 등) 공사 미완료에 따른 사업기간 연장 필요

바. 시행방식(변경없음)

• 수용 또는 사용방식

사. 도시관리계획(지구단위계획 포함)의 결정 내용(변경없음) : 생략

아. 무상귀속 및 대체에 관한 공공시설물 및 토지 등의 조서(변경없음) : 생략

자. 도시개발법 제19조에 따라 실시계획의 고시로 의제되는 인·허가 등의 고시 또는 공고사항(변경없음) : 해당사항 없음

차. 인가된 실시계획에 관한 도서의 공람기간 및 공람장소

• 공람기간 : 고시일로부터 14일간 공람

• 공람장소 - 서울특별시 도시활성화과 (☎02)2133-4641)

- 송파구청 도시계획과 (☎02)2147-2980)

- SH공사 개발계획2팀 (☎02)3410-7400)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 열람.