서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기간 연기의뢰(보완)

1. 역사문화재과-10835(2015.12.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인「역사문화유적 기념표석 제작 및 설치」사업에 대하여 다음과 같이 보완하여 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 역사문화유적 기념표석 제작 및 설치

나. 계 약 자 : ㈜샤이니스 (대표 이시영)

다. 계약금액 : 금72,883,000원(금칠천이백팔십팔만삼천원)

라. 준공기한 연기

- 당  초 : 2015.11.11.~ 2015.12.21

- 변  경 : 2015.11.11.~ 2016.04.30

마. 예산과목 : 역사문화재과, 역사문화유산의 계승발전, 문화재 보존복원,

문화유적지 표석설치, 시설비(401-01)

바. 사고이월

계약금액	선금급 지출액	사고이월액	비 고
72,883,000원	36,440,000원	36,443,000원

※ 예산담당관과 사고이월 협의완료

붙 임 1. 준공기간 연기 검토 보고서 1부

2. 준공기간 연기조치 의뢰서  1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	역사문화재과장
주무관	김용수		세계유산등재팀장	강해라		역사문화재과장	12/16 代김규리
협조자
시행	역사문화재과-10988	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 1동 4층(서소문동)	/
전화	02-2133-2644	/전송	02-768-8873	/	yskim88@seoul.go.kr	/	대시민공개