서울특별시고시 제2015-404호

강일 도시개발구역 개발계획변경 및 실시계획변경인가 고시

서울특별시고시 제2003-341호(2003.11.10)로 도시개발구역지정 및 개발계획수립 되고, 서울특별시고시 제2004-429호(2004.12.27)로 개발계획변경 및 실시계획인가 되었으며, 서울특별시고시 제2006-440호(2006.12.27)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2007-486호(2007.12.27)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2008-208호(2008.6.19)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2009-490호(2009.12.10)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2010-402호(2010.11.11)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2011-159호(2011.6.23)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2012-332호(2012.12.13)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2013-167호(2013.5.30)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2013-463호(2013.12.26.)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2014-103호(2014.03.20.)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2014-465호(2014.12.26.)로 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 서울특별시고시 제2015-151호(2015.05.28.)로 고시된「강일도시개발구역」의 개발계획변경 및 실시계획변경 인가신청에 대하여, 「도시개발법」 제4조, 제17조에 따라 개발계획변경 및 실시계획변경인가하고, 같은 법 제9조 및 제18조에 따라 따로붙임과 같이 고시하고자합니다.

2015년 12월  일

서 울 특 별 시 장

1. 강일도시개발구역 개발계획

가. 도시개발구역의 명칭 (변경없음) : 강일도시개발구역

나. 도시개발구역의 위치 및 면적 (변경없음)

구 역 명	위 치	면 적(㎡)	비고
강일도시개발구역	서울특별시 강동구 강일동 360번지 일원	895,637.6

다. 도시개발구역의 지정목적 (변경없음)

․ 쾌적한 도시환경의 조성과 공공복리의 증진에 기여하고, 계획적이고 체계적인 도시개발을 통한 국민임대주택건설에 필요한 택지의 효율적인 개발공급

라. 도시개발사업의 시행자와 그 주된 사무소의 소재지 (변경없음)

․   명         칭 : SH공사

․   주         소 : 서울특별시 강남구 개포로 621

․   대표자의  성명 : 변 종 흠

마. 도시개발사업의 시행기간 및 시행방법 (변경)

1) 사업시행 기간 : 변경

구 분	기 정	변 경	비고
시행기간	2003.11.10～2015.12.31	2003.11.10～2016.12.31

- 변경사유 : 존치부지의 보상협의 지연, 미매각용지의 용도변경 및 미조성구역의 조성기간 필요 등

2) 사업시행 방식 : 변경없음

바. 토지이용에 관한 계획 (변경없음) : 생략

사. 토지등의 세목 및 그 소유자에 관한 사항 (변경없음) : 생략

아. 도시관리계획에 관한 사항 (변경없음) : 생략

자. 도시관리계획(일단의주택지조성사업)지구 변경(해제)결정 (변경없음) : 생략

2. 강일도시개발구역 실시계획

가. 도시개발구역의 명칭 (변경없음) : 강일도시개발구역

나. 사업의 목적 (변경없음)

․ 쾌적한 도시환경의 조성과 공공복리의 증진에 기여하고, 계획적이고 체계적인 도시개발을 통한 국민임대주택건설에 필요한 택지의 효율적인 개발공급

다. 도시개발구역의 위치 및 면적 (변경없음)

구 역 명	위 치	면 적(㎡)	비고
강일도시개발구역	서울특별시 강동구 강일동 360번지 일원	895,637.6

라. 시행자 (변경없음)

․ 명         칭 : SH공사

․ 주         소 : 서울특별시 강남구 개포로 621

․ 대표자의 성명 : 변 창 흠

마. 시행기간 (변경)

1) 사업시행 기간 : 변경

구 분	기 정	변 경	비고
시행기간	2003.11.10～2015.12.31	2003.11.10～2016.12.31

- 변경사유 : 존치부지의 보상협의 지연, 미매각용지의 용도변경 및 미조성구역의 조성기간 필요 등

2) 사업시행 방식 : 변경없음

바. 시행방식 (변경없음) : 수용 또는 사용방식

사. 도시관리계획의 결정내용 (변경없음) : 생략

아. 무상귀속 및 대체에 관한 공공시설물 및 토지 등의 조서 (변경없음):생략

자. 실시계획의 고시로 의제되는 인․허가 등의 고시 또는 공고사항 : 관계기관(부서)과 사전 협의사항 이행 (변경없음) : 생략

차. 도시관리계획 결정도(지형도면)(변경없음) : 생략

카. 그 밖의 세부 도시관리계획 도면 및 조서 (변경없음) : 생략

타. 구역지정변경 및 개발계획변경, 실시계획승인 도서의 공람기간 및 장소

․  공람기간 : 14일 이상

․  공람장소 - 서울특별시 도시활성화과(☏ 02)2133-4642)

- 강동구청 도시계획과(☏ 02)3425-6024)

- SH공사 개발계획1팀(☏ 02)3410-7386)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 열람.