문서번호	시설보수과-450
결재일자	2014.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
김종성		신동헌	01/17 김만수
협 조
	주무관			김지환

남산1호터널외 6개소 정밀점검용역

자문회의 및 최종보고 개최계획

2014. 1

서부도로사업소

(시설보수과)

자문회의 및 최종보고 개최계획

(남산1호터널외 6개소 정밀점검용역)

우리 사업소에서 시행하고 있는 「남산1호터널외 6개소 정밀점검용역」 과 관련하여 자문회의 및 최종보고를 개최하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

용역개요

용 역 명 : 남산1호터널외 6개소 정밀점검용역

용역기간 : ‘13. 5. 27 ~ ’14. 1. 29

용역금액 : 143백만원

용 역 사 : BNT엔지니어링

대상 시설물 현황

구 분		구조형식	연 장	폭	준공년도	비 고
터널	남산1호	ARC	(구)1,530m (신)1,532m	9~10m	(구)1970 (신)1994
	남산2호	ARC	1,620m	10.1m	2001
	남산3호	ARC	1,260m	18.4m	1978
	금화	AR	555m	18m	1979
지하차도	증산	라멘 BOX형	575m	27.5m	1991
	남산2호터널 입구	철근 CON’C	309m	4m	1978
	이태원	철근 CON’C	350m	15.3m	1977

추진현황 (‘14.1월 현재 공정률 85%)

‘13.06.04 : 용역계약 및 착수

‘13.06.27 : 용역 착수보고

‘13.10.18 : 용역사, 감독 합동점검

‘13.11.11 : 중간보고

남산1호터널 하행선 공동구 점검	남산3호터널 갱구부 사면 점검

자문회의 및 최종보고 개최

일    시 : ‘14. 1. 24(금) 14:00 ~ 16:00

장    소 : 서부도로사업소 2층 회의실

참 석 자

- 사 업 소 : 소장, 시설보수과장, 용역감독외 4명

- 용 역 사 : 책임기술자외 2명

- 자문위원 : 유원이엔씨 박훈규(구조기술사), 동해기술공사 남상진(구조기술사)

주요 보고내용 및 자문사항

- 시설물 현황 및 용역과업 추진사항 보고

- 기 점검 및 진단결과 비교분석

- 시설물 외관 및 내구성조사 검토 분석결과, 보수방안 등

향후계획

‘14. 1. 24 : 자문회의 및 최종보고 결과를 반영하여 보고서 수록

‘14. 1. 29 : 최종 검토 및 용역준공.

붙 임 : 자문위원 검토의견서 1부.  끝