핵심사업 추진실적

○ 사업명 : 건설공사 품질관리 수준향상

추진월	추진계획(건)	추진 계획률(%)	추진실적(건)	추진 실적률(%)
1월	2015년도 공사현장 점검대상 조사 건설자재 품질시험 실시 95건 2015년도 도로포장상태 조사분석현황 조사 계 : 95건	2%	2015년도 공사현장 점검대상 조사 건설자재 품질시험 실시 254건 2015년도 도로포장상태 조사분석 현황 조사 계 : 254건	5.3%
2월	2015년도 현장점검대상 품질점검 계획수립 건설자재 품질시험 실시 238건 2014년도 도로포장상태 조사분석 추진 실적 보고 계 : 238건	5%	2015년도 현장점검대상 품질점검 계획수립 건설자재 품질시험 실시 444건 2014년도 도로포장상태 조사분석 추진 실적 보고 계 : 444건	9.3%
3월	건설공사 품질점검 실시 30건 건설자재 품질시험 실시 490건 2015년도 도로포장상태 조사분석 계획수립 및 조사 분석 계 : 520건	10%	건설공사 품질점검 실시 39건 건설자재 품질시험 실시 676건 2015년도 도로포장상태 조사분석 계획 수립 및 조사 분석 계 : 715건	15.0%
4월	건설공사 품질점검 실시 70건 건설자재 품질시험 실시 881건 도로포장상태 조사분석 1건	20%	건설공사 품질점검 실시 84건 건설자재 품질시험 실시 1,019건 도로포장상태 조사분석 1건 계1,104건	23.2%
5월	건설공사 품질점검 실시 106건 건설자재 품질시험 실시 1,305건 도로포장상태 조사분석 17건	30%	건설공사 품질점검 실시 126건 건설자재 품질시험 실시 1,382건 도로포장상태 조사분석 17건 계1,525건	32.0%
6월	건설공사 품질점검 실시 140건 건설자재 품질시험 실시 1,760건 도로포장상태 조사분석 29건 계1,929건	40%	건설공사 품질점검 실시 177건 건설자재 품질시험 실시 1,889건 도로포장상태 조사분석 35건 계2,101건	44.1%
7월	건설공사 품질점검 실시 181건 건설자재 품질시험 실시 2,160건 도로포장상태 조사분석 38	50%	건설공사 품질점검 실시 223건 건설자재 품질시험 실시 2,459건 도로포장상태 조사분석 58건 계2,740건	57.6
8월	건설공사 품질점검 실시 211건 건설자재 품질시험 실시 2,597건 도로포장상태 조사분석 47건	60%	건설공사 품질점검 실시264건 건설자재 품질시험 실시 2,989건 도로포장상태 조사분석 75건 계3,328건	69.9
9월	건설공사 품질점검 실시 255건 건설자재 품질시험 실시 3,040건 도로포장상태 조사분석 58건 계3,353건	70%	건설공사 품질점검 실시 303건 건설자재 품질시험 실시 3,456건 도로포장상태 조사분석 104건 계3,863건	81.1
10월	건설자공사 품질점검 실시 281건 건설자재 품질시험 실시 3,459건 도로포장상태 조사분석 67건	80%	건설공사 품질점검 실시 350건 건설자재 품질시험 실시 3,893건 도로포장상태 조사분석 121건 계4,364건	91.7
11월	건설공사 품질점검 실시 316건 건설자재 품질시험 실시 3,891건 도로포장상태 조사분석 76건	90%	건설공사 품질점검 실시 389건 건설자재 품질시험 실시 4,648건 도로포장상태 조사분석 141건 계5,178건	108.8
12월	건설공사 품질점검 실시 351건 건설자재 품질시험 실시 4,320건 도로포장상태 조사분석 87건 계4,758건	100%	건설공사 품질점검 실시 410건 건설자재 품질시험 실시 5,298건 도로포장상태 조사분석 170건 계5,878건	123.5