문서번호	토목부-673
결재일자	2016.1.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	01/12 김영수
협조

공사장 가림벽 시정홍보물 부착 검토보고

- 율곡로(창경궁 앞) 도로구조개선공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	시민소통담당관	가림벽 시안 협의	걷는도시 서울 이미지 제안	22백만원

2016. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

공사장 가림벽 시정홍보물 부착 검토보고

건설현장 이미지 개선을 위해 ‘율곡로(창경궁 앞)도로구조개선’ 공사장 가림벽 시정홍보물 설치에 따른 검토사항을 보고드림.

※ 율곡감 2016-06호(’16.1.11.) : 공사장 가림벽 시정홍보물 부착 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사

○ 규    모 : 도로확장 폭 4→6차로 연장 800m(지하차도 320m)

○ 계 약 액 : 30,633백만원(4차 3,474백만원)

○ 공사기간 : ’10.10.11. ∼ ’17.12.31.(4차 ’15.3.2.∼’16.4. 29.)

○ 시공사 및 감리단 : 북일종합건설외2개사, 한국해외기술공사외1개사

□ 감리단 보고내용

○ 검토배경 및 경위

- 율곡로 건설공사장내 설치된 공사장 가림벽(가설휀스)을 활용한 시정홍보 디자인 시안 협의가 완료됨에 따라 건설현장 이미지 개선을 위해 시정홍보물 부착이 필요함.

‣ ’13.06.05. : 건설현장 이미지 개선을 위한 친화공간 조성 추진 방침수립(본부)

‣ ’15.12.30. : 공사장 가림벽 시정홍보 디자인 시안 요청(본부→시민소통담당관)

‣ ’15.12.31. : 공사장 가림벽 디자인 시안 회신(시민소통담당관→본부)

○ 공사장 가림벽 설치규모

- 위  치 : 창덕궁 → 원남동사거리

- 규  모 : H=5.0m, L = 373m

○ 시정홍보 디자인 시안(시민소통담당관) - ‘걷는 도시 서울’

○ 소요 비용

(단위 : 천원)

공 종	단위	공 사 비			비고
		당 초	변 경	증 · 감
공사장 가림벽 제작 및 부착	1식	-	19,955	증)19,955
부가세		-	1,995	증)1,995
도급비		-	21,950	증)21,950	협의율 적용시 (84.74%)

○ 감리단 검토의견

- 통행량이 많은 율곡로 공사장 가설휀스는 교체하였으나 디자인 시안 미확정으로 장기 노출에 따른 도시미관을 저해하는바 시민소통담당관에서 통보된 시정홍보 디자인 시안을 제작·부착하여 공사장 이미지를 개선하는 것이 바람직함.

□ 조치의견

○ 상기 감리단 보고내용과 같이 ‘공사장 가림벽 시정홍보물 디자인 부착’ 실정보고 건에 대해 건설현장 이미지 개선을 위해 승인하고, 이에 소요되는 비용은 추후 설계변경시 반영토록 조치코자 함.

- 공사장 가림벽 시정홍보물 부착 : 증) 21,950천원

붙  임 : 감리 검토의견서 및 관련공문 각 1 부.  끝.