국고보조금 교부신청서
(1)신청자	주 소	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동
	성 명	서울특별시 도시기반시설본부
(2) 보조금의 사용		○ 목적 : 지하철 9호선 2-1, 2-2단계 건설
		○ 내용 : 공사비, 보상비, 시설부대비 등
(3) 보 조 금 신청금액		36,770천원			(4)입금계좌번호			1006-701-291354
(5) 소요경비 및 재원조달 내역		(단위:백만원)
			재원조달(수 입)				소요경비(지 출)
			○ 국고보조금			36,770	○ 공사비		69,760
			○ 시 비			42,850	○ 보상비		7000
			○ 국내차입금				○ 시설부대비		2,860
			계			79,620	계		79,620
(6) 신청금액 사용계획		○ 서울 지하철 9호선 2-1, 2-2단계 건설비 : 36,770천원
보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제16조의 규정에 의거 상기와 같이 국고보조금을 교부신청 합니다. 2014년 1월 일 서 울 특 별 시 장 국토교통부장관 귀하

2014 국고보조 사업계획

1. 사업 추진현황

(단위:백만원)

사업명	구 간	연장(㎞)	총사업비	‘13까지 투 자	2014년 소요액	현단계
계		13.6	1,727,824 (691,130)	814,975 (356,185)	247,900 (105,059)
서울지하철 9호선 건설 2-1단계	논현동(차병원 앞) ~ 잠실 종합운동장	4.5	482,895 (193,158)	426,491 (186,905)	43,900 (6,259) 채10,000	공사
서울지하철 9호선 건설 2-2단계	잠실 종합운동장 ~ 둔촌동 보훈병원	9.1	1,244,929 (497,972)	388,484 (169,280)	204,000 (98,800) 채70,000	공사

※ (  )는 국고보조금

2. 자금수급 계획

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
서울지하철 9호선 건설 2-1단계	계	43,900	13,480	13,481	9,408	7,531
	○ 국고보조금	6,259	2,190	2,191	1,878	-
	○ 시 비	37,641	11,290	11,290	7,530	7,531
	○ 국내차입금	-	-	-	-	-
서울지하철 9호선 건설 2-2단계	계	204,000	66,140	61,560	55,780	20,520
	○ 국고보조금	98,800	34,580	30,000	24,220	10,000
	○ 시 비	105,200	31,560	31,560	31,560	10,520
	○ 국내차입금	-	-	-	-	-

3. 사업추진 계획

○ 9호선 2-1단계 '14년 목표 공정률 100.0% 달성('13년말 공정률 89.5%)

- 토목분야 : 출입구 등 부대공사 및 복구공사 추진중

- 건축분야 : 정거장 블록, 석공사 및 금속공사 추진중

- 궤도분야 : 제표 설치공사 추진중

- 시스템분야 : 전차선, 송변전, 신호통신 케이블 설치중

○ 9호선 2-2단계 '14년 목표 공정률 50.9% 달성('13년말 공정률 33.6%)

- 토목분야 : 토공․가시설 및 구조물 공사중

※ 기타분야 투입시기 미도래

4. 자금 집행현황 : 집행내역 없음

구 분		'14 예산	전년이월	예산현액	국고보조금 교부 및 집행(누계)
					1/4	2/4	3/4	4/4
교부	< 계 >
	▪국 고
	▪지방비
집행	< 계 >
	▪국 고
	▪지방비
집행률	< 계 >
	▪국 고
	▪지방비

5. 국고보조금 교부요청 현황

(단위 : 백만원)

구분	국비	기교부		금회교부	누 계	교부잔액
		교부일자	교부액
계	105,059		0	36,770	36,770	68,289
9호선 2-1단계	6,259		0	2,190	2,190	4,069
9호선 2-2단계	34,580		0	34,580	34,580	64,220