문서번호	어르신복지과-1842
결재일자	2016.2.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		어르신시설팀장	어르신복지과장
서세환		손수달	02/01 박기용
협조

『서남권 돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(건축)』

준공정산 설계변경 보고(2차 계약변경)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

어르신복지과

『 서남권 돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(건축)』

준공정산 설계변경 보고(2차 계약변경)

서남권 돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(건축)와 관련하여 준공에 따른 계약물량 조정과 4대보험료 등을 정산코자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서남권 어르신돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(건축)

○ 공사위치 : 구로구 구로동 98-5(구, 영등포수도사업소 청사)

○ 공사규모 : 213.88㎡(지하층 97.3㎡, 4층 116.58㎡)

○ 계약업체 : 대진건설 대표 조규진

○ 계약기간 : ‘15.12.17 ~ ’16.1.27

○ 계약금액 : 금91,243,900원

□ 변경내용

○ 변경사유

- 본 공사는 서남권 어르신돌봄종사자종합지원센터 설치를 위한 개보수공사로써 계약물량 조정 및 4대 보험료 등에 대하여 정산하고자 함.

○ 정산금액 : 91,243,900(감 1,850,100원)

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증감액
총공사비		93,094,000	91,243,900	-1,850,100
도급비	공급가액	84,630,910	82,949,000	-1,681,910
	부가가치세	8,463,090	8,294,900	-168,190
	계	93,094,000	91,243,900	-1,850,100

□ 내역서, 국민건강보험료 등 제경비 정산

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증감액
내역	건축공사	65,049,055	65,064,074	15,019
경비	기계경비	55,408	55,408	0
	산재보험료	1,068,420	1,074,950	6,530
	고용보험료	244,612	246,107	1,495
	연금보험료	714,410	0	-714,410
	건강보험료	487,750	0	-487,750
	노인장기요양보험료	31,947	0	-31,947
	산업안전보건관리비	2,090,943	2,090,943	0
	환경보전비	187,925	0	-187,925
	기타경비	3,382,550	3,383,331	781
	소계	8,263,965	6,850,739	-1,413,226
기타	이윤, 부가세 등	19,780,980	19,329,087	-451,893
	계	93,094,000	91,243,900	-1,850,100

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 당초 계약 내역변경과 4대 보험료를 정산코자 하며,

○ 계약 변경 후 공사준공을 시행하여 청사 유지관리업무에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 보험료 증빙자료 1부.  끝.