문서번호	총무과-1859
결재일자	2016.2.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		박병현	02/04 이상국
협 조
	기획예산과장			김건태
	주무관			심옥경
	주무관			임봉순

본부청사 옥상 파라펫

구조안전진단 용역 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				8백만원

2016. 02

한강사업본부

총무부

본부청사 옥상 파라펫 구조안전진단 용역 계획

지구온난화 방지를 위한 원전 하나 줄이기 사업 일환으로 본부 옥상 파라펫 벽면에 태양광 발전설비 설치를 위하여 옥상 파라펫 벽체에 대하여 구조안전진단 용역을 시행하고자 함

■ 진단기간 : ‘16. 2. 1 ~ ‘16. 2. 29

■ 안전진단 내용

❍ 사유

- 옥상 파라펫 벽면에 태양광 발전 모듈 구조틀 설치 가능 여부

- 태양광 발전설비 설치체 따른 본부청사 건축물 구조안전 여부

❍ 대상 : 본부청사 옥상 파라펫

- 규모 : 철근콘크리트 벽체(150mm) / 높이 2.4m, 길이 84.0m

■ 소요예산 : 7,700천원(부가가치세 포함)

❍ 예산과목 : 한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비

■ 추진방법 : 수의계약

■ 추진계획

❍ 2016. 2. 1 ~ 2. 5 : 방침 및 기술용역타당성심사 의뢰

❍ 2016. 2.11 ~ 2.19 : 기술용역타당성심사(기술심사담당관)

❍ 2016. 2.22 ~ 2.26 : 용역발주 및 계약

❍ 2016. 2.29 ~ 3.11 : 안전진단 진행

❍ 2016. 3.14 : 용역 준공(예정)

붙임 : 내역서