정릉천2복개 구조물 보수공사

□ 사업부서 : 북부도로사업소(시설보수과)        과장 : 정재현(944-5405)

담당 : 김영원(944-5455)

□ 사업개요

○ 시설물 현황

시설물명	종별	상태 등급	위 치	준공일	규 모		구조 형식
					폭	연장
정릉천2복개	1종	B	정릉4동 406(대동아) ~ 월곡동 90(전화국)	1989	20.4m~ 56.5m	2,466m	RC-T빔

○ 사업규모

교면포장 562㎡, 교면방수 565㎡, 아스팔트 균열보수 959m, 신축이음교체

112m, 단면보수 2,234㎡, 단면보수(철근방청) 535㎡,표면보수 1,397㎡, 균

열보수(건식) 344m, 균열보수(습식) 63m, 바닥콘크리트 재타설 182㎥, 물

끊기공 설치 1,190m

○ 사 업 비 : 1,478,614천원

○ 사업기간 : 2016. 4 ~ 2016. 12

□ 추진현황 및 향후계획

○ 2015. 5. ~ 2015. 12. : 2015년 정밀안전진단용역 시행

○ 2016. 1. 22 : 실시설계용역 타당성심사 완료

○ 2016. 3 ~ 6   : 실시설계시행

○ 2016. 7        : 공사착공

○ 2015. 8 ~ 11  : 공사시행 및 준공

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목	합 계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
합 계	1,478,614	0	49,379	1,429,235
시 설 비	1,478,614	0	49,379	1,429,235	실시설계 내역서

□ 배정사유

○ 실시설계 타당성심사가 완료되어 조속한 설계발주 및 시행 필요

○  실시설계용역에 따른 복개구조물 보수공사로 시설물의 내구성 증진 및 안전성 확보