문서번호	시설보수과-3240
결재일자	2013.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

2013년 도로시설물 하반기 정기점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 08

성동도로사업소

2013년 도로시설물 하반기 정기점검 시행 계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 도로시설물에 대하여 『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의거 ‘13년 하반기 시설물 정기점검 계획을 수립 시행하여 시설물의 사용성 및 기능을 유지하고 안전사고 예방에 철저을 기하고자 함.

Ⅰ

관련법령

시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령 제6조 (안전점검의 실시)

⇒ 2011.1.1시행[국토해양부령 제278호 2010.8.31 일부개정]

• 정기점검 기준 : 반기에 1회 이상으로 변경

서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

2013년 도로시설물 안전점검 추진계획 통보- 도로시설관리과-436(2013.01.10)

2013년 도로시설물 안전점검 추진계획- 시설보수과-226(2013.01.18)

Ⅱ

점검대상

점검 대상 시설물(시설보수과- 55개소)                            (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	55	28	9			3	12	3
1종	9	5	1					3
2종	16	6	2			3	5
법정외	30	17	6				7

※ 청계천복계(좌안, 우안)은 관리주체인 북부, 서부도로사업소와 협의 해당구역 점검보고

담당별 안전점검 대상-(2인1조 일제점검)

구분	관리책임자		관 리 시 설 물 사업소(55개 시설)
	직급	성 명	1종	2종	법정외
			9개소	17개소	29개소
시설보수과	정6급 부7급	이 앙 식 최 영 묵 (14개시설)	응봉교 청계천복개도로(좌안)	군자교, 성동교, 장안교 ,장평교 금호터널 능산지하차도	면목교, 전농교 용마고가차도 답십리굴다리지하차도 중랑교지하차도, 신내지하차도
	정6급 부9급	박 일 연 진 하 영 (14개시설)	워커힐고가차도 면목천복개도로	제2마장교 , 이문고가차도 옥수터널, 무지개터널 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도	신내교, 안암교, 종암교 서울숲다리교 신답고가차도, 청량1고가차도
	정7급 부6급	최 영 묵 이 앙 식 (14개시설)	이화교 비우당교 청계천복개도로(우안)	중랑교 응봉지하차도 신답지하차도	동진교, 용두4교, 용두교 제1제기교, 제2제기교 청량2고가차도, 동일로지하차도 군자교동측지하차도
	정9급 부6급	진 하 영 박 일 연 (13개시설)	성북천교 용비교	영동대교북단고가차도	고산자교,먹골교, 무학교 정릉천교, 황학교, 두물다리(청) 뚝섬고가차도, 행당고가차도 성동지하차도, 마장지하차도

Ⅲ

추진계획

점검기간

• 2013. 9. 3 ~ 12. 31(4개월)

점검일

• 매주 화, 금요일

※ 점검일에 불가피한 사정이 있을 경우 점검일 조정 가능(전일, 익일 등)

점검자

• 사업소장, 시설보수과장

• 시설물 담당공무원 4명

점검일정 및 점검책임자 지정

• 점검일정 : 55개시설 86일 점검

• 시설물별 점검일정 및 점검책임자 지정 : 『따로붙임』

점검방법

• 시설물 담당직원(2인1조)이 현장에 출장하여 안전점검 실시

- 소장, 과장은 수시 순찰 안전점검 시행

- C등급 시설물(첨부) 안전점검시 외부전문가 활용 합동점검 (필요시)

• 육안점검을 원칙으로 간단한 점검기구 활용하여 점검

• 점검구간에 대하여 정밀점검보고서 검토 및 이전 점검시 지적사항에 대해 확인 후

현장점검 실시

• 점검시 확인된 지속관찰 대상은 손상 진행성 여부 등을 점검시 마다 주의깊이

재확인하여 위험 요인을 사전파악하고 적절한 안전대책 강구

Ⅳ

지적사항 조치

지적사항 조치

• 경미한사항은 사업소 직영반 활용 즉시 보수

• 구조물 손상 긴급 및 단순 보수사항은 일상유지보수공사로 즉시 보수

• 보수예산 수반 및 구조적사항은 별도 보수․보강 계획 수립 시행

• 지적사항에 대한 조치결과는 점검후 안전점검 보고서 및 지적사항 조치결과 보고서식에

의거 작성하여 보고 후 일상유지 담당에게 작업지시 의뢰

• 시설물 담당자는 정기점검 지적사항 대해 조치완료 후 결과보고

Ⅴ

행정사항

점검결과 조치

• 점검완료후 시설물 담당자는 점검결과 보고서를 작성 결재 득한 후

『시설물정보관리종합시스템(FMS) 및 도로관리시스템』입력

• 하반기 정기점검 조치결과 종합보고

• 정기점검 결과보고(종합) 후 도로시설과에 제출

따로붙임 : 1) 2013년 하반기 시설물 정기점검 계획 1부.

2) 2013년 안전점검추진계획 1부. 끝.