서울특별시고시 제2016-  호

도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경) 고시

1. 서울특별시고시 제2009-151호(2009.4.9.)로 도시계획시설(도로)결정, 은평구고시 제2012-68호 (2012.11.15.)로 도시관리계획(용도지구:미관지구, 도시계획시설:도로․학교)변경 결정 및 지형도면 고시, 서울특별시공고 제2013-80호(2013.01.24.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획을 위한 열람 공고, 서울특별시고시 제2013-49호(2013.02.21.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시, 서울특별시고시 제2016-11호(2016.01.14.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경 고시된 『신사사거리~고양시계간 도로개설공사』에 대하여

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 제91조, 같은법 시행령 제97조 및 제100조 규정에 의거 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경) 고시합니다.

2016년 3월  일                    서 울 특 별 시 장

가. 사업시행지의 위치 : 은평구 신사동 산 48-2~ 산39-11 (변경없음)

나. 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

1) 종  류 : 도시계획시설(도로)사업

2) 명  칭 : 신사사거리~고양시계간 도로개설공사

다. 사업의 규모 : 폭 4차로,  연장 366m (변경없음)

라. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

1) 성 명 : 서울특별시장(서울특별시 도시기반시설본부장)

2) 주 소 : 서울시 중구 세종대로 110

마. 사업의 착수예정일 및 준공예정일

1) 당 초 : 실시계획고시일로부터 2016년02월26일까지

2) 변 경 : 실시계획고시일로부터 2016년05월26일까지

바. 수용 또는 사용할 토지 또는 물건의 소재지 ․ 지번 ․ 지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리 명세 및 그 소유자 ․ 권리자의 성명 ․ 주소 : 게재생략 (변경없음)

사. 기타 자세한 사항은 도로계획과(☎02-2133-8089) 및 서울특별시 도시기반시설본부 토목부(☎02-3708-2577)로 문의하시기 바랍니다.