			도시재생본부

			재생정책과

1. 서울형 도시재생 모니터링 평가체계 구축 및 운영

재생정책과 (2133-8633)	과장 : 여 장 권 / 팀장 : 한 휘 진 / 담당 : 홍 건 표 ․ 조 민 선

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	서울형 도시재생의 기반 확충
	과․담당관	도시재생사업 지원체계 구축
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		모니터링·평가 체계 및 운영 추진율	-	-	-	80%	20%
업무 프로세스		① 용역계약(`16.3.) → ② 서울형 도시재생 모니터링·평가 방안 수립(`16.3.) → ③ 사업현황 모니터링(`16.4.) → ④ 공유 워크숍 (`16.6.) → ⑤ 패널 (포커스그룹) 인터뷰(`16.9.) → ⑥ 도시재생 지표 마련(‘16.12.) → ⑦ 도시재생 지역 평가(`17.3.)
협력체계 (파트너십)	내 부	활성화지역 내 협업 필요(실․본부․국) 관련부서
	자치구	활성화지역이 위치한 자치구
	외 부	국토교통부, 서울연구원, SH공사 등

□ 사업목적

○ 서울형 도시재생 모니터링·평가 체계 구축 및 운영을 통한 성공적인 도시재생사업 지원

□ 사업개요

○ 서울형 도시재생 모니터링·평가 체계 구축 및 운영

- 사업 추진현황 모니터링

- 공유 워크숍을 통한 정성적 분석 및 사례 확산

- 패널(포커스 그룹) 인터뷰를 통한 지역과의 소통 강화

- 도시재생 지표 마련을 통한 활성화 계획 수립 및 조정 지원

- 도시재생사업 평가를 통한 활성화 계획 진단 및 환류

○ 추진방법 : 학술용역(도시재생지원기관인 서울연구원에서 수행)

○ 사업기간 : ’16. 3. ~ ’17. 3.

- ’16. 3.~’16. 12. : 서울형 모티터링 체계 마련 및 운영

- ’17. 1.~’17. 3. : 서울형 도시활성화계획 평가

○ 총사업비 : 379,364천원

- 2016년 예산 : 379,364천원

○ 추진계획

- `16. 02.    : 서울형 도시재생 모니터링·평가 체계 구축 및 운영 용역 발주

- `16. 03.    : 용역 계약

- `16. 04.    : 사업 추진현황 모니터링

- `16. 06.    : 공유 워크숍

- `16. 09.    : 패널(포커스그룹) 인터뷰

- `16. 12.    : 도시재생 활성화 지표 마련

- `17. 03.    : 도시재생사업 평가

□ 홍보계획

○ 지역주민, 도시재생지원센터 및 사업주체 등 전문가 참여 토론회 개최

○ 공유 워크숍을 통한 사례 확산 및 언론 보도자료 제공

□ 세부추진계획                                           (단위 : %)

지표별	성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI	서울형 도시재생 모티터링•평가 체계 구축 및 운영	80	10	35	60	80

○ 사업비 집행계획(2016~2017년) : 379백만원 (시비 379백만원)   (단위 : 백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	‘15. 2/4	3/4	4/4	‘16. 1/4
1	서울형 도시재생 모티터링•평가 체계 구축 및 운영	379	30	20	29	300

□ 월별 추진계획

월별	추진계획	추진계획률(%)
3월	서울형 도시재생 모티터링•평가 체계 구축 및 운영 용역 계약 및 방안 수립	10
4월	사업추진현황 모니터링	15
5월	지역별 현장 모니터링	25
6월	공유 워크숍	35
7월	중간 보고	40
8월	지역별 현장 모니터링	50
9월	패널(포커스 그룹) 인터뷰	60
10월	사업추진현황 모니터링	70
11월	공유 워크숍	75
12월	도시재생 지표 마련	80

2. 도시재생 종합정보 포털 구축

재생정책과 (2133-8625)	과장 : 여 장 권 / 팀장 : 백 광 진 / 담당 : 김 보 경

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	서울형 도시재생의 기반 확충
	과․담당관	도시재생사업 지원체계 구축
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		도시재생 정보포털 구축사업 진척률	-	-	-	100%	-
업무 프로세스		① 서울 도시재생 종합 포털 구축 계획 수립(‘16.2.) → ② 서울 도시재생 종합 포털 입찰공고(’16.3.) → ③ 서울 도시재생 종합 포털 구축 사업자 선정(‘16.4.) → ④ 서울 도시재생 종합 포털 시스템 구축(’16.4월 ~ 11월) → ⑤ 서울 도시재생 종합 포털 테스트(‘16.11.) → ⑥ 서비스 개시(’16.12.)
협력체계 (파트너십)	내 부	도시재생본부
	자치구	활성화지역이 위치한 자치구
	외 부	국토교통부 등

□ 사업목적

○「도시재생 사업의 통합적인 정보제공과 시민참여와 소통에 기초한 커뮤니티 서비스 제공을 위한『서울 도시재생 종합정보시스템』을 구축하여 지속가능한 도시재생사업을 지원

□ 사업개요

○ 사업내용 :  서울 도시재생 종합정보 시스템 구축

- 도시재생 정보의 통합 제공을 위한「도시재생 종합정보시스템」구축

- 사업별 관계자의 원활한 참여와 의사소통 지원을 위한 커뮤니티 서비스 제공

- 사업별 현황관리 DB 구축

- 사용자의 접근성과 편의성 향상을 위한 기능 개발 등

○ 사업기간 : ’16. 3. ~ ’16.12.

○ 총사업비 : 364백만원

□ 홍보계획

○ 서울시 대표 홈페이지 등을 통한 홍보 실시

○ 도시재생 관련 홍보매체에 서울 도시재생 종합 포털 대표주소(URL) 표출 강화

□ 세부추진계획                                           (단위 : %)

지표별	성과지표명	2016년 목표	2/4	4/4
KPI	도시재생 정보포털 구축사업 진척률	100	30	100

○ 사업비 집행계획(2016년) : 364백만원 (시비 364백만원)      (단위 : 백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	2/4	4/4
1	도시재생 종합정보 포털 구축	364	-	364

□ 월별 추진계획

월별	추진계획	추진계획률(%)
1월	도시재생 종합정보 포털의 사업범위 조사	-
2월	도시재생 종합정보 포털 사업계획 수립	10
3월	입찰공고 및 우선협상대상자 선정	15
4월	사업자 선정 및 계약	20
5월	도시재생 종합정보 포털 구축을 위한 TF 구축 및 운영 착수보고회 개최	25
6월	도시재생 종합정보 포털 구축	30
7월	도시재생 종합정보 포털 구축	45
8월	도시재생 종합정보 포털 구축	60
9월	중간보고회 개최	70
10월	도시재생 종합정보 포털 구축	80
11월	도시재생 종합정보 포털 테스트 및 보완	90
12월	도시재생 종합정보 포털 서비스 개시	100

			공공개발센터

1. 국․내외 관광객이 즐겨찾는 한강의 관광명소 조성

공공개발센터 (2133-8368)	센터장 : 이성창 / 개발정책팀장 : 이상면 / 담당 : 장승권, 이석희

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	숨쉬는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	서울의 새로운 명소 조성
	과․담당관	한강협력계획 4대 핵심사업의 안정적 추진
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		한강협력계획 4대 핵심사업 추진율	-	-	5%	20%	40%
업무 프로세스		※ 수상시설 ①기본계획수립 → ②학생 디자인 캠프(`16.7~8월) → ③학생전문가 아이디어 공모(`16.9월) → ④설계 또는 디자인 공모(`16.10월) → ⑤실시설계용역 발주(`16.10월) ※ 육상시설 ①기본계획수립 → ②타당성 조사(건기법) → ③타당성 재조사(지방재정법) → ④투자심사(市, 央)
협력체계 (파트너십)	내 부	도시재생본부(재생정책과), 한강사업본부(총무부, 운영부)
	자치구	영등포구
	외 부	행정자치부(중앙투자심사 관련), 한강연구단(국토연, 문광연, 서울연), 한강시민위

□ 사업목적

○  중앙정부-서울시가 협력하여 한강의 매력도 및 이용편의성을 최대한 높이고 자연환경과 시민·관광객이 어우러진 공간으로 재창조 필요

- 접근성이 좋고 유동인구가 많은 여의도 지역에 문화·관광콘텐츠를 집적하여 관광명소화

- 수변공간을 활용하여 볼거리·즐길거리·먹을거리가 풍부한 매력적인 공간 창출

□ 사업개요

○ 사업기간 : `16년 ~ `19년 (수상시설 `18년 준공, 육상시설 `19년 준공)

○ 추진내용

- 수상시설 : `16년 상반기 기본계획 수립, 하반기 공모·실시설계 추진

∙ 통합선착장 : 관공선 등 통합기능 선착장 조성 [부유체 3,600㎡+상부건축물 2,100㎡]

∙ 피어데크 : 선착장과 연계한 집객시설 확보 [부유체 7,200㎡+상부건축물 7,200㎡]

- 육상시설 : `16년 상반기 기본계획 수립, 타당성 조사, 하반기 타당성 재조사 추진

∙ 여의 테라스 : 윤중로변 시민편의시설 확충 [건축연면적 11,000㎡, 테라스 가든 12,900㎡]

∙ 복합문화시설 : 한강변 시민문화 향유공간 제공 [건축연면적 8,000㎡ (2층)]

○ 총사업비 : 1,933억원 (`16년 34.8, `17년 438.5, `18년 824.3, `19년 635.2)                                                                         (단위:억원)

사 업 명		계	국비	시비	민자	사업기간
수상	통합선착장	301.8	150	151.8	-	`16년 ~ `18년
	피어데크	450	100	100	250
육상	여의테라스	550	65	65	420	`16년 ~ `19년
	복합문화시설	631	281.1	281.1	68.8
계		1,932.8	596.1	597.9	738.8

□ 홍보계획

○ 단계별 사업추진을 통해 사업에 대한 지속적인 관심 및 참여유도

- 학생디자인 캠프는 1학기 또는 방학기간중 대학과 협의 운영

- 건축분야와 조경분야로 나눠 특성화된 다양한 아이디어 발굴

○ 학생·전문가 참여, 전시, 작품집 제작 등을 통해 사회전반 공감대 조성

- 문화·예술 등 다양한 분야 참여를 통해 창의적인 계획 수립

○ 참여프로그램을 공모관리용역에 포함하여 추진, 공모관리용역 조기발주(4월)하여 한강협력계획에 대한 지속적인 관심유도 및 붐업

○ 언론홍보(광고게재) 및 언론사와 홍보이벤트 추진

□ 세부추진계획                                               (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
한강협력계획 4대 핵심사업 추진율(%)	20%	12	10	15	20

○ 사업비 집행계획(`16년) : 3,480백만원(국비 1,650백만원, 시비 1,830백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	한강 통합선착장 조성	830	150	50	50	580
2	한강 피어데크 조성	600	180	-	-	420
3	한강 여의테라스 조성	200	-	-	-	200
4	한강 복합문화시설 조성	200	-	-	-	200

※ 수상시설 기본 및 실시설계비용(16.5억원)은 `17년 집행

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	기본계획 수립용역 발주 / 타당성 조사 및 적격성 조사용역 발주	5%
2월	타당성 조사 및 적격성 조사용역 계약 및 착수 / 수상시설 중앙투자심사	10%
3월	기본계획 수립용역 계약 및 착수	20%
4월	공모관리 용역 발주 (시민 참여프로그램 포함)	30%
5월	기본계획 수립 및 타당성 조사 집중검토·분석	40%
6월	기본계획 수립 및 타당성 조사 집중검토·분석	50%
7월	타당성 재조사(검증) 용역계약 (한국지방행정연구원)	60%
8월	학생 디자인 캠프 / 공유재산심의	70%
9월	학생·전문가 아이디어 공모 / 전문가 콘텐츠 제안(서울건축상상전)	75%
10월	수상시설 설계자 또는 사업자 공모 / 도시계획시설 결정	80%
11월	수상시설 기본 및 실시설계용역 발주	90%
12월	타당성 재조사(검증) 용역 준공	100%

2. 노들섬 문화‧생태공간 조성

공공개발센터 (2133-8362)	센터장 : 이성창 / 팀장 : 하대근 / 담당 : 강전남

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	5대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	서울의 새로운 명소 조성
	과․담당관	노들섬 문화․생태공간 조성
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치		목표치
			2014년	2015년	2016년	2017년
		현상공모, 시설계 및 조성공사 등 노들섬 문화명소화 조성사업 추진율	10	50	75	95
업무 프로세스		① 기본구상 마련 → ② 현상공모 1단계 → ③ 현상공모 2단계 → ④ 현상공모 3단계 → ⑤ 기본 및 실시설계 → ⑥ 공사 및 준공
협력체계 (파트너십)	내 부	문화관광디자인본부, 푸른도시국, 도시교통본부
	자치구	용산구, 동작구
	외 부	한강사업본부

□ 사업목적

○ 노들섬 포럼 및 시민참여프로그램 결과를 반영하여 시민참여중심, 과정중심의 개발을 실현하는 新도시재생프로세스를 도입해 사업 추진

○ 기획‧운영 중심의 새로운 방식의 노들 현상공모 추진을 통해 노들섬에 적합한 운영계획 및 시설을 결정 한 후 기본‧실시설계 및 공사를 통해 음악중심의 “복합문화기지” 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : '14. 10~'18.

○ 추진내용

- 노들섬 포럼 및 시민참여프로그램 결과를 반영하여 기본구상 제시

- 기획‧운영 중심의 새로운 현상공모 추진(공모지침, 홍보계획수립, 시상식 등)

- 현상공모 당선자와 기본 및 실시설계 용역 계약하여 시설설계 추진

- 실시설계 결과에 따라 공사를 시행하여 노들섬을 문화‧생태 중심의 문화명소로 조성

○ 총사업비 : 49,589백만원 (15년 이전 : 1,020, 16년 : 2,669. 17년 이후 : 45,900)

- 기본구상 수립비, 현상공모비, 파일럿・홍보비, 실시설계비, 공사비 등

□ 홍보계획

○ 현상공모 결과 기자설명회 개최 (`16.7월)

○ 파일럿・시민참여프로그램 및 사업홍보 (`16.3~12월)

□ 세부추진계획                                                (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
현상공모, 시설계 및 조성공사 등 노들섬 문화명소화 조성사업 추진율	75	55	65	70	75

○ 사업비 집행계획(2016년) : 2,669백만원 (시비 2,669백만원)

(단위 : 백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	노들섬 활용방안 현상공모 및 기본・실시설계 추진	2,669	-	250	1,085	1,334

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	2차공모 결과 검토 및 3차 설계공모 추진방향 검토	5
2월	3차 설계공모 추진방안 마련	10
3월	3차 설계공모 질의응답 / 파일럿・시민참여 및 홍보방안 계획 수립	20
4월	파일럿・시민참여 및 홍보방안 추진(~12월)	30
5월	3차 설계공모 제안서 접수	40
6월	3차 설계공모 심사 및 발표	50
7월	3차 설계공모 시상식 및 전시회 개최 / 기본 및 실시설계 발주	60
8월	기본설계 추진	70
9월	기본설계 추진	80
10월	기본설계 추진	90
11월	실시설계 추진	95
12월	실시설계 추진	100

3. 공공토지자원 활용시스템 구축

부서명 (2133-8353)	센터장 : 이성창 / 팀장 : 송헌영 / 담당 : 최희영, 김영일

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	서울형 도시재생 기반 확충
	과․담당관	도시자산의 효율적 활용
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		공공토지자원 활용시스템 구축	10%	25%	50%	70%	85%
업무 프로세스		① 용역착수 및 착수보고 → ② 소규모 및 대규모시유지 기초조사 → ③ 유형화(활용가능시유지, 중점활용시유지선정) → ④ 활용시스템 구축 → ⑤ 빅데이터연계 → ⑥ 전략부지 선정 → ⑦ 활용구상 및 사업화 방안 제시 → ⑧ 용역완료
협력체계 (파트너십)	내 부	시 본청(자산관리과, 재산관리부서 등 관련부서)
	자치구	해당 자치구
	외 부	분야별 전문가 등

□ 사업목적

○ 전체 공공토지자원을 대상으로 활용 가능한 시유지를 발굴

○ 주요 시유지에 대한 기본 구상안을 마련하여 공공 토지자원의 활용성 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : ’14. 5 ~ ’18. 5

○ 추진내용

- 공공 토지자원 정보를 집약하고 활용적 측면에서 데이터베이스 재정비

- 활용가치 높은 시유지를 발굴하고 선제적 활용방안 검토

- 전략부지를 선정하고 기본구상 및 사업화 방안 수립

○ 총사업비 : 1,020백만원(1단계 : 462백만원, 2단계 : 558백만원)

□ 홍보계획

○  공공토지자원 활용시스템 1단계 구축 보도자료(6월 이후)

□ 세부추진계획                                                (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	2/4	4/4
공공토지자원 활용시스템 구축	70	60	70

○ 사업비 집행계획(2016년) : 363백만원 (시비 363백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	2/4	4/4
1	공공토지자원 활용 기본구상 및 사업화방안 수립	113	113
2	공공토지자원의 수요맞춤형 활용계획 수립	250	107	143

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	시범사업 후보지(중규모 시유지) 선정 기준 마련	52
2월	시범사업 후보지(중규모 시유지) 선정	53
3월	시범사업 후보지(중규모 시유지) 활용구상안 마련	55
4월	시범사업 후보지(중규모 시유지) 사업화 방안 구상	57
5월	소규모 및 대규모 시유지 기초조사	59
6월	소규모 및 대규모 시유지 공간정보화	60
7월	활용가능시유지(소규모, 대규모시유지) 선정	61
8월	중점활용시유지(소규모, 대규모시유지) 선정	63
9월	활용가능시유지(소규모, 대규모시유지) 매칭DB 구축	65
10월	중점활용시유지(소규모, 대규모시유지) 활용카드 작성	66
11월	활용시스템과 빅데이터 연계 구축 방안 검토	68
12월	빅데이터 연계 구축	70%

.

			공공재생과

1. 세종대로 일대 역사문화특화공간 조성

공공재생과(2133-8653)	과장 : 홍 선 기 / 팀장 : 황 원 근 / 담당 : 천 주 영

_

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	안전한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	서울의 새로운 명소 조성
	과․담당관	지역거점형 특화공간 조성
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		세종대로 일대 역사문화특화공간 조성 공정률	-	-	20%	50%	100%
업무 프로세스		① 재산교환(‘15.5) → ② 철거공사(‘15.7) → ③ 현상설계공모(’15.10) → ④ 문화재 시굴 및 정밀발굴조사(‘16.5) → ⑤ 기본 및 실시설계(‘16.6) → ⑥ 착공(‘16.7) → ⑦ 지하공간 조성(’17.6)
협력체계 (파트너십)	내 부	관광정책과, 도시기반시설본부, 도시교통본부
	자치구	중구청
	외 부	성공회 서울주교좌대성당, 서울지방경찰청, 한국전력공사, 서울지방국세청

□ 사업목적

○ 정동지역과 세종대로 전면 구간은 덕수궁, 성공회성당, 구 시청사 등 근대 역사문화자원이 밀집한 장소임에도 각 자원간 연계성이 부족하여 지역적 특성을 살리지 못하고 있음

○ 따라서, ‘15년 5월 국․공유지 교환에 따라 확보한 서울지방국세청 남대문 별관(이하 “국세청 별관”)을 지역을 특화할 거점시설로 조성하고 세종대로 지하공간 개발을 통해 주변지역 및 시설을 연계

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1 ~ 2017. 6

○ 대상지 : 중구 태평로1가 60-2외 2

○ 추진내용

- 지 상 부 : 국세청 별관 건물 철거 및 역사문화광장 조성(1,088㎡)

- 지하공간 : 별관부지 지하를 기존 덕수궁 지하보도와 연결하여 시민청․시청역과 연계한 특화공간으로 조성 (1,600㎡)

○ 총사업비 : 304억원(‘15년 : 2,000백만원, ‘16년 : 8,133백만원, ‘17년: 20,300백만원)

□ 홍보계획

○ ‘16. 5월 : 정밀발굴 결과 발표

○ ‘16. 7월 : 착공식 및 보도자료 배포

□ 세부추진계획                                                (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
세종대로 일대 역사문화특화공간 조성 공정률	50	25	30	40	50

○ 사업비 집행계획(2016년) : 8,133백만원 (전액시비 8,133백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	세종대로 일대 역사문화특화공간 조성	8,133	209	454	114	7,356

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	문화재 시굴조사	5
2월	가설건축물 철거 및 부대공사 설계 및 발주	10
3월	문화재 정밀발굴조사, 기본설계 완료	15
4월	중앙투자심사 및 공유재산관리계획 상정	25
5월	문화재 정밀발굴 완료	30
6월	실시설계 완료, 설계검증 및 계약심사, 건축허가 협의	40
7월	조성공사 발주 및 계약	60
8월	공사시행	70
9월	공사시행	85
10월	공사시행	90
11월	공사시행	95
12월	공사시행	100

2. 예장자락 남산공원 재생사업

공공재생과(2133-8648)	공공재생과 : 홍선기 / 팀장 : 안중욱 / 담당 : 현학범･배현경

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	서울의 새로운 명소 조성
	과․담당관	지역거점형 특화공간 조성
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013	2014년	2015년	2016년	2017년
		남산 예장자락 재생사업 계획수립 및 사업 추진율	-	-	20%	50%	80%
업무 프로세스		① 기본구상 및 기본계획 수립(’15년) → ② 타당성 조사(’16.4) → ③ 기본 및 실시설계 → ④ 공사착수(’17.1) → ⑤ 공사 및 준공(’18. 2.)
협력체계 (파트너십)	내 부	행정국, 문화체육관광본부, 푸른도시국, 도시교통본부, 도시기반시설본부
	자치구	중구
	외 부	기획재정부, 문화체육관광부, 국토교통부(광역도시교통과)

□ 사업목적

○ 남산 예장자락의 자연경관 회복 및 도심부에 시민휴식공간 제공

○ 명동에서 남산으로 이르는 보행로 확충 등 보행 접근성 대폭 개선

○ 체계적인 공원관리로 남산의 공기질 향상 및 보행 안전성 제고

○ 관광객 이동 편의성을 제고하는 곤돌라 설치 및 관광버스 주차난 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : '15. 1.~'18.2.

○  추진내용

- 예장자락 남산공원 조성사업의 방향 설정을 위한 기본구상 마련

- 창의적인 계획(안) 도출을 위한 현상공모 추진(공모지침, 홍보계획수립, 시상식 등)

- 현상공모 당선자와 기본 및 실시설계 용역 계약하여 설계 추진

- 실시설계 결과에 따라 공사를 시행하여 예장자락의 경관·문화·역사 등을 재생

○  총사업비 : 68,800백만원

- 현장조사 및 측량비, 기본계획 수립비, 기본 및 실시설계비, 공사비

- 연차별 투자계획(백만원) : '15년 4,350.  '16년 7,300.  '17년 50,000.  ’18년 7,150

□ 홍보계획

○ 기자설명회 개최 (2월)

○ 보도자료 배포(7월, 12월)

- 철거공사 착수 및 공사착공 시

○ 시민(환경) 관련 단체 지속 자문 및 홍보

□ 세부추진계획                                               (단위 : % )

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
남산 예장자락 재생사업 설계 및 사업 추진율	50	10	25	40	50

○ 사업비 집행계획(2016년) : 7,300백만원(국비500백만원, 시비6,800백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	남산 예장자락 재생사업	7,300	100	400	2415	4385

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	기본계획 수립 완료	5
2월	현상공모 심사 및 기자설명회	10
3월	도시관리계획 결정 추진 착수	20
4월	입찰안내서 작성 및 발주	30
5월	교통영향 분석 완료	40
6월	도시관리계획 결정 완료	50
7월	철거공사 착수	60
8월	철거공사 완료	70
9월	문화재 발굴조사	80
10월	기본 및 실시설계 완료	90
11월	도시계획시설사업 실시계획 고시	95
12월	보상계획 공고	100%

			도시활성화과

1. 장안평 도시재생사업 추진

부서명 (2133-4633)	담당관 : 김 승 원 / 팀장 : 이 순 하 / 담당 : 이 시 우

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	균형발전 신경제거점 조성
	과․담당관	자동차 복합산업 집적지 육성
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		도시재생활성화계획 수립				1건
		장안평 자동차 산업문화관 건립				1건
업무 프로세스		<도시재생활성화계획 수립> ① 도시재생활성화계획안 마련 → ② 주민공청회/지방의회 의견청취 → ③ 도시재생위원회 심의 → ④ 도시재생활성화계획 고시 <자동차산업문화관> ① 계획안 마련 → ② 설계 → ③ 시공→ ④ 준공‧운영
협력체계 (파트너십)	내 부	도시재생본부(재생정책과), 경제진흥본부(경제정책과), 도시기반시설본부
	자치구	성동구, 동대문구
	외 부

□ 사업목적

○ 장안평 일대의 자생적 지역산업재생 기반 마련을 위해 물리적‧비물리적 개선방안을 고려한 종합적 재생계획 마련

□ 사업개요

○ 대상지 개요

- 위치 : 서울시 성동구 용답동, 동대문구 장안동, 답십리동 일대

- 면적 : 약 502,600㎡

○ 추진내용

- 장안평 일대 자동차 산업공동체 활성화 및 지속적 관리체계 기반마련 등을 위한 도시재생활성화계획 수립

○ 총사업비 : 5,421백만원(‘15년 : 1,813백만원, ’16년 : 3,608백만원)-(전액시비)

□ 홍보계획

○ 서울시의 경제기반형 도시재생사업 핵심사업으로 추진중인 장안평 중고차 매매, 부품, 정비단지 일대의 발전방향 제시

□ 세부추진계획                                                (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
장안평 도시재생사업 추진율	100	25	70	85	100

○ 사업비 집행계획(2016년) : 3,608백만원(전액 시비)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	도시재생활성화계획수립	708		500	208	-
2	자동차 산업문화관 건립	2,900	25	25	2,850	-

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	- 도시재생활성화계획 수립을 위한 행정절차 이행(주민 의견수렴) - 자동차산업 종합정보센터 설계용역 착수	8
2월	- 도시재생활성화계획 공청회(안) 주민설명회 실시 - 자동차산업 종합정보센터 설계안 자문회의 실시	15
3월	도시재생활성화계획 공청회 실시 신문공고 자동차산업 종합정보센터 관리·운영계획 수립	25
4월	도시재생활성화계획 공청회 실시 자동차산업 종합정보센터 자치구 공유재산심의	45
5월	도시재생활성화계획 시의회 의견 청취 및 도시계획위원회 심의 자동차산업종합정보센터 실시설계 완료	50
6월	도시재생활성화계획 시의회 의견 청취 및 도시계획위원회 심의 자동차산업종합정보센터 실시설계 완료 및 공사 발주	70
7월	도시재생활성화계획 시의회 의견 청취 및 도시계획위원회 심의 자동차산업종합정보센터 공사 계약 및 착수	75
8월	장안평 도시재생활성화사업 투자심사 자동차산업종합정보센터 공사 추진	80
9월	장안평 거점시설 도시환경정비계획 고시 자동차산업종합정보센터 공사 추진	85
10월	장안평 도시관리계획(지구단위계획) 주민의견 청취 자동차산업종합정보센터 공사 추진	90
11월	장안평 도시관리계획(지구단위계획) 도시건축공동위원회 심의 자동차산업종합정보센터 공사 추진	95
12월	장안평 도시관리계획(지구단위계획) 지구단위계획 결정 고시 자동차산업종합정보센터 공사 추진	100

2. 정비사업 공사장 안전점검

부서명 (2133-4638)	담당관 : 김 승 원 / 팀장 : 이 순 하 / 담당 : 유 우 린

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	안전한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	서울형 도시재생 본격추진으로 ‘삶터’와 ‘일터’가 행복한 서울실현
	실․본부․국	균형발전 신경제거점 조성
	과․담당관	정비사업 공사장 안전관리 강화
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		정비사업공사장 안전점검(개소) (60개소x4회)	-	-	-	240	240
업무 프로세스		① 시기별(월별)점검 계획수립(도시재생본부장 방침) → ② 점검 위원 선임 (도시활성화과) → ③ 현장 안전점검(시·구·점검위원) → ④ 점검결과보고 및 시설관리부서 통보(도시활성화과) → 지적사항 조치 및 관리(도시활성화과)
협력체계 (파트너십)	내 부	도시재생본부(역사도심재생과, 재생협력과, 주거사업과)
	자치구	25개 자치구
	외 부	서울시안전관리자문단

□ 점검목적

○ 우리시 정비사업공사장에 대하여 외부전문가팀과 안전점검을 실시하고 적극적인 재난대비로 시민의 생명과 재산 보호

□ 점검계획

○ 점검대상 : 정비사업(도시환경정비, 주택재개발, 주택재건축 등) 공사장

○ 점검기간 : 2016. 1. ～ 2016. 12.

○ 점검내용 : 연중취약시기 안전점검 및 특별안전점검 또는 자문

- 취약시기별 안전점검 실시(해빙기, 우기, 추석, 겨울철 대비)

- 특별안전점검 또는 자문 실시(수시)

- 안전점검은 외부전문가가 주도적으로 실시하고, 공무원은 일상점검 및 행정적 지원

○ 공사장현황

- 철거·굴토 공사장 : 30개소(중점관리대상)

- 골조·마감 공사장 : 30개소(일반관리대상)

□ 세부추진계획                                               (단위 : 개소)

핵심성과지표명	2016년 목표	2/4	4/4
정비사업공사장 안전점검	240	120	120

○ 사업비 집행계획(2016년) : 55백만원 (시비 55백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	2/4	4/4
1	정비사업공사장 안전점검	55	22.5	22.5

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	설날대비정비사업공사장 안전점검통보 및 해빙기대비정비사업공사장 현황파악	5%
2월	해빙기대비 정비사업공사장 안전점검 계획 수립	15%
3월	해빙기대비 정비사업공사장 안전점검 실시(시·구·외부전문가 안전점검)	25%
4월	특별 수시안전점검 계획 및 교육 계획 수립	30%
5월	우기대비 정비사업공사장 현황 파악	40%
6월	우기대비 정비사업공사장 안전점검 계획 수립	50%
7월	우기대비 정비사업공사장 안전점검 실시(시·구·외부전문가 안전점검)	60%
8월	추석대비 정비사업공사장 현황파악	70%
9월	추석대비 정비사업공사장 안전점검 실시(시·구·외부전문가 안전점검)	75%
10월	특별 수시안전점검 계획 및 교육 계획 수립	85%
11월	겨울철대비 정비사업공사장 현황파악	90%
12월	겨울철대비 정비사업공사장 안전점검 실시(시·구·외부전문가 안전점검)	100%

.

			역사도심재생과

1. 세운상가군 재생사업

역사도심재생과 (2133-8498)	과장 : 양병현 / 팀장 : 이창구 / 담당 : 오승제, 한철민, 박학균

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	균형발전 신경제거점 조성
	과․담당관	세운상가군 활성화
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		세운상가군 재생 사업 추진률		5	25	75	100
업무 프로세스		‣보행재생(입체적 보행네트워크 단계별 구축-1단계 공공선도사업 시행) - 광폭횡단보도, 다시세운광장 정비, 세운보행교 설치, 데크 정비 등 ① 국제현상설계(`15.2~5)→ ② 기본 및 실시설계(`15.6~12)→ ③ 공사관리(`16.1~`17.5) ‣산업재생(도심창의제조산업으로의 거점공간 운영) - 거점공간 운영계획, 운영자 선정, 세운리빙랩 시범운영 등 ①운영 전략(`15.12)→②운영 계획 수립, 리빙랩 시범운영(15.3~10)→③운영자 선정(`15.11) ‣공동체재생(주민 주도 재생기반 마련) - 다시세운시민협의회 운영, 주민역량강화, 주민공모사업, 주민지원사업, 상생협약 등 ① 활성화 방안 수립(`15.6~12)→ ②활성화 사업 시행(`15.3~12)→ ③ 공동체 운영(`17)
협력체계 (파트너십)	내 부	도시기반시설본부, 경제진흥본부
	자치구	중구, 종로구
	외 부

□ 사업목적

○ 선제적 공공사업(데크 정비 등) 시행 및 활성화 프로그램 운영을 통해 낙후된  세운상가 및 주변지역에 대한 경제적·사회적·문화적 활력 회복

□ 사업개요

○ 기 간  : `14. 7 ∼ `16. 12

○ 추진내용

- 보행재생(광폭횡단보도, 다시세운광장 정비, 세운보행교 설치, 데크 정비 등)

- 산업재생(거점공간 운영계획 수립, 운영자 선정, 세운리빙랩 시범운영 등)

- 주민 주도 재생 기반 마련(다시세운시민협의회 운영, 주민역량강화, 주민공모사업, 상생협약 등)

○ 총사업비

- 38,600백만원(‘15년 이전 : 4,306백만원, ‘16년: 20,230백만원, ‘17년 이후 : 14,064 백만원)

□ 홍보계획

○ 주체별 / 매체별 홍보로 사업 공감대 확산

- 대시민 홍보 : 기획기사, 다큐멘터리 방송, 지하철 및 버스 전광판 등

- 주민 홍보 : 주민 참여형 프로그램 운영, 포스터‧팜플렛 제작 배부 등

○ 사업 추진 단계별 행사로 관심 증대 및 사전 붐업

- 착수발표(1.28), 다시세운광장 준공(10월), 활성화 프로그램 운영(수시)

□ 세부추진계획                                               (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	2/4	4/4
세운상가군 재생사업 추진률	75	50	75

○ 사업비 집행계획(2016년) : 20,230백만원 (시비)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	2/4	4/4
1	공공선도사업	17,902	5,500	12,402
2	2단계 구간 타당성 조사 등	400	200	200
3	거점공간 활용방안 수립(세운협업지원센터, 세운리빙랩)	300	100	200
4	거버넌스 운영(자문단 및 시민협의회 운영, 주민역량강화 등)	588	300	288
5	주민공모, 상가 환경개선 지원	710	200	510
6	홍보 및 행사 등	330	100	230

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	∘재생사업 착수발표, 상생협약 및 공간사용협약(세운상가)	10%
2월	∘공공공간 공사 발주	15%
3월	∘공공공간 공사 계약 및 착공	20%
4월	∘관련 용역 착수(2단계 구간 타당성 조사, 거버넌스 운영, 거점공간 활용방안)	30%
5월	∘주민역량강화 시행, SCL 신직업연구소 입주	40%
6월	∘주민공모사업 시행	50%
7월	∘상생협약 및 공간사용협약(대림상가, 청계상가)	60%
8월	∘상가 환경개선 시행	65%
9월	∘거점공간 운영자 공모, 세운 리빙랩 시범운영	70%
10월	∘다시세운광장 준공, 수리협동조합 설립	80%
11월	∘거점공간 운영자 선정, 2단계 구간 기본구상 수립	90%
12월	∘역사도심 보행네트워크 기본계획 수립, 주민역량강화 및 주민공모사업 평가	100%

2. 역사도심관리 기본계획 수립 및 실현기반 구축 추진율

부서명 (2133-8489)	과장 : 양 병 현 / 팀장 : 김 용 민 / 담당 : 정 미 창

사업구분	□ 핵심사업 ■주요사업	5대 도시 분류	(환경도시)

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	균형발전 신경제거점 조성
	과․담당관	역사 문화유산의 보존 및 활용을 통한 도심부 재생
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		(KPI)역사도심관리 기본계획수립 및 실현기반 구축 추진율	45	55	65	75	90
		역사도심관리 기본계획 수립 추진율	45	50	50	50	50
		실현기반 구축 추진율		5	15	25	40
업무 프로세스		1) 역사도심 관리 기본계획 수립 ① 기초현황 분석 → ② 요소도출 및 기본구상 → ③ 변화 전망 및 미래상 제시 → ④ 관리방안 구상 → ⑤ 부문별 계획수립 → ⑥ 지침작성 및 실현방안 마련 2) 실현방안 구축 ① 자료조사 → ② 관리계획 수립 ③ 사업계획 수립 ④ 사업시행
협력체계 (파트너십)	내 부	경제진흥실, 도시교통본부, 문화관광디자인본부, 도시안전실, 주택정책실, 푸른도시국 등 부문별 관련부서
	자치구	종로구, 중구
	외 부

□ 사업목적

○  한양도성으로 둘러싸인 600년 역사를 지닌 고도로서 서울 도심부의 역사문화적 가치를 재발견하고 도시 정체성 제고를 위하여 중․장기적이고 종합적인 도시관리 체계 마련

□ 사업개요

<역사도심관리 기본계획 수립>

○ 과 업 명 : 역사문화를 고려한 도심부관리 기본계획 수립

○ 과업기간 : '11. 5. 6 ~ '15. 2.21 (1단계 ‘12. 6. 30 준공/ 2단계 '12. 9.28 착수)

○ 과업범위 : 사대문안 관리지역 + 한양도성외부 완충지역(도성주변 100m 이내)

○ 총사업비 : 1,419백만원(1단계 302 / 2단계 1,117)

○ 주요내용

- 현황 및 기초조사 분석(역사문화자원, 관련법제도․계획․사업 등)

- 사대문안 역사골격 및 자원요소 도출

- 역사․문화도시 관리목표 설정, 비전과 미래상 제시

- 사대문안 도시관리 기본원칙 설정 및 기본틀 구상 등

- 학술용역(1단계) 내용의 반영 및 구체화

- 사대문안 보전/관리/재생을 위한 장․단기 과제 및 관리방안 마련

- 실행방안 및 분야별 추진 전략

- 향후 과제 마련 등

<실현기반 구축 ①>

○ 사 업 명 : 옛길 영상기록 및 특성보존 사업

○ 사업기간 : 2014. 6 ~ 2018.12

○ 사업범위 : 도심부내 주요 옛길

○ 총사업비 : 6,600백만원(‘16년 340백만원)

○ 추진내용

- 옛길 영상기록화 사업

- 옛길 역사특성보존계획 수립 및 사업 추진

<실현기반 구축 ②>

○ 사 업 명 : 정동 외 8개소 지구단위계획 수립

○ 사업기간 : 2014. 6 ~ 2018.12

○ 사업범위 : 도심부내 도시관리계획 미수립 지역

○ 총사업비 : 3,600백만원(‘16년 1,646백만원)

○ 추진내용

- 도시관리계획 미수립지역 지구단위계획 수립

- 도시환경정비구역 해제지에 대한 지구단위계획 수립

□ 홍보계획

○ 정동 역사재생 대외발표 - '16. 4.  기자설명회 개최

○ 돈화문로주변 옛길 영상기록화 전시회 - '16. 9.

□ 세부추진계획                                                (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
역사도심관리 기본계획수립 및 실현기반 구축율	75	67	70	72.5	75

○ 사업비 집행계획(2016년) : 1,986백만원 (전액 시비)              (단위 : 백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	역사도심관리 기본계획 수립	0	-	-	-	-
2	실현기반 구축	1,986	398	198	100	1,290

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	추진계획률(%)
1월	․ 역사도심 기본계획 관련 조례개정 추진 - 개정취지, 개정안 마련 등	8
2월	․ 정동 역사재생계획 시장보고 ․ 16년 신규 지구단위계획 발주계획 수립	17
3월	․ 2차 옛길 영상기록화 사업 발주 ․ 장충, 이화, 필동 지구단위계획 발주	25
4월	․ 정동 역사재생계획 대외발표 ․ 3․1 독립운동 흔적살리기 사업 발주 ․ 청운, 오장동 지구단위계획 발주	33
5월	․ 3․1 독립운동 흔적살리기 사업 착수 ․ 장충, 이화, 필동 지구단위계획 기초조사	42
6월	․ 청운, 오장동 지구단위계획 기초조사 ․ 혜화명륜, 정동 지구단위계획 공람, 도시건축공동위원회 심의	50
7월	․ 혜화명륜 지구단위계획 수립 ․ 정동일대 지구단위계획 수립	58
8월	․ 2차 옛길 영상기록화 사업 중간보고 ․ 3․1 독립운동 흔적살리기 사업 중간보고 ․ 장충, 이화, 필동 지구단위계획 중간보고	67
9월	․ 돈화문로주변 옛길 영상기록화 전시회 ․ 청운, 오장동 지구단위계획 중간보고	75
10월	․ 익선, 회현동 지구단위계획 공람, 부서 협의진행 ․ 장충, 이화, 필동, 청운, 오장동 지구단위계획 기본구상안 수립	83
11월	․ 익선, 회현동 지구단위계획 도시건축공동위원회 심의 ․ 장충, 이화, 필동, 청운, 오장동 지구단위계획 부문별계획 착수	92
12월	․ 옛길 영상기록화사업(1차) 준공 ․ 옛길 역사특성 보전 기본계획 수립 ․ 회현동일대 지구단위계획 수립 ․ 익선 지구단위계획 수립	100

.

			주거재생과

1. 도시재생 희망지사업 추진

주거재생과 (2133-7165)	과장 : 국승열 / 팀장 : 김창규 / 담당 : 박범진

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진
	과․담당관	자족형 도시재생 성장기반 확충
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		희망지 선정 개소				15	8
업무 프로세스		① 희망지 공모 → ② 설명회 개최 → ③ 공모신청 → ④ 희망지 선정 → ⑤ 주민역량강화사업 추진 → ⑥ 모니터링 → ⑦ 활성화지역 선정
협력체계 (파트너십)	내 부
	자치구	25개 자치구
	외 부

□ 추진배경

○ 주민공감대, 추진역량이 부족한 상황에서 도시재생지역 지정

- 물리적 개선에 집중, 주민역량 부족상황에서 진행되어 지역활성화 더디게 출발

○ 도시재생에 대한 사전 이해도 증대, 지역의 문제 및 재생의 필요성 인식 등 재생사업 생태조성을 위한 주민 추진역량 증대 필요

- 조기 주민역량강화를 통한 재생사업 성공적 기반마련

○ 도시재생지역 지정이전 사전 주민역량강화를 위한 준비단계 강화

□ 기본방향

○ 도시재생 조기 활성화를 위한 준비단계 도입

- 계획수립 이전 주민공감대 형성, 공동체활성화를 위한 준비단계 추가

○ 준비단계로 희망지 사업 선정 및 주민역량강화사업 추진

※ 주거환경관리사업도 준비단계 준용

□ 선정계획

○ 선   정 : 최대 20곳

- 도시재생활성화사업 희망지 15곳, 주거환경관리사업 희망지 5곳

○ 희망지 규모

- 도시재생활성화사업 : 10만㎡ 이상(1~3개 행정동 범위),

- 주거환경관리사업   : 10만㎡ 미만(1개 행정동 범위)

○ 선정일정 : ‘16. 1 ~ 5월

- 1~3월 : 설명회 및 주민컨설팅,  4월말 : 공모접수,  5월 : 희망지선정

⇒ 선정된 희망지는“주민역량강화사업”시행

‣ 사업비 : 2,480백만원

□ 희망지 공모

〈대상지 조건〉

○ 도시재생활성화사업 : 도시재생활성화 법적요건 2개이상 충족지역

-  ①인구 현저히 감소지역,  ②총 사업체 수 감소 등 산업 이탈발생지역

③노후주택 증가 등 주거환경이 악화지역

○ 주거환경관리사업    :「도시 및 주거환경정비법」시행령 별표1 충족지역

- 전용주거, 제1,2종일반주거지역중 단독주택, 다세대주택 등이 밀집지역

- 단독주택재건축, 주택재개발구역에서 주거환경관리사업으로 전환 희망지역

- 재개발․재건축 해제지역, 재정비촉진지구 해제 및 존치지역

〈응모자격 및 방법〉

○ 응모자격 :  10인이상 주민조직 + 지원조직

○ 응모방법 : 자치구에 희망지 공모 제안서 제출

○ 희망지 사업 신청 (구 → 시)

- 주민공모 제안서를 자치구에서 검토후 추천순위를 정하여 신청

〈추진절차〉

희 망 지 공 모 (‘16. 1.)	→	설명회 개최 (권역별, 현장별) (‘16. 1. )	→ 주민제안 컨 설 팅	공모신청(제안) (주민→자치구) (‘16.4월말)	→	희망지 신청 (구 → 시) (‘16. 5.)	→	희망지 선정 (서울시) (‘16.5월말)	→

주민역량강화 사업 시행 (‘16. 6. ~)	→	주민제안사업 공 모	→	모니터링	→	활성화지역 공모 및 선정 (‘17. 2월)

□ 세부추진계획                                              (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
희망지사업 선정건수	15	-	15	-	-

○ 사업비 집행계획(2016년) : 2,480백만원

□ 월별 추진계획

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	도시재생사업 지역역량강화사업 추진	150	-	-	75	75
2	도시재생 시민아카데미 지역재생활동가 양성과정 운영	165	-	-	80	85
3	도시재생사업 홍보 및 사례집 제작 등 추진	65	-	-	30	35
4	도시재생 활성화지역 지정 희망지 지역역량강화 사업 추진	2,330	-	-	1,000	1,330

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	□ 희망지사업 공모계획발표 □ 주민설명회 및 주민컨설팅 시행	10
2월	□ 주민설명회 및 주민컨설팅 시행 □ 워크샵 개최	10
3월	□ 주민설명회 및 주민컨설팅 시행 □ 희망지사업 공모공고	5
4월	□ 희망지사업 공모접수(자치구) □ 희망지사업 자체심사(자치구) - 희망지사업 순위결정	5
5월	□ 희망지사업 공모제안서 서울시 접수 □ 희망지사업 선정	10
6월	□ 주민역량강화사업 착수 - 지역자원조사(주민조직발굴)	5
7월	□ 주민역량강화사업 시행 - 주민의제발굴, 주민제안 및 공모 사업계획 수립	10
8월	□ 주민역량강화사업 시행 - 주민 소식지 발굴, 주민공동체 발굴 및 육성 - 공모제안 및 공모사업 시행	10
9월	□ 주민역량강화사업 시행 - 주민공동체 발굴 및 육성, 주민제안 및 공모사업 시행	10
10월	□ 주민역량강화사업 시행 - 주민소식지 배포, 주민설명회 개최	10
11월	□ 주민역량강화사업 시행 - 주민조직 지원, 지역공동체 네트워크 구축	10
12월	□ 주민역량강화사업 시행 □ 재생사업 모니터링 시행 - 주민역량강화사업 시행결과 평가	5

2. 창신숭인 도시재생사업

주거재생과 (2133-7171)	과장 : 국승열 / 팀장 : 전태호 / 담당 : 소석영

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진
	과․담당관	자족형 도시재생 성장기반 확충
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		창신숭인 도시재생사업 추진율	-	10	30	40	20
업무 프로세스		① 활성화계획 수립 → ② 단위사업별 추진계획 수립 → ③ 사업추진협의회 구성 → ④ 단위사업별 사업실행
협력체계 (파트너십)	내 부	일자리정책과, 문화융합경제과, 조경과, 물재생계획과, 도시관리과, 임대주택과, 보육담당관, 등
	자치구	종로구청
	외 부	국토교통부, SH공사 등

□ 사업목적

○ 한양도성 등 역사문화자원이 풍부하고, 도심 의류봉제 산업 쇠퇴 및 뉴타운에서 해제된 창신․숭인 지역에 대한 도시재생사업 추진

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 종로구 창신1․2․3동, 숭인1동 / 830,130㎡(창신1동 남측제외)

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

○ 추진내용 : 주거환경개선, 지역경제활성화, 역사문화자원화 및 주민역량강화사업추진

- 주거환경개선 : 안전안심골목길조성, 주민공동이용시설조성 등 주거환경개선 추진

- 지역경제활성화 : 봉제박물관, 공동작업장 조성, 채석장부지 명소화 등을 경제활성화

- 역사문화자원화 : 백남준기념공간, 마을탐방로 조성 등

- 주민역량강화 : 주민공모사업, 주제공모사업, 마을배움터(교육)

○ 총사업비

-  200억원 (국비․시비 각 100억원, 1:1 매칭)

(‘14년 : 20억원, ‘15년 : 64억원, ‘16년 : 85억원,  ‘17년 : 31억원)

□ 홍보계획

○ 보도자료

- 사업설명회, 마을축제 개최, 단위사업 추진 사항 등

○ 도시재생 소식지 발간

○ 언론사와 공동으로 도시재생 홍보

□ 세부추진계획                                              (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
창신숭인 도시재생사업 추진율	40		12		40

○ 사업비 집행계획(2016년) : 7,651백만원 (국비 4,006백만원, 시비 3,645백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	주거환경개선	3,796	250	800	1,881	865
2	지역경제활성화	1,780	60	175	631	914
3	역사문화자원화	1,725	10	415	400	900
4	주민역량강화	350	5	150	155	40

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	․봉제박물관 설계공모	-
2월	․앵커설계발주(창신1동 복지시설, 봉제박물관)	1
3월	․일자리지원사업 모집공고 ․주민역량강화사업(교육, 주민공모) 추진 ․일자리지원사업 참여자 배치	5
4월	․앵커설계발주 (창신2동, 숭인1동, 창신3동 공동이용시설, 백남준기념공간)	10
5월	․창신숭인 도시재생마을축제	15
6월	․앵커착공(창신1동 복지시설)	25
7월	․백남준 기념공간 조성완료 ․마을탐방로 기반조성사업 착공	35
8월	․안전안심골목길조성공사 착공	50
9월	․앵커착공(창신2동, 숭인1동 주민공동이용시설)	62
10월	․앵커착공(창신3동, 숭인1동 주민공동이용시설)	75
11월	․봉제박물관 착공	90
12월	․안전안심골목길조성 완공 ․앵커준공(창신1동 복지시설) ․마을탐방로 기반조성사업 완공	100%

3. 해방촌 도시재생사업 추진

주거재생과 (2133-7170)	과장 : 국승열 / 팀장 : 전태호 / 담당 : 전동수

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진
	과․담당관	자족형 도시재생 성장기반 확충
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		해방촌 도시재생사업 추진율	-	-	10	15	20
업무 프로세스		주민협의체(사업추진협의회) 구성 → 주민역량강화 → 사업발굴, 검토, 조정 → 도시재생 활성화계획 수립 → 활성화계획 결정절차 이행 → 고시
협력체계 (파트너십)	내 부	단위사업 추진부서(미결정)
	자치구	용산구청
	외 부	총괄계획가 등 전문가 집단

□ 사업목적

○ 한국근현대사의 아픔과 애환을 담고 있는 마을

○ 최고고도지구 등 높이가 제한되어 주거환경정비가 미흡하여  물리적 재생과 더불어 사회·경제적 재생을 통한 지역 활성화

□ 사업개요

○ 대상지역 현황

- 위    치 : 용산구 용산2가동 일대(면적 : 320,000㎡)

- 거주인구 : 11,858명(외국인 1,314명 / ‘15.12월 기준)

- 용도지역/지구 : 제1종일반주거지역, 최고고도지구(12m, 20m)

○ 사업기간 : 2015~2020

○ 사업내용 : 도시재생활성화계획 수립(2015년) 및 추진(2016년~)

○ 총사업비 : 10,000백만원

※ 2016년 3,244백만원(국비 118백만원 포함)

□ 홍보계획

○ 보도자료

- 해방촌 도시재생 주민역량강화사업(주민공모, 마을배움터) 추진(3월)

- 주민협의체 제2기 출범, 해방촌 오거리 특성화거리 조성 주제공모(4월)

- 신흥시장 활성화방안 마련 실시설계 착수(5월)

- 활성화계획 확정고시(6월)

- 해방촌 도시재생 국토부 특위 심사(9월)

- 신흥시장 시설현대화사업 착공, 도시재생 주민축제(10월)

□ 세부추진계획                                         (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
해방촌 도시재생사업 추진율	15		5		15

○ 사업비 집행계획(2016년) : 3,126(시비), 118(국비)        (단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
	계	3,244	100	1,139	260	1,745
1	센터 운영(전문가 활용)	220	50	60	60	50
2	주민역량강화 지원	190	50	50	50	40
3	신흥시장 활성화	835		40	0	795
4	해방촌 테마가로 조성	960			100	860
5	안전한 생활가로 조성	50			50
6	주민공동이용시설 조성	989		989

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월
2월	주민역량강화 지원사업 설계	5
3월	마을교육 운영, 주민공모 공고	10
4월	주민협의체 제2기 구성 지원, 해방촌 오거리 특성화방안 주제공모	15
5월	신흥시장 실시설계 발주	25
6월	활성화계획 확정 고시	35
7월		45
8월		55
9월	국토부 특위 심사	60
10월	신흥시장 시설현대화사업, 해방촌 오거리, HBC거리 착공	80
11월		90
12월		100%

4. 가리봉 도시재생사업 추진

주거재생과 (2133-7177)	과장 : 국승열 / 팀장 : 이상근 / 담당 : 최명국

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진
	과․담당관	자족형 도시재생 성장기반 확충
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		가리봉 도시재생사업 추진율	-	-	10	15	20
업무 프로세스		① 활성화계획 수립 → ② 단위사업별 추진계획 수립 → ③ 사업추진협의회 구성 → ④ 단위사업별 사업실행
협력체계 (파트너십)	내 부	단위사업 추진부서(미결정)
	자치구	구로구청
	외 부	총괄계획가, 엔지니어링업체 등 전문가 집단

□ 사업목적

○ 60~70년대 산업 발전의 중심지로써 구로공단의 역사와 다양한 문화가 공존하는 지역

○ 뉴타운 사업에 대한 갈등이 심했던 가리봉 지역에 대하여 물리적 재생과 더불어 사회·경제적 재생을 통한 지역 활성화

□ 사업개요

○ 대상지역 현황

- 위    치 : 구로구 가리봉동 일원(면적 332,929㎡)

- 거주인구 : 19,287(외국인 7,819명 / ‘15.9월 기준)

- 용도지역/지구 : 제2종일반주거지역

○ 사업기간 : 2014~2020

○ 사업내용 : 도시재생활성화계획 수립(2016년) 및 추진(2017년~)

○ 총사업비 : 10,000백만원

- 2016년 2,953백만원(국비 118백만원 포함)

□ 홍보계획

○ 보도자료 제공

- 가리봉 도시재생 주민역량강화사업(주민공모, 재생학교) 추진(3월)

- 우마길 문화의 거리 조성 주제공모(4월)

- 벌집 앵커시설 리모델링 설계용역 발주(4월)

- 활성화계획 확정고시(6월)

- 가리봉 도시재생 국토부 특위 심사(9월)

- 우마길 문화의 거리 착공(10월)

□ 세부추진계획                                            (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
가리봉 도시재생사업 추진율	15		5		15

○ 사업비 집행계획(2016년) : 2,835(시비), 118(국비)             (단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	총괄계획가 운영	30	7.5	7.5	7.5	7.5
2	자문계획가 운영	36	9	9	9	9
3	공동체 활성화사업 홍보	14	-	8	3	3
4	주민역량강화 및 공동체 활성화	90	-	35	35	20
5	주민공모사업	125	-	45	40	40
6	안심길 조성	930	-	-	-	930
7	녹색주차장 설치	210	-	-	-	210
8	쓰레기처리시설 설치	100	-	-	-	100
9	집수리리모델링 및 주택개량 지원	300	-	-	-	300
10	앵커시설 보상 및 매입비	1,000	-	100	900	-

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월
2월	국토부 관문심사(1차) , 운영위원회 분과위원회 구성	5
3월	운영위원회 확대, 분과위원회 운영, 앵커시설 활용방안 구상, 주민공모사업 추진	10
4월	앵커시설(벌집) 리모델링 설계용역 발주, 재생학교(3기)	15
5월	국토부 관문심사(2차)	25
6월	활성화계획 확정 고시	35
7월	앵커시설(벌집) 리모델링 착공	45
8월		55
9월	국토부 특위 심사	60
10월	우마길 문화의 거리 조성추진	80
11월		90
12월		100%

5. 5개 도시재생 시범사업 추진

주거사업기획관(2133-7170)	과장 : 국 승 열 / 팀장 : 방 준 효 / 담당 : 이 재 훈

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	5대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진
	과․담당관	자족형 도시재생 성장기반 확충
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		『5개 도시재생 시범사업』추진율	-	5	15	20	40
업무 프로세스		① 활성화계획 수립 → ② 단위사업별 추진계획 수립 → ③ 사업추진협의회 구성 → ④ 단위사업별 사업실행
협력체계 (파트너십)	내 부	대상지내 연계사업 관련부서
	자치구	5개 자치구(성동, 성북, 서대문, 동작, 강동)
	외 부	지역주민(주민협의체, 공동체 등), 외부전문가(총괄계획가, 자문계획가 등)

□ 사업목적

○ 서울의 낙후되고 쇠퇴한 지역의 지역경제 활성화와 주거환경개선 등을 위해 자치구 공모를 통해 5개소를 선정하여 시범사업을 추진

□ 사업목표

○ 지역주민 중심으로 사회, 문화, 경제, 물리 등 통합적인 재생

○ 활성화계획에 의한 도시재생사업 시행 등을 통한 자생적 환경 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 추진내용

- 시범사업 선정

- 활성화계획수립

- 도시재생사업 추진

○ 총사업비 : 사업당 105억원이내(시‧구 매칭 9:1)

□ 홍보계획

○ 보도자료 제공

- 사업설명회, 마을축제 개최, 단위사업 추진 사항 등

○ 도시재생 소식지 발간

○ 언론사와 공동으로 도시재생 홍보

□ 세부추진계획                                           (단위 : %)

지표별	성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI	5개 도시재생 시범사업 추진율	20		8		20

○ 사업비 집행계획(2016년) : 17,415백만원 (시비)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	주민공모사업	821	228	-	593	-
2	도시재생 지원센터 운영	506	235	-	271	-
3	주민역량강화 및 공동체 활성화	1,774	805	-	969	-
4	앵커시설 건립	5,600	2,061	-	3,539	-
5	단위사업 추진	8,714	-	-	8,714	-

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	추진계획률(%)
1월	· 활성화계획 수립 용역 진행, 공동체 활성화	10
2월	· 활성화계획 수립 용역 진행, 상반기 주민공모사업 계획 수립	15
3월	· 상반기 주민공모사업 접수 및 심사, 주민 역량 강화, 주민 설명회, 주민협의체 임원 선출 및 운영규정 마련, 활성화계획 수립 용역 진행	20
4월	· 주민 역량 강화, 주민공모사업 실행, 공청회 개최, 공동체 활성화	30
5월	· 주민 역량 강화, 주민공모사업 실행, 구의회 의견 청취, 앵커시설 현상 공모	40
6월	· 활성화계획(안) 도시계획심의위원회 상정 및 확정 고시, 상반기 주민공모사업 완료	50
7월	· 앵커시설 및 마중물 사업 설계 착수, 주민역량 강화, 공동체 활성화	60
8월	· 하반기 주민공모사업 계획 수립, 주민역량 강화, 공동체 활성화	65
9월	· 앵커시설 설계 완료 및 발주, 주민역량 강화, 공동체 활성화	75
10월	· 마중물 사업 설계 완료 및 발주, 앵커시설 착공, 주민역량 강화, 공동체 활성화	80
11월	· 앵커시설 건립 및 마중물 사업 시행, 주민역량 강화, 공동체 활성화	90
12월	· ’17년 단위사업 예산편성 및 사업계획 수립	100

.

			재생협력과

1. 주거공공성 혁신

재생협력과 (2133-7232)	과장 : 김장수 / 팀장 : 황왕연 / 담당 : 허 동

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	사람중심의 주택정비사업 안정적 추진
	과․담당관	조합(추진위원회) 투명성 강화
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		조합운영 실태점검 구역 수(개)	4	24	38	30	30
		조합운영 실태점검결과 조치 구역 수(개)	-	-	-	15	30
업무 프로세스		①실태점검 계획 수립 및 점검매뉴얼 작성 → ②실태점검구역 점검계획 통보 및 점검자료 제출 요청 → ③실태점검반 편성 및 교육 실시 → ④사전점검 → ⑤본점검(현장점검) → ⑥점검결과 자문(정책자문위원회) → ⑦점검결과 통보 (자치구, 조합) → ⑧점검결과 조치 및 사레전파
협력체계 (파트너십)	내 부	공동주택과, 주거사업과
	자치구	25개 자치구(정비사업 담당부서)
	외 부	점검(자문)위원

□ 사업목적

○ 정비사업 조합(추진위원회) 운영의 실태를 파악해 제도를 개선하고 투명하고 합리적인 조합 운영을 통한 바른 조합운영 기반 조성

□ 사업개요

○ 기   간 : 2016.1.1 ~ 2016.12.31.

○ 점검대상 : 추진주체(조합, 추진위원회)가 있는 30개 구역

○ 추진내용 : 상반기 15개소, 하반기 15개소 점검

○ 점검내용 : 행정, 자금차입, 예산, 결산, 자금집행, 용역계약, 정보공개 등 전반

○ 총사업비 : 157백만원

- 조합운영 실태점검 및 활성화 지원 등 157백만원

□ 점검결과 조치

○ 부적정 사례 : 수사의뢰, 시정명령, 행정지도 등

○ 점검사례 전파 및 홍보로 바른조합 운영유도

- 추진주체 통보, 클린업시스템에 공개, 보도자료 제공 등

□ 세부추진계획                                               (단위 : 00)

핵심성과지표명	2016년 목표	2/4	4/4
조합운영 실태점검 구역수(개) 조합운영 실태점검결과 조치 구역수(개)	30 15	15 -	15 15

○ 사업비 집행계획(2016년) : 157백만원 (시비 157백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	2/4	4/4
1	조합운영 실태점검 및 활성화 지원 등	157	79	78

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	- ‘15년 점검결과 조치계획 수립(자치구 등 통보)	5%, 5%
2월	- ‘16년 상반기 조합 운영실태 서류점검 실시 3개소	3%, 8%
3월	- ‘16년 상반기 조합 운영실태 현장점검 일정 편성(15개 구역) - 점검일정 자치구 및 조합(추진위원회) 통보	3%, 11%
4월	- ‘16년 상반기 조합운영 실태점검 실시 5개소	12%, 23%
5월	- ‘16년 상반기 조합 운영실태 현장점검 시행 5개소	12%, 35%
6월	- ‘16년 상반기 조합 운영실태 현장점검 실시 5개소	12%, 47%
7월	- ‘16년 상반기 조합 운영실태 점검결과 조치(자치구 등 통보) 15구역	10%, 57%
8월	- ‘16년 하반기 조합 운영실태 현장점검 실시 4개소	15%, 72%
9월	- ‘16년 하반기 조합 운영실태 현장점검 실시 4개소	10%, 82%
10월	- ‘16년 하반기 조합 운영실태 현장점검 실시 4개소	8%, 90%
11월	- ‘16년 하반기 조합 운영실태 현장점검 실시 2개소	6%, 96%
12월	- ‘16년 하반기 조합 운영실태 현장점검 실시 1개소	4%, 100%

2.코디네이터 제도 실시

재생협력과 ( 2133-7236)	과장 : 김장수 / 팀장 : 경한수 / 담당 : 서민수, 박진일

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	5대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	사람 중심 주택정비사업의 안정적 추진
	과․담당관	정비사업 분석진단을 통한 코디네이터제도 정착
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표(KPI)	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		코디네이터(갈등조정) 파견 구역수(개)	-	-	25	30	30
업무 프로세스		①뉴타운 재개발·재건축 정비구역 정체사업장 코디네이터(갈등조정) 파견을 통한 사업지원 시행계획 수립 및 매뉴얼 작성 → ②코디네이터(갈등조정) 파견구역 협의(자치구, 추진주체 등) → ③ 코디네이터(갈등조정) 파견계획 통보 및 자치구 협조요청 → ④코디네이터(갈등조정) 파견 팀 편성 및 교육실시 → ⑤정체사업장 코디네이터 (갈등조정)파견 → ⑥코디네이터(갈등조정) 현장 활동 → ⑦코디네이터(갈등조정) 운영 검토회의(월1회) → ⑧현장 활동결과 통보 (자치구, 조합) → ⑨현장 활동결과 조치 및 사례전파
협력체계 (파트너십)	내 부	주거재생과, 주거사업과, 도시활성화과, 공동주택과
	자치구	25개 자치구(정비사업 담당부서)
	외 부

□ 사업목적

○  장기정체중인 정비구역에 코디네이터(갈등조정)를 파견하여 맞춤형 대안모색 및 갈등조정을 통해 사업정상화 및 진로결정 지원

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016.1.1 ~ 2016.12.31

○ 사업내용 : 장기정체중인 정비구역에 코디네이터(갈등조정) 파견을 통한 사업정상화 추진

○ 파견대상 : 정비사업 갈등등으로 정체되어 있는 정비구역

○ 파견시기 : 3차에 거쳐 30개 구역 파견 및 수시 파견

· 1차 파견(2월 중 10개 구역), 2차 파견(5월 중 10개 구역),  3차 파견(8월중 10개 구역)

○ 업무내용 : 정비사업 정체구역의 찬·반 주민 등 이해관계자간의 갈등을  중재하고, 주민에게 정확한 정보를 제공하여 이해당사자간 조정·합의 등을 통해 정체요인 해소등

□ 코디네이터(갈등조정) 파견결과 조치

○ 사업정상화 구역, 재생사업 전환 구역 등 사례 전파 및 홍보로 정비구역 정체사업장의 올바른 진로결정 유도

- 추진주체 통보, 클린업시스템 홍보, 반상회보 게재, 사례교육

○ 갈등·정체원인 등 정비사업 문제점에 대해 집중 검토하여 맞춤형 대안 제시등

□ 세부추진계획

지표별	성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI	코디네이터(갈등조정) 파견 구역수(개)	30	10	10	10	-

○ 사업비 집행계획(2016년) : 537백만원 (시비 537백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	재개발․재건축 정비구역 정체사업장 코디네이터(갈등조정) 파견	346	-	179	179	179

□ 월별추진계획

월별	추진계획	추진율(%)
1월	- 정비사업 코디네이터제도 운영 개선계획 수립	8
2월	- 정비사업 코디네이터 파견구역 추진사항 파악(공정관리카드 작성) - 정비사업 코디네이터 운영자문단 구성·운영 및 인력보강계획 수립 - 1차 정비사업 코디네이터 파견구역 현황 파악 및 파견 - 정비구역 코디네이터 수시 파견	16
3월	- 코디네이터 공정관리(1분기) - 1차 정비구역 현장모니터링 실시(62개 구역) 및 코디네이터 파견	25
4월	- 코디네이터 수시 파견	33
5월	- 2차 정비사업 코디네이터 파견구역 현황 파악 및 파견	40
6월	- 코디네이터 공정관리(2분기) - 코디네이터 수시 파견	50
7월	- 2차 정비구역 현장모니터링 실시(29개 구역) 및 코디네이터 파견 - 코디네이터 수시 파견	58
8월	- 3차 정비사업 코디네이터 파견구역 현황 파악 및 파견	66
9월	- 코디네이터 공정관리(3분기) - 코디네이터 수시 파견	75
10월	- 3차 정비구역 현장모니터링 실시(60개 구역) 및 코디네이터 파견	83
11월	- 코디네이터 수시 파견	90
12월	- 코디네이터 공정관리(4분기) - 코디네이터 파견 완료(30개 구역)	100

.

			주거사업과

1. 재정비사업의 추진

주거사업과 (2133-7218)	과장 : 신중수 / 팀장 : 차창훈, 최태승, 윤옥광 담당 : 장길홍, 김현, 전정훈, 조중환, 장영석, 김민경, 홍인철, 오승한, 정경일, 손영란

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	사람 중심 주택정비사업의 안정적 추진
	과․담당관	재정비사업의 안정적 추진
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		재정비사업 단계별 추진율	59	64	69	75
업무 프로세스		① 재정비촉진계획 결정 → ② 추진위원회 구성 → ③ 조합설립 → ④ 사업시행인가 → ⑤ 관리처분인가 → ⑥ 이주 및 철거 → ⑦ 공사착공 → ⑧ 준공
협력체계 (파트너십)	내 부	도시재생본부, 주택건축국
	자치구	은평구, 영등포구, 서대문구, 송파구, 동대문구, 노원구, 성북구, 관악구, 동작구 금천구, 용산구, 종로구, 양천구, 강서구, 강북구, 마포구, 강동구, 중랑구
	외 부	국토교통부, SH공사, LH공사

□ 사업목적

○ 시민의 주거환경을 개선하고 삶의 질의 향상과 지역균형발전 도모

○ 지역 및 계층간 위화감을 경감하여 상호 소통하는 사회 구현

□ 사업개요

○ 기    간 : 2003 ～ 2020

○ 추진내용

- 조합설립 : 2개구역(천호3, 노량진5)

- 사업시행인가 : 2개구역(휘경3, 수색8)

- 관리처분인가 : 17개구역(신길12, 영등포1-3, 길음1, 상계4, 신정2-1, 신길음, 장위4, 흑석3, 장위7, 상계6, 중화1, 수색9, 수색6, 장위10, 길음역세권, 노량진2, 노량진6)

- 착공 : 2개구역(장위5, 북아현1-1)

- 준공 : 4개구역(가재울4, 합정2, 긴등마을, 왕십리3)

□ 세부추진계획                                           (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
재정비사업 단계별 추진율	75	70	71	73	75

○ 사업비 집행계획(2016년) : 백만원                          (단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	예산사업 없음	-	-	-	-	-

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	조합설립 : 천호3, 관리처분 : 신길12, 영등포1-3	10%
2월	조합설립 : 노량진5	15%
3월	관리처분 : 길음1 착공 : 장위5 준공 : 가재울4	25%
4월	관리처분 : 상계4	30%
5월	사업시행 : 휘경3 착공 : 북아현1-1	35%
6월	관리처분 : 신정2-1, 신길음	40%
7월		40%
8월	관리처분 : 장위4, 흑석3 준공 : 합정2	50%
9월	준공 : 긴등마을	55%
10월	관리처분 : 장위7, 상계6, 중화1, 수색9	70%
11월	관리처분 : 수색6 준공 : 왕십리3	80%
12월	사업시행 : 수색8 관리처분 : 장위10, 길음역세권, 노량진2, 노량진6	100%

2. 단독주택재건축 추진

주거사업과 (2133-7229)	과장 : 신중수 / 팀장 : 정병찬 / 담당 : 양동진, 장재영

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	사람 중심 주택정비사업의 안정적 추진
	과․담당관	단독주택재건축의 안정적 추진
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		단독주택재건축사업 단계별 추진율	28	38	56	66	70
업무 프로세스		① 정비구역지정 → ② 추진위원회 구성 → ③ 조합설립 → ④ 사업시행인가 → ⑤ 관리처분인가 → ⑥ 이주 및 철거 → ⑦ 공사착공 → ⑧ 준공
협력체계 (파트너십)	내 부	도시재생본부, 도시계획국, 주택건축국
	자치구	은평구, 도봉구, 노원구, 강북구, 중랑구, 동대문구, 광진구, 성동구, 성북구, 종로구, 용산구, 서대문구, 마포구, 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 금천구, 동작구, 관악구, 강남구, 송파구, 강동구, 서초구,
	외 부	국토교통부

□ 사업목적

○  시민의 주거환경을 개선하고 삶의 질의 향상과 지역균형발전 도모

○ 지역 및 계층 간 위화감을 경감하여 상호 소통하는 사회 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ~ 2020

○ 추진내용

- 구역지정 : 3개구역(화곡1, 갈현동 12-248, 사당 303번지)

- 추진위승인 :1개구역(화곡1)

- 조합설립 : 3개구역(역촌2, 응봉1, 방배14)

- 사업시행인가 : 4개구역(홍은2, 면목4, 방배6, 공덕1)

- 관리처분인가 : 6개구역(미아3-111, 대림3, 면목5, 방배5, 동작1, 사당3)

- 착공 : 11개구역 (신사19-190, 미아 9-1, 연희1, 방배3, 면목3, 월계2, 신수1,               응암3, 창전1, 사당2, 망원1)

- 준공 : 3개구역 ( 대림1, 홍제동 무궁화단지, 월계3)

□ 세부추진계획                                               (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	2/4	4/4
단독주택재건축사업 단계별 추진율	66	61	66

○ 사업비 집행계획(2016년)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	2/4	4/4
1	예산사업 없음

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	구역지정 : 화곡1 착공 : 신사 19-190 준공 : 홍제동 무궁화단지, 월계3	15%
2월		15%
3월	사업시행인가 : 면목4 관리처분인가 : 대림3	22%
4월	구역지정 : 갈현동12-248 조합설립 : 역촌2 관리처분인가 : 동작1	29%
5월	조합설립 : 응봉1 착공 : 미아 9-1, 방배3, 응암3, 창전1	45%
6월	구역지정 : 사당 303 조합설립 : 방배14 사업시행인가 : 홍은2 착공 : 신수1, 사당2 준공 : 대림1	65%
7월	관리처분인가 : 미아 3-111 착공 : 면목3	70%
8월		70%
9월	추진위원회 : 화곡1 사업시행인가 : 방배6 착공 : 월계2	80%
10월	관리처분인가 : 사당3	87%
11월		87%
12월	사업시행인가 : 공덕1 관리처분인가 : 방배5 착공 : 연희1, 망원1	100%

.

			주거환경개선과

1. 주거환경관리사업 추진

주거환경개선과(2133-7251)	과장 : 박경서 / 팀장 : 양성태, 곽석권, 이종욱, 최광천, 나세랑 / 담당 : 박성신, 정윤진, 박용구, 한민영, 강필중, 이동호, 김철기, 성인선, 임동수

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	공동체 활성화를 위한 노후주거지 재생 추진
	과․담당관	쾌적한 주거환경 조성
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년 이전	2014년	2015년	2016년	2017년
		주거환경관리사업 추진 구역수	43	55	65	70	75
업무 프로세스		① 구역선정 신청(구) → ② 대상지 선정(시) → ③ 계획수립 → ④ 계획 결정고시 → ⑤ 기본 및 실시설계 → ⑥ 공사시행 및 준공
협력체계 (파트너십)	내 부	도시계획과, 마을공동체담당관, 사회적경제과 등
	자치구	25개 자치구 주거환경관리사업 추진 부서
	외 부	국토교통부

□ 사업목적

○ 전면 철거방식에서 벗어나 지역특성과 커뮤니티가 유지되는 저층주거지 보전 관리

○ 물리적 환경개선을 넘어 물리·사회·경제등 종합적 주거재생

○ 공동체 활성화 및 정비기반시설·공동이용시설의 확충 등을 통한 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 계속

○ 추진내용 : 정비기반시설·공동이용시설 확충 및 공동체활성화

○ 사업비 : 10,775백만원

□ 홍보계획

○ 서울시홈페이지, 소식지 및 보도자료 제공 홍보

○ 주민, 자치구, 전문가 등 역량강화를 위한 세미나 및 워크숍 개최

○ 주민 등을 대상으로 주민설명회 및 현장견학 등을 통한 홍보

○ 마을재생 주민역량강화 교육 및 학생공모전 실시

□ 세부추진계획                                               (단위 : 구역)

핵심성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
주거환경관리사업 추진 구역수	5	-	-	2	3

※ 상반기(1/4, 2/4)는 ‘16년 핵심과제(희망지사업) 지원을 위하여 주거환경관리사업 선정 추진을 유보함.(하반기 구역선정 추진)

○ 사업비 집행계획(2016년) : 10,775백만원 (시비 10,775백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	주민참여형 주거지 재생사업계획 수립	1,550	116	193	270	971
2	주민참여형 재생사업	9,225	691	1,153	1,614	5,767

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	주거환경관리사업 소식지 발간(매월 발간) 주거환경관리사업 네트워크 T/F팀 구성 및 제1차 회의	5
2월	집수리 박람회 및 심포지엄 개최(일산 킨텍스) 주거환경개선 공감대 확산을 위한 교육 및 홍보 실행계획 수립	10
3월	학생공모전 공고, 보도자료 배포 주거환경관리사업 지역재생활동가 위촉장 수여 및 실무교육	20
4월	집수리 박람회 개최 집수리아카데미 개최(1차) 학생공모전 심포지엄 및 설명회 개최	35
5월	주거환경관리사업 홍보 및 주민역량강화 교육(1차) 북한산 저층주거지 종합계획 수립	45
6월	주민설명회 및 현장견학 등 주거환경관리사업 홍보 주거환경관리사업 네트워크 T/F팀 상반기 활동평가회 개최	50
7월	집수리지원센터 설치 및 운영	55
8월	학생공모전 작품 접수	60
9월	주거환경관리구역 네트워크 주민대표 모임 개최	70
10월	집수리아카데미 개최(2차) 주거환경관리사업 홍보 및 주민역량강화 교육(2차) 주거환경관리사업 네트워크 T/F팀 상반기 활동평가회 개최	80
11월	알기쉬운 집수리매뉴얼 제작 학생공모전 시상식 및 전시	90
12월	2016년 주거환경관리사업 네트워크 T/F팀 활동보고서 발간 2017년 주거환경관리사업 네트워크 T/F팀 구성 및 활동계획서 수립	100%

2. 성곽마을 재생사업

주거환경개선과 (2133-7248)	과장 : 박 경 서 / 팀장 : 곽 석 권 / 담당 : 이 정 식

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	따뜻한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	공동체 활성화를 위한 노후주거지 재생 추진
	과․담당관	성곽마을 보전․관리사업 추진
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		성곽마을 재생 실행계획 추진율	-	5%	42.5%	65.0%	85.5%
업무 프로세스		① 재생계획 수립 → ② 공공부문 설계 → ③ 공공부문 공사 ※ 전 과정에 걸쳐 ④ 공동체활성화사업 추진
협력체계 (파트너십)	내 부	한양도성도감, 문화예술과, 도시농업과 등
	자치구	종로구, 성북구, 중구
	외 부	｢성곽마을 주민네트워크｣ , 마을별 주민협의체

□ 사업목적

○ 한양도성 주변을 역사와 삶이 공존하는 성곽마을로 재생하여 미래의 융합자산 창출

○ 한양도성과 조화된 마을경관 관리로 ’17년 유네스코 세계유산 등재 지원

□ 사업개요

○ 추진목표 : 한양도성의 풍경과 마을살이를 존중하는 성곽마을

○ 사업대상 : 한양도성 주변 9개권역, 22개 마을 (1,672천㎡)

- 이화‧충신권, 부암권, 다산권, 행촌권, 명륜‧혜화권, 성북권, 삼선권, 창신권, 광희권

○ 주요내용

- 지역공동체와 마을자산을 특화하여 스토리가 있는 성곽마을 가꾸기

‣ 마을자원 조사를 통해 마을별 스토리텔링, 주민과 함께 특성화 마을 재생계획 수립

- 마을일꾼 육성, 앵커시설 조성을 통해 마을 가치를 높이고 마을 자생력 확보

‣ 마을일꾼 발굴·육성, 테마와 연계된 앵커시설 조성 등

- 마을의 가치공유 프로그램 운영 등을 통해 공감대 확산, 인식 전환을 통해 주민참여 확대

○ 사업기간 : 2014.11 ~ 단계별 추진 (이화‧충신, 행촌 등 2개권역 우선 추진)

○ 사 업 비 : 14,399백만원 (16년 예산) ※ 전체 예산은 권역별 계획수립 후 최종확정

□ 홍보계획 : 시민의 공감, 주민의 참여 가속화

○ 가치공유‧주민네트워크 강화를 위해 시민단체, 성곽마을 주민네트워크가 주도하는 공동체 활성화사업 등 착수 (’16.3)

○ 지역맞춤 공동체 활성화 거점 조성 ⇢ 앵커시설 운영주체 공모 (’16.3.~4)

○ 주민역량 강화를 위해 시민누리공간 등 주민공모사업 추진 (’16.4)

○ 성곽마을 맞춤형 홍보 본격화

- (행사) 가치공유프로그램(5회/년), 학술회의(1회/년), 주민네트워크 성과보고(1회/년), 시민누리공간 준공식/앵커시설 개관/마을장터 등(10건)

- (홍보) 파워블로거 홍보단(2회, 각 30명), 청년 서포터즈 운영, 성곽마을버스 시범운영 (2개소), 홍보자료 제작‧배포 (SNS, BI제작, 동영상 등)

□ 세부추진계획                                               (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	2/4	4/4
성곽마을 재생사업 추진율	65.0%	53.5%	65.0%

○ 사업비 집행계획(2016년) : 14,399백만원 (시비 15,950백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	2/4	4/4
1	성곽마을 보전관리사업	14,399	5,810	8,589

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	∘｢이화충신권｣ 순성길 종합정비 기본계획 및 기본설계 착수 ∘｢행촌권｣ 옥상경작소 시범설치, 도시농업공동체 등록	42.5%
2월	∘15년 공동체활성화사업 성과보고 ∘｢행촌권｣ 앵커시설 1,2호점 실시설계용역 발주	42.5%
3월	∘16년 공동체활성화사업 용역발주 ∘앵커시설 운영주체 공모 ∘15년 시민누리공간 조성 준공식	47.5% (행촌설계 5%)
4월	∘｢이화충신권｣ 재생계획 확정 ∘16년 시민누리공간 공모 ∘1차 가치공유프로그램 개최	48.0% (공동체활성화 0.5%)
5월	∘｢부암권｣, ｢삼선권｣ 재생계획 확정 ∘｢광희권｣, ｢성북권｣ 재생계획(공동체 역량강화사업) 착수 ∘2차 가치공유프로그램 개최	51.3% (재생계획 3.0%, 공동체활성화 0.3%)
6월	∘｢행촌권｣, ｢명륜‧혜화권｣ 재생계획 확정 ∘｢성곽마을 주민네트워크｣ 성과공유회의	53.5% (재생계획 2.0% 공동체활성화 0.2%)
7월	∘｢다산권｣ 재생계획 확정 ∘3차 가치공유프로그램 개최	53.8% (공동체활성화 0.3%)
8월	∘16년 시민누리공간 조성 준공식	54.0% (공동체활성화 0.2%)
9월	∘｢이화충신권｣ 순성길 종합정비 기본계획 발표 ∘4차 가치공유프로그램 개최	54.3% (공동체활성화 0.3%)
10월	∘성곽마을 학술회의 개최 ∘｢이화충신권｣ 순성길 종합정비사업 공사착수	59.5% (이화 공사착수 5%, 공동체활성화 0.2%)
11월	∘5차 가치공유프로그램 개최 ∘｢이화충신권｣ 충신 연극인마을(임대주택) 입주	64.8% (공사착수 5%, 공동체활성화 0.3%)
12월	∘｢성곽마을 주민네트워크｣ 성과공유회의	65.0% (공동체활성화 0.2%)

			동남권조성반

1. 현대자동차부지 개발사업 추진

동남권조성반 (2133-8266)	담당관 : 김용학 / 팀장 : 김창호 / 담당 : 김남식, 최나영

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	균형발전 신경제거점 조성
	과․담당관	동남권 국제교류복합지구 조성
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		현대차부지 개발사업 추진률	-	-	50%	80%	100%
업무 프로세스		① 제안서 보완 및 실무TF(’15.1~‘15.9) → ② 사전협상 협상조정협의회 운영 (’15.10~‘16.2) → ③ 협상정책회의 및 협상결과 발표(’16.2) → ④ 세부개발 계획 및 교통영향평가, 전략환경영향평가 접수 및 입안(’16.2~3) → ⑤ 주민공람, 부서 협의, 평가서 심의․협의(‘16.3~4) → ⑥ 도시․건축위원회 심의(’16.5) → ⑦ 건축심의, 각종영향평가(‘16.7~12) → ⑧ 건축허가, 착공(’17.1~6)
협력체계 (파트너십)	내 부	도시관리과, 교통정책과, 환경정책과, 건축기획과
	자치구	강남구
	외 부	현대자동차그룹

□ 사업목적

○ 현대차부지를 공공성 있는 개발로 서울의 미래 핵심공간 및 세계적 명소로 조성하여 국가 및 지역경제 활성화에 기여하고

○ 국제수준의 공연장과 전시․컨벤션시설, 글로벌 업무시설을 전략적으로 갖춘 미래 서울의 MICE산업 중심지로 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015 ~ 2021

○ 사업면적 : 79,341.8㎡

○ 건축규모 : 지하 6층/지상 105층(높이 553m), 6개동, 연면적 92만㎡

○ 건축용도 : 업무시설, 숙박시설(호텔), 문화및집회시설(전시장,회의장,공연장),

판매시설, 제1종근린생활시설(변전소)

○ 추진경위

- 개발사업 제안서 접수 및 실무TF, 전문가 자문 보완(‘15.1월 ~ 9월)

- 도시계획변경 사전협상조정협의회 운영(‘15.10 ~ ’16. 2)

- 현대차부지 개발방향, 사전협상 결과 대외발표 (‘16.2.17)

- 사전협상 완료 및 세부개발계획 주민제안서 접수(‘16.2.19)

○ 총사업비 : 없음(민간사업)

□ 홍보계획

○ 사전협상 결과발표 등 수시 기자설명회 개최로 방송․신문보도 유도

○ 국제교류복합지구 홈페이지 구축․운영 : ´15.4~

○ 복합지구 SNS(페이스북, 트위터) 계정 활성화로 소식 확산

○ 도시계획(재생), MICE관련 해외 전문기관 발행 매거진 기사화

□ 세부추진계획

(단위 : %)

핵심성과 지표명	2016년 목표	2/4	4/4
현대차부지 개발사업 추진률	80	40	80

○ 사업비 집행계획(2016년) : 없음(민간사업)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
	계

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	- 협상조정협의회 개최 및 도시․건축공동위원회 자문	10%
2월	- 협상조정협의회 및 협상정책회의 개최 - 협상결과 발표 및 종료 통보	30%
3월	- 세부개발계획 및 교통영향평가, 전략환경영향평가 입안 및 주민공람 협의	40%
4월	- 시의회 의견청취(보고) 및 교통영향평가 본심의	45%
5~6월	- 도시․건축공동위원회 심의 - 교통영향평가, 전략환경영향평가 협의내용 통보	50%
7~9월	- 건축심의, 교통․한경․재해 영향평가 진행. 수도권정비심의 개최	70%
10~11월	- 건축허가 접수 및 보완, 관련부서 협의	80%
12월	- 건축허가 처리	100%

2. 지구단위계획 재정비 사업

동남권조성반 (2133-8270)	담당관 : 김용학 / 탐장 : 김형건 / 담당 : 이은중

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	균형발전 신경제거점 조성
	과․담당관	동남권 국제교류복합지구 조성
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		지구단위계획 재정비 사업 추진율		30	90	100
업무 프로세스		① 지구단위계획(안) 작성 → ② 주민공람 및 관계기관 협의 → ③ 사전자문 및 도시건축공동위원회 심의 → ④ → 보완사항 조치 및 결정 고시
협력체계 (파트너십)	내 부	관광정책과, 체육진흥과, 도로계획과, 시설계획과, 한강사업본부 등
	자치구	강남구, 송파구
	외 부	현대차그룹, 삼성생명, 기재부(국유재산정책과), 국토교통부, 시 교육청 등

□ 사업목적

○ 국제교류복합지구 조성사업의 내용을 법정 도시관리계획인 지구단위계획에 반영함으로써 국제교류복합지구 조성의 안정적 실현과 종합적⋅체계적 관리방안 마련

□ 사업개요

○ 계획명 : 국제교류복합지구(코엑스~잠실운동장 일대) 지구단위계획 재정비

○ 기  간 : `14. 7. ~ `16. 8.

○ 위  치 : 강남구 삼성동, 대치동, 송파구 잠실동 일대

○ 면  적 : 1,663,652[eqn: m ^{2}]

○ 추진경위

- `14. 4. 코엑스~잠실운동장 일대 국제교류복합지구 조성계획 발표

- ’14.7.7.   : 코엑스~잠실운동장 도시관리계획 수립 용역 착수

- ’15.1.~3. : 지구단위계획 수립 절차 주관부서(도시관리과) 정기 협의

- ’15.5.21.  : 지구단위계획구역 및 서울의료원 특별계획구역 결정(변경) 고시

- ’15.7.~ 8. : 국제교류복합지구 조성 관련 설문조사

- ’15.10.     : 지구단위계획 재정비(안) 보고 (관련 부서장)

□ 행정2부시장, 도시재생본부장, 도시계획국장, 도시관리과장

- ’15.9.~‘16.1.  : 국제교류복합지구 교통 TF 구성․운영 (5회차 진행)

○ 추진내용

- 코엑스~잠실운동장 일대 종합발전계획을 구체화한 국제교류복합지구 마스터플랜 수립

- 대규모부지 가이드라인 결정, 중⋅소규모 필지 내 지원기능 강화

- 대규모 부지 개발에 따른 주변 중․소규모 필지 관리방안 마련

- 대중교통체계 구체화 및 보행가로 계획, 가로활성화/차별화 용도 도입

- 지역여건에 부합하는 실현가능한 계획 수립으로 자발적 주민참여 유도

- 개발에 따른 교통, 환경 등 영향분석 및 개선대책 마련

○ 총사업비 : 493백만원

- 2014년 예산 200백만원

- 2015년 예산 293백만원

- 2016년 예산 54,930천원(2015년 예산 중 사고이월된 사업비)

□ 실현방향

○ 전문가, 시민 등 거버넌스 구성․운영을 통한 공감대 형성

○ 민자/재정 등 사업별 특성에 따른 영역 구분, 특화 개발 유도

○ 주변 도시조직과의 조화, 공동개발의 실효성 등을 고려하여 자율적 공동개발 유도

○ 용적률 및 높이 인센티브 운용으로 계획목표 및 공공성 확보

□ 세부추진계획                                               (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	2/4	3/4
	100%	98%	100%

○ 사업비 집행계획(2016년) : 54,930천원 (시비 54,930천원)

(단위 : 천원)

연번	예산서상 세부사업명	계	2/4	4/4
1	코엑스~잠실운동장 일대 도시관리계획 수립 용역	54,930	0	54,930

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	• 국제교류복합지구 마스터플랜(안) 마련 • 국제교류복합지구 지구단위계획(안) 마련	10%
2월	• 계획설명서 등 주민공람 도서 작성	20%
3월	• 국제교류복합지구 조성 마스터플랜 수립 발표 (기자설명회) • 지구단위계획 주민공람 실시 • 교통영향평가서 접수, 관계기관 협의	30%
4월	• 지구단위계획 주민공람(계속) • 지구단위계획 관계부서 협의 • 교통영향평가 심의	40%
5월	• 교통영향평가 심의 완료 및 보완서 작성 • 지구단위계획 도시․건축공동위원회 사전자문	60%
6월	• 지구단위계획 도시․건축공동위원회 심의	80%
7월	• 지구단위계획(안) 보완서 작성	90%
8월	• 지구단위계획 결정 고시	100%
9월
10월
11월
12월

			동남권계획반

1. 잠실종합운동장 주경기장 리모델링

부서명 : 동남권계획반	담당관 : 강성욱 / 팀장 : 오장환 / 담당 : 우인식

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	동남권 국제교류 복합지구 조성
	과․담당관	잠실종합운동장 주경기장 리모델링
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		잠실종합운동장 주경기장 리모델링 타당성조사 및 기본계획 수립률				90%	100%
업무 프로세스		① 타당성조사(‘15.11~’16.5)→②기본계획수립 방침 →③기본계획수립 용역 발주 → ④기본계획수립 용역 착수(‘16.6) →⑤ 지역주민 및 이해관계자 등 사업추진 거버넌스 구축운영 →⑥ 리모델링 기본계획 수립 완료
협력체계 (파트너십)	내 부	체육정책과,재정관리담당관, 체육시설관리사업소, 도시기반시설본부
	자치구	송파구, 강남구
	외 부	기획재정부, 서울시교육청, 대한육상경기연맹, 프로축구연맹

□ 사업목적

○ 서울의 미래 핵심공간 및 세계적 명소로 조성

- 스포츠, 문화엔터테인먼트 핵심기능 강화

- 역사적 상징성 고려 원형 유지하되, 다양한 용도로 복합화

□ 사업개요

○ 기    간

- 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 타당성조사 및 기본계획 수립 : ‘15.11~’17.2

※ 잠실종합운동장 주경기장 리모델링  총 사업기간 : ‘15.11 ~ ’23.3

○ 추진내용

- 전문가 자문 및 시민‧이해관계자 의견수렴으로 사회적 공감대 형성(‘15.1~현재)

- 잠실종합운동장 주‧보조경기장 리모델링 타당성조사 (‘15.11~현재)

○ 사업비 : 390백만원

사업명	계	'16	'17
잠실종합운동장 주경기장 리모델링 기본계획 수립	390	390	0

□ 홍보계획

(온라인 홍보)

- 국제교류복합지구 홈페이지 구축‧ 운영 : ‘15.4 ~

- 복합지구 SNS(페이스북, 트위터)계정 활성화로 소식 확산

- 도시계획(재생) 전문기관 발행 매거진 기사화

(기타 홍보)

- 국제교류복합지구 조성사업 추진자문단 구성‧운영 : ‘16.3 ~사업종료 시까지

※ 분야별 전문가, 지역주민대표, 이해관계자, 민간단체 등 구성‧운영: 월1회 개최

- 기자설명회, 토론회, 워크숍, 간담회 등에 참여

□ 세부추진계획                                               (단위 : %)

핵심성과지표명	2016년 목표	2/4	4/4
잠실종합운동장 주경기장 리모델링 타당성조사 및 기본계획 수립율	90	40	90

○ 사업비 집행계획(2016년) : 390백만원

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	2/4	4/4
1	잠실종합운동장 주경기장 리모델링	390	175	215

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링을 위한 현황조사 및 분석, 사례조사	5%
2월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 구상(안) 분야별 전문가 자문회의 개최	10%
3월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 타당성 조사용역 중간보고회 개최	20%
4월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 사업추진 분과별 자문단 자문회의 개최	30%
5월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 타당성 조사용역 완료보고회 개최	40%
6월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 기본계획 수립 용역 착수보고회	45%
7월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링을 위한 기초조사 및 기본계획 분석	50%
8월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 기본계획 구상(안) 분야별 자문실시	60%
9월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 기본계획 중간보고회 개최	70%
10월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 기본계획수립(안) 외부전문가 자문	80%
11월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 기본계획 수립 관련 주민 등 간담회 개최	90%
12월	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 기본계획 수립 보고회 개최	100%

2. 잠실종합운동장 일대 스포츠․문화․MICE 복합공간 조성

부서명 : 동남권계획반	담당관 : 강성욱 / 팀장 : 김경호 / 담당 : 류인종

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표

(성과목표)

서울시

옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울

실․본부․국

동남권 국제교류 복합지구  조성

과․담당관

잠실종합운동장 일대 스포츠․문화․MICE 복합공간 조성

핵심성과지표

(KPI)

지표명

실적치

목표치

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

잠실종합운동장 민간사업자

RFC 공모 추진율

80

100

업무 프로세스

마스트플랜 발표		민간투자사업 추진계획 수립		RFC공모 관리 용역 발주		RFC공모 관리 용역계약·착수		RFC공고 및 제안서 접수		제안서 평가 및 사업기본계획
		‘16.3		‘16.4				‘16.7~’16.11		‘16.12

	타당성 및 적격성 분석 PIMAC/시 공투		시설사업 기본계획수립		도시계획 자문/ 시재정계획심의		중앙민간투자심의 /시의회 동의		대상사업지정 및 시설기본계획고시 /사업계획서 제출

	사업계획서 평가 / 협상대상자 지정/ 협상(PIMAC 위탁)		실시협약체결 PIMAC 위탁		실시계획승인 /공사시행

협력체계

(파트너십)

내  부

투자유치과, 재정관리담당관(서울연구원)

자치구

송파구, 강남구

외  부

기재부(국유재산정책과), 국토부, 서울지방국토관리청, 서울시 교육청,

□ 사업목적

○ 국제교류복합지구의 핵심공간인 잠실종합운동장 일대를 민간투자 자본을 유치하여 MICE 및 문화·체육시설 등 조성

- 전시컨벤션(10만㎡ 내외), 야구장(3.5만석), 실내체육관(1.1만석) 수영장(200석)

○ 민간투자사업의 성공적 추진을 위해 잠재적인 투자자들을 대상으로 콘셉트 제안 요청(Request for Concepts, ‘이하RFC’)을 통하여 향후 개발 방향에 반영

○ RFC를 통해 제안된 개발 콘셉트 등은 향후 사업자 선정을 위한 투자계획서 제출요청(Request for Proposals, ‘이하 RFP’) 기준을 설정하는데 활용코자 함

□ 사업개요

○ 총 사업기간 : 2014년 ~ 2023년

- 민간투자사업(RFC) 공모 : ‘16.4~12월

○ 사업방식 : 2단계(RFC+RFP)공모에 의한 정부고시방식

· 콘셉트 제안 요청서  : Request for Concepts, ‘이하RFC’

· 투자계획서 제출요청 : Request for Proposals, ‘이하 RFP’

※ 민간투자법에 의한 민간투자사업 [BTO(Build-Transfer-Operate)] 방식에 의거 추진

○ 민간투자사업 추진 사업범위

사 업 범 위	사업내용(용도 및 규모)
	○ 전시․컨벤션 - 전용면적 10만㎡내외 ○ 호텔 /수익형임대시설 ○ 실내 스포츠컴플렉스 - 실내체육관 : 1.1만석(공연 등 포함) - 수영장 : 200석(공연 등 포함) ○ 야구장 이전․신축 - 3.5만석 이상(문화,상업 등 포함) ○ 수상레저시설 및 입체 데크 ※ 총사업비 : 1조 5천억 원(민자 유치)

□ 홍보계획

○ 민간자본 투자유치 설명회 : ‘16.6~8월

- 우선 잠재 타깃기업을 발굴(1차 Long List 작성)하고, 1차 명단 중 관심기업을 대상으로 1:1 개별 기업  면담을 통한 투자자 유치

※ 대상자 : 개발사업자(디벨로퍼), 설계업체, 개발 및 Finance

□ 세부추진계획                                              (단위 : 추진율)

핵심성과지표명	2016년 목표	2/4	4/4
잠실종합운동장 민간사업자 RFC 공모 추진율	80%	40%	80%

○ 사업비 집행계획(2016년) : 400백만원 (시비 400백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	2/4	4/4
1	동남권 국제교류 복합지구 조성계획 수립	400	200	200

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	투자자, 디벨로퍼 등 이해관계자 의견 청취	10%
2월	민간투자사업 기본 원칙 수립(가이드 라인 마련)	25%
3월	잠실종합운동장 일대 민간투자사업 추진계획 수립 및 용역 발주	30%
4월	착수 보고회 및 해외투자유치설명회 업체 리스트(1차) 작성	33%
5월	전시컨벤션 및 체육시설 등 이해관계자 의견 청취	35%
6월	해외 투자유치 설명회 및 기업체 면담	40%
7월	민간투자사업(RFC) 공고 해외 투자유치 설명회 및 기업체 면담	50%
8월	RFC 사업제안 현장설명회 (질의응답)	55%
9월	사업제안서 심사.평가 계획 수립	60%
10월	심사.평가 위원 선정	70%
11월	민간투자사업(RFC) 제안서 접수 및 평가	80%
12월	시설사업기본계획(RFP) 수립 착수(~‘17.4월)	100%

			동북4구사업추진반

1. 창동·상계 신경제중심지(CBD) 조성

부서명 동북4구사업추진반(2133-8275)	반장 : 정 거 택 / 팀장 : 오 대 중 / 담당 : 강 대 양

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	균형발전 신경제거점 조성
	과․담당관	일자리 생성 및 수도권, 동북부 지역상생 및 균형발전 실현
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		창동상계 신경제중심지 조성 계획 추진율	-	10%	80%	100%
업무 프로세스		① 방침 수립 → ② 사전 행정절차 이행(기술용역 심사 등) → ③ 입찰공고 → ④ 계약체결 및 착수 → ⑤ 선도사업부지 개발구상 및 사업화 방안 마련(’15.3) → ⑦ 경제기반형 도시재생활성화계획 수립(’16.12)
협력체계 (파트너십)	내 부	경제정책과, 체육정책과, 인생이모작지원과, 창업지원과, 문화예술과
	자치구	도봉구청, 노원구청
	외 부	경찰청, 서울메트로, SH공사

□ 사업목적

○ 낙후된 창동·상계지역의 경제 활성화와 지역균형발전을 위한 마스터 플랜 수립 등 경제기반형 도시재생활성화계획 수립을 통해 신경제중심지로 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 도봉구 창동역 및 노원구 차량기지 일대

○ 사업내용 : 선도사업부지 마스터플랜 수립, 경제기반형 도시재생활성화계획 수립

- 전략시설 도입 용도, 사업방식, 기업유치 및 제원조달 방안, 도시재생 활성화계획

○ 추진방법 : 학술+기술용역으로 계약 추진

○ 사업기간 : 2015. 3 ∼ 2017.12.

- 플랫폼 창동 61 조성 및 운영                     (‘15. 9. ~ ’16.12.)

- 동북권 체육공원 조성                             (‘15.11. ~ ’17.12.)

- 서울아레나 복합문화시설 민간제안 적격성 검토     (‘16. 1. ~ ’16. 7.)

- 서울 아레나건립 문화예술거점 조성                (‘16. 4. ~ ’17. 2.)

- 경제기반형 도시재생 활성화계획 수립              (‘15. 3 ~ ’16.12.)

- 동북4구도시재생협력지원센터 운영                (‘15. 6. ~ ’16.12.)

- 도봉면허시험장 이전 재배치계획 수립              (‘16. 3. ~ ’16. 8.)

- 창동상계 동서간연결도로 기본계획(기본구상) 수립  (‘16. 3. ~ ’16.12)

○ 사 업 비 : 15,473백만원

- 동북권 체육공원 조성                            14,324백만원

- 서울아레나 복합문화시설 조성(민간투자사업)          100백만원

- 서울 아레나건립 문화예술거점 조성                   350백만원

- 동북4구도시재생협력지원센터 운영                    369백만원

- 도봉면허시험장 이전 재배치계획 수립                   80백만원

- 창동상계 동서간연결도로 기본계획(기본구상) 수립     200백만원

- 동북권 체육공원 보행환경 개선                        50백만원

○ 추진내용

- ‘14. 1.  : ’행복4구플랜‘ 발표

- ‘15. 2.  :「창동·상계 신경제중심지조성」및 단계별 실행계획 발표

- ‘15. 3.  : 도시재생활성화계획수립 착수 및 플랫폼창동61’ 붐업 추진계획 수립

- ‘15. 4.  : 국토부, 경제기반형 도시재생 공모사업 지원 (6년간 최대 250억원 지원)

- ‘15. 6.  : 동북4구 도시재생협력지원센터 개소

- ‘15. 7.  : 창동운동장 체육시설물 이전계획 수립

- ‘15. 9.  : 서울아레나 복합문화시설 건립 추진계획 수립

- ‘15.12.  : 동북4구 발전  컨퍼런스 개최

- ‘15.12.  : 서울아레나 국제포럼 개최

- ‘16. 1.~ 2. : 도시재생활성화계획(안) 작성 및 국토부 1차 관문심사

- ‘16. 3.      : 내부보고 및 위원회 사전 자문 및 공청회 개최

- ‘16.4.～ 5.  : 지방의회 및 관계 행정기관 의견 수렴

- ‘16. 6. : 2차 관문심사 및 지방 도시재생위원회(도시계획위원회) 심의

- ‘16. 7. : 중앙행정기관 협의 및 도시재생기획단 검토(국토교통부)

- ‘16. 8. : 도시재생특별위원회 심의(국무총리)

- ‘16. 9. : 국가지원사항 결정(국토교통부)

- ‘16.12.  : 도시재생활성화계획 확정(서울시)

□ 홍보계획

○ 추진방향

- 주요 이슈별로 다양한 홍보매체를 적극 활용하여 효율적 홍보 추진

- 시민의 눈높이에 맞춘 체감형 홍보를 통해 정책이해도 제고

- 적극적 현장 홍보를 통해 시민참여 및 소통 제고

○ 주요 홍보내용

- 창동상계 신경제중심지 도시재생사업 추진

- 서울아레나 등 선도사업 추진

- ‘플랫폼 창동 61’ 개장식 및 본격운영

□ 세부추진계획

지표별	성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI	창동·상계 신경제중심지 조성 계획 추진율	100%	80	85	90	100

○ 사업비 집행계획(2016년 ) : 15,473백만원(시비)

(단위 : 백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	동북권 체육공원 조성	14,324	20		7,204	7,100
2	서울아레나 복합문화시설 조성(민간투자사업)	100	100
3	서울 아레나건립 문화예술거점 조성	350	100	75		175
4	동북4구도시재생협력지원센터 운영	369	118	113	107	31
5	도봉면허시험장 이전 재배치계획 수립	80	24		56
6	창동상계 동서간연결도로 기본계획(기본구상) 수립	200	60		60	80
7	동북권 체육공원 보행환경개선	50		15		35

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	창동상계 도시재생활성화계획 수립(안) 작성	15%
2월	내부보고 및 위원회 사전 자문	20%
3월	공청회 개최	30%
4월	지방의회 및 관계 행정기관 의견 수렴	35%
5월	지방의회 및 관계 행정기관 의견 수렴	40%
6월	2차 관문심사	50%
7월	지방 도시재생위원회(도시계획위원회) 심의	60%
8월	중앙행정기관 협의 및 도시재생기획단 검토	70%
9월	도시재생특별위원회 심의	80%
10월	국비 지원사항 결정	85%
11월	창동상계 도시재생활성화계획 결정도서 작성	95%
12월	창동상계 도시재생활성화계획 확정․고시	100%

2. 동북4구플랜 실행과제 추진

부서명 동북4구사업추진반(2133-8282)	반장 : 정 거 택 / 팀장 : 오 대 중 / 담당 : 노 재 원

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	5대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	균형발전 신경제거점 조성
	과․담당관	동북4구플랜 실현을 통한 지역균형발전
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		동북4구플랜 실행과제 추진율	-	18%	47%	60%	69%
업무 프로세스		① 추진계획 수립 → ② T/F 운영 → ③ 실행계획 수립 → ④ 실행과제 관리 및 신규 발굴
협력체계 (파트너십)	내 부	경제정책과 등 28개 부서
	자치구	성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
	외 부	서울도시철도공사

□ 사업목적

○ 市와 동북권 4개 자치구가 공동으로 수립한 최초의 협력적 지역발전 모델인 행복4구플랜의 성공적 실현으로 타 권역 확산 등 지역균형발전의 가치 실현

□ 사업개요

○ 대    상 : 동북권 4개 자치구(성북구, 강북구, 도봉구, 노원구)

○ 사업내용

대 상	완료 (’14∼’15)	추진 중			장기추진 (잠정보류)	비고
		’16년	’17년	’18 이후
72	31	8	9	16	8

정책 방향	7개 핵심과제	대상	추 진 사 업
			단기 ('14)	중기 ('15∼'17)	장기 ('18 이후)	기타 (미확정)
계		72	13	35	16	8
지역발전 기반조성	➊ 창동·상계 新경제중심지 조성	4	1		2	1
	➋ 도시계획 제도적 지원	4	1	1	2
	➌ 중랑천 중심의 녹색생활 환경 기반 강화	8	1	4	2	1
지역 자원 활용	➍ 지식·교육특성화	16	1	10	4	1
	➎ 자연역사문화 관광벨트 조성	20	8	8	2	2
지역현안 해소	➏ 문화·복지·체육시설 확충	11	1	7	2	1
	➐ 생활기반시설 개선	9	-	5	2	2

○ 추진내용

-  2014. 1. : 동북4구 발전전략(‘별칭’ 행복4구 플랜) 발표

-  2014. 3. : 동북4구 발전전략 추진계획 수립

-  2015.3.∼12. : 동북4구플랜 추진상황보고회 및 신규과제 검토보고회
-  2015.10.16  : 행정 1·2부시장 및 동북4구 발전협의회 간담회

□ 홍보계획

○ 실행과제별 추진상황 시민공개(홈페이지 등)

□ 세부추진계획                                           (단위 : 백만원)

지표별	성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI	동북4구플랜 실행과제 추진율	60%	10%	20%	33%	60%

○ 사업비 집행계획(2016년) :     백만원 (시비)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	동북4구플랜 실행과제 관리	-	-	-	-	-

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	추진계획률(%)
1월	․ 동북4구플랜 추진현황 계획 수립	3%
2월	․ 실행과제 관리 및 T/F운영	6%
3월	․ 실행과제별 추진상황 종합평가 보고회(1분기)	10%
4월	․ 신규과제 관리 및 T/F운영	13%
5월	․ 실행과제 관리 및 T/F운영	17%
6월	․ 실행과제별 추진상황 종합평가 보고회(2분기)	20%
7월	․ 신규과제 관리 및 T/F운영	25%
8월	․ 실행과제 관리 및 T/F운영	30%
9월	․ 실행과제별 추진상황 종합평가 보고회(3분기)	33%
10월	․ 신규과제 관리 및 T/F운영	43%
11월	․ 실행 및 신규과제 관리 및 T/F운영	55%
12월	․ 실행과제별 추진상황 종합평가 보고회(4분기)	60%

3. 서울아레나 착공 및 문화예술거점 조성계획

부서명 동북4구사업추진반(2133-8275)	반장 : 정 거 택 / 팀장 : 김 동 철 / 담당 : 최 승 렬

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	꿈꾸는 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울
	실․본부․국	균형발전 신경제거점 조성
	과․담당관	선도사업 추진으로 성공적인 창동․상계 신경제중심지 조성
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치			목표치
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
		서울아레나건립 및 문화예술거점 조성	-	-	-	60%	40%
업무 프로세스		① 방침 수립 → ② 민간제안 접수(’15.11.) → ③ 민간제안 검토(내부, S-PIMs) → ④ 민간제안 적격성검토(PIMAC, ’16.1.~7.) → ⑤ RFP작성 및 각종 심의(’16.10) → ⑥ 기획재정부 민투심의(’16.11.) → ⑦ 시의회 승인 및 제3자 제안공고(’17.2.) → ⑧ 우선협상대상자 선정 및 협상 → ⑨ 실시협약 체결(’17.9.) → ⑩ 실시계획 승인 및 착공(’17.12.)
협력체계 (파트너십)	내 부	체육정책과, 도시계획과, 재정관리담당관, 서울연구원 공공투자관리센터(S-PIMs)
	자치구	도봉구
	외 부	기획재정부, 한국개발연구원 공공투자관리센터(PIMAC)

□ 사업목적

○ 서울아레나 건립 및 문화예술거점 조성을 선도사업으로 추진하여 성공적인 창동·상계 신경제중심지 조성을 이루기 위함

□ 사업개요

○ 위    치 : 도봉구 창동역일대

○ 사업내용 : 서울아레나 복합문화시설 건립, 문화예술거점 조성 계획 수립

○ 추진방법

- 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업: 민간제안 방식 추진

- 문화예술거점 조성 계획 수립: 일반 용역 수행

○ 사업기간 : 2015. ∼ 2017.12.

- 창동․상계 신경제중심지 조성 1단계로 서울아레나 건립 추진 발표 (’15. 2.)

- 서울아레나 복합문화시설 건립계획 수립(시장방침)	(’15. 9.)

- 서울아레나 민간투자사업 설명회 개최	(’15. 9.)

- 플랫폼 창동 61 조성 및 운영	(‘15. 9. ~ ’16.12.)

- 서울아레나 민간제안서 접수 및 검토	(’15.11. ~ ’16.1.)

- 서울아레나 국제포럼 개최	(’15.12.)

- 서울아레나 복합문화시설 민간제안 적격성 검토	(‘16. 1. ~ 7.)

- 서울아레나 민간제안 적격성검토 관련 현장 확인	(’16. 2.)

- 서울아레나 해외사례 공동조사(시, PIMAC, 도봉구) (’16.3.)

- 문화예술거점 조성 계획 수립	(‘16. 5. ~ ’17. 3.)

- 제3자제안공고문(RFP) 작성	(‘16. 5 ~ ’16. 8.)

- 재정계획심의 및 공유재산심의	(‘16. 9 ~ ’16.10.)

- 기획재정부 민간투자사업심의	(‘16.10 ~ ’16.11.)

- 시의회 동의	(‘16.11 ~ ’16.12.)

- 제3자제안공고	(‘17. 1 ~ ’17. 3.)

- 우선협상대상자 지정, 협상, 실시설계	(‘17. 4 ~ ’17. 6.)

- 문화예술거점 조성 세부 실행 계획 수립	(‘17. 5. ~ ’18. 3.)

- 실시협약안 재정계획심의	(‘17. 6 ~ ’17. 7.)

- 기획재정부 민간투자사업심의(2차)	(‘17. 8 ~ ’17. 9.)

- 시의회 보고	(‘17. 9.)

- 실시협약 체결	(‘17. 9.)

- 건축허가 및 실시협약 체결	(‘17.10 ~ ’17.11.)

- 착공	(‘17.10 ~ ’17.11.)

○ 사 업 비 : 1,291백만원 (민간투자비 4,700억원)

- 서울아레나 복합문화시설 조성	591백만원

※ 민간투자비 약 4,700억원

- 문화예술거점 조성 계획 수립	700백만원

○ 추진내용

- ’14. 1.  : ’행복4구플랜‘ 발표

- ’15. 2.  :「창동·상계 신경제중심지조성」및 단계별 실행계획 발표

※ 서울아레나 건립 추진 발표

- ’15. 3.  : 도시재생활성화계획수립 착수 및 플랫폼창동61’ 붐업 추진계획 수립

- ’15. 9.  : 서울아레나 복합문화시설 건립 추진계획 수립

- ’15. 9.  : 서울아레나 민간투자사업 설명회 개최

- ’15. 9. ~ ’16.12. : 플랫폼 창동 61 조성 및 운영

- ’15.11. : 서울아레나 민간제안서 접수 및 검토

- ’15.12.  : 서울아레나 국제포럼 개최

- ’16. 1.  : 서울아레나 민간제안 적격성검토 의뢰(시→PIMAC)

- ’16. 2.  : 서울아레나 민간제안 적격성검토 관련 현장 확인

- ’16. 3.  : 서울아레나 해외사례 공동조사(시, PIMAC, 도봉구)

- ’16. 5. ~ ’17. 3. : 문화예술거점 조성 계획 수립

- ’16. 5. ~ ’16. 8. : 제3자제안공고문(RFP) 작성

- ’16. 9. ~ ’16.10. : 재정계획심의 및 공유재산심의

- ’16.10. ~ ’16.11. : 기획재정부 민간투자사업심의

- ’16.11. ~ ’16.12. : 시의회 동의

□ 홍보계획

○ 추진방향

- 주요 이슈별로 다양한 홍보매체를 적극 활용하여 효율적 홍보 추진

- 시민의 눈높이에 맞춘 체감형 홍보를 통해 정책이해도 제고

- 적극적 현장 홍보를 통해 시민참여 및 소통 제고

○ 주요 홍보내용

- 서울아레나 등 선도사업 추진

- 문화예술거점 조성 계획 수립

- ‘플랫폼 창동 61’ 개장식 및 본격운영

□ 세부추진계획

지표별	성과지표명	2016년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI	서울아레나 착공 및 문화예술거점 조성계획	60%	10	25	45	60

○ 사업비 집행계획(2016년 ) : 450백만원(시비)

(단위 : 백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	서울아레나 복합문화시설 착공(민간투자사업)	100			100
2	서울 아레나건립 문화예술거점 조성계획	350	100	75		175

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	서울아레나 민간제안 적격성검토 의뢰	10%
2월	서울아레나 민간제안 적격성검토 관련 현장확인	20%
3월	서울아레나 해외사례 공동조사(시, PIMAC, 도봉구)	30%
4월	서울아레나 민간제안 적격성검토 관련 자문회의 개최	35%
5월	문화예술거점 조성 계획 수립 용역 계약 및 착수보고	45%
6월	서울아레나 민간제안 제3자제안공고문(RFP) 작성 자문회의 개최	50%
7월	서울아레나 민간제안 적격성검토 결과 통보(PIMAC→시)	60%
8월	서울아레나 제3자제안공고문(RFP) 작성 완료	70%
9월	재정계획심의 및 공유재산심의	80%
10월	기획재정부 민간투자사업심의 의뢰	85%
11월	기획재정부 민간투자사업심의 완료	95%
12월	시의회 동의	100%