			도시재생본부

1. 서울형 도시재생 모니터링・평가 체계 구축 및 운영

(1) 연 번	도시재생본부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	재생정책과		담당자		홍건표 조민선		전화번호		2133-8633 2133-8628
(4) 상위 전략목표	도시재생사업 지원체계 구축				상위 KPI		서울형 도시재생 모니터링・평가 체계 구축 및 운영 추진 추진율
(5) 전략/성과목표	서울형 도시재생 모니터링•평가 체계 구축 및 운영
(6) 2016년 목표값	80		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	서울형 도시재생 모니터링・평가 체계 구축 및 운영 추진 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 서울형 도시재생 모니터링•평가 체계 구축 및 운영 - 사업 추진현황 모니터링 - 공유 워크숍을 통한 정성적 분석 및 사례 확산 - 패널(포커스 그룹) 인터뷰를 통한 지역과의 소통 강화 - 도시재생 지표 마련을 통한 활성화 계획 수립 및 조정 지원 - 도시재생사업 평가를 통한 활성화 계획 진단 및 환류 ○ 추진방법 : 학술용역(도시재생지원기관인 서울연구원에서 수행) ○ 사업기간 : ’16. 3. ~ ’17. 3. - ’16. 3.~’16. 12. : 서울형 모티터링 체계 마련 및 운영 - ’17. 1.~’17. 3. : 서울형 도시활성화계획 평가 ○ 2016년 추진계획 : 60% (누적 100%) - 1/4분기(10%) : 용역 발주 및 계약, 방안 수립 - 2/4분기(35%) : 사업추진현황 모니터링 및 공유 워크숍 - 3/4분기(60%) : 패널(포커스 그룹) 인터뷰 - 4/4분기(80%) : 도시재생 활성화 지표 마련
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 실적			-
	2016년(Y) 목표			80%
	2017년(Y+1) 목표			100%
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반 기(○) 년( )
	실적입력주기 : 반 기(○) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값(○) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	10%	35%				60%		80%

2. 한강협력계획 4대 핵심사업 추진율

(1) 연 번	도시재생본부-2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공개발센터	담당자		장승권		전화번호	2133-8368
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성			상위 KPI		한강협력계획 4대 핵심사업 추진율
(5) 전략/성과목표	한강협력계획 4대 핵심사업의 안정적 추진
(6) 2016년 목표값	20	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	한강협력계획 4대 핵심사업 추진율 (공정율)
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 위 치 : 여의도 한강공원 일대 (여의나루역 인근 수변부 및 제방변) - 규 모 : 부지면적 35,000㎡, 건축물 연면적 28,100㎡ · 수상시설(통합선착장·피어데크) : 부유체 10,800㎡, 연면적 9,100㎡ · 육상시설(여의테라스·복합문화시설) : 토지면적 24,200㎡, 연면적 19,000㎡ ○ 용역개요 - 용 역 명 : 한강협력계획 4대 핵심사업 기본계획 수립 용역 - 용역내용 · 사업기획 : 개발컨셉, 마스터플랜, 콘텐츠, 사업수익구조, 사업추진방식 · 기본계획 : 비전 및 목표, 기본계획, 구조∙수리안정성, 실현화 방안 등 - 용 역 비 : 830백만원 (사업기획 컨설팅, 기본계획 수립) - 용역기간 : `16. 3 ~ `17. 5 (착수일로부터 15개월) ○ 추진계획 - 2015 (5%) : 한강 자연성 회복 및 관광자원화 종합계획 마련 - 2016. 1/4분기 (7%) : 기본계획 및 타당성 조사 추진 - 2016. 2/4분기 (10%) : 기본계획 및 타당성 조사 추진 - 2016. 3/4분기 (15%) : 육상시설 타당성 재조사 추진, 공모추진 - 2016. 4/4분기 (20%) : 수상시설 기본 및 실시설계 추진 - 2017. (40%) : 육상시설 공모 / 수상 및 육상시설 기본 및 실시설계 - 2018. (60%) : 수상시설 착공 및 준공 - 2019. (80%) : 육상시설 착공 및 준공 - 2020. (100%) : 사업자 선정 및 운영
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		-
	2014년(Y-2) 실적		-
	2015년(Y-1) 실적		5
	2016년(Y) 목표		20
	2017년(Y+1) 목표		40
	목표값 설정근거		연차별 공정대비
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기(○), 년( )
	실적집계방법 : 시점값(○), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	10%				20%

3. 세종대로 일대 역사문화특화공간조성 공정률

(1) 연 번	도시재생본부-3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공재생과		담당자		천주영		전화번호		2133-8653
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성				상위 KPI		세종대로 일대 역사문화특화공간 조성 공정률
(5) 전략/성과목표	지역거점형 특화공간 조성
(6) 2016년 목표값	50		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	총 사업부지 면적을 근거로 조성 비율을 공정률로 산정
(10) 정의 및 설명	2015년부터 2017년도까지 지속적으로 추진해나가야 하는 사업으로서, ‘15년도에는 철거와 광장설계, ‘16년도 문화재 발굴조사 및 지하공간 공사착공, ‘17년 지하공간 조성완료까지 공정을 나누어 산정
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 목표			20
	2016년(Y) 목표			50
	2017년(Y+1) 목표			100
	목표값 설정근거			예정공정표를 근거로 하여 2015년 목표 ‘국세청별관 철거 및 임시광장조성’ 달성완료 2016년 목표 문화재 발굴조사 및 지하공간 공사착수 달성 시 50 2017년 목표 특화공간 조성공사 완료 달성 시 100
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 년
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	25	30				40		50

4. 남산 예장자락 재생사업 설계 및 사업 추진율

(1) 연 번	도시재생본부 - 4
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공재생과		담당자		현학범		전화번호		2133-8648
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성				상위 KPI		남산 예장자락 재생사업 설계 및 사업 추진율
(5) 전략/성과목표	지역거점형 특화공간 조성
(6) 2016년 목표값	50		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	○ 남산 예장자락 설계 및 사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 위치 : 남산 예장자락, 남산 정상부 - 기간 : 2015.1 ~ 2018.2 (38개월간) - 진행 : 기본구상 → 기본계획 → 현상공모 → 기본 및 실시설계 → 공사 ○ 추진계획 - 2016 1/4분기 (10%) : 타당성조사 용역 및 설계공모 완료 - 2016 2/4분기 (25%) : 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2016 3/4분기 (40%) : 문화재 조사 및 철거 완료 - 2016 4/4분기 (50%) : 공사 착수 - 2017 (80%) : 공사시행 - 2018 (100%) : 공사 및 준공
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적			20
	2016년(Y) 목표			50
	2017년(Y+1) 목표			80
	목표값 설정근거			전체 사업 추진목표 달성을 위한 계획수립 및 사업완료시점을 기준으로 목표값 설정
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 년
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	10	25				40		50

5. 장안평 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	도시재생본부-5
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	도시활성화과		담당자		이시우		전화번호		2133-4633
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성				상위 KPI		장안평 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자동차 복합산업 집적지 육성
(6) 2016년 목표값	100		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	○ 도시재생활성화계획 수립 공정
(10) 정의 및 설명	○ 추진근거 - 행정2부시장 방침 제104호(시설계획과-3396, 2013.3.28.) ○ 추진방향 - 장안평 일대의 자생적 지역산업재생 기반 마련을 위해 물리적‧비물리적 개선방안을 고려한 종합적 재생계획 마련 ○ 추진내용 -‘도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법’에 따른 도시재생활성화계획 수립 ○ 추진계획(분기별) - 1/4분기 : 공청회 공고 - 2/4분기 : 활성화계획 승인·고시 - 3/4분기 : 장안평 자동차산업 종합정보센터 공사 착공 - 4/4분기 : 도시관리계획 승인·고시
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 실적			- 총괄계획가 선정, 도시재생지원센터 설치·운영
	2016년(Y) 목표			1건(100%)
	2017년(Y+1) 목표			-
	목표값 설정근거			도시재생활성화계획 수립여부
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기 (상반기)	2/4분기 (상반기)				3/4분기 (하반기)		3/4분기 (하반기)
	30%	80%				90		100

6. 세운상가군 재생사업 추진율

(1) 연 번	도시재생본부-6
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	역사도심재생과	담당자			오승제, 한철민, 박학균			전화번호	2133-8498
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성					상위 KPI		역사도심관리 실현기반 구축 추진율
(5) 전략/성과목표	세운상가군 활성화
(6) 2016년 목표값	75		(7) 단 위			%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	○ 세운상가군 재생사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 보행재생(광폭횡단보도, 다시세운광장 정비, 세운보행교 설치, 데크 정비 등) - 산업재생(거점공간 운영계획, 운영자 선정, 세운리빙랩 운영 등) - 공동체재생(다시세운시민협의회 운영, 주민역량강화, 주민공모사업, 상생협약 등) ○ 사업 추진율 - 1/4분기(20%) : 착수 발표, 공공선도사업 착공 - 2/4분기(50%) : 주민역량강화, 주민공모사업 시행 - 3/4분기(60%) : 거점공간 운영자 공모, 세운 리빙랩 시범운영 - 4/4분기(75%) : 다시세운광장 준공, 수리협동조합 설립
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적			5
	2015년(Y-1) 실적			30
	2016년(Y) 목표			75
	2017년(Y+1) 목표			100
	목표값 설정근거			연차별 공정 대비
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기
	실적집계방법 : 시점값
	2/4분기 (상반기)						4/4분기 (하반기)
	50%						75%

7.현대자동차부지 개발사업 추진율

(1) 연 번	도시재생본부 - 7
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권조성반	담당자		김남식 최나영 설성혜		전화번호	2133-8266 2133-8263 2133-8273
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성			상위 KPI
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2016년 목표값	80	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	○ 현대자동차부지 개발사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 현대자동차부지 개발사업 - 기간 : 2014.5 ~ 2016.4 (2년간) - 진행 : 도시계획변경 사전협상 발표(16.3월) → 세부개발계획 입안(16.3) → 주민공람, 부서협의(16.3~4) → 도시․건축위원회 심의(16.5) → 건축심의, 각종영향평가(16.7~12) → 건축허가,착공(17.1~6) ○ 추진계획 - 1/4분기 (40%) : 협상결과 발표 및 지구단위계획 주민제안서 입안,주민공람 - 2/4분기 (60%) : 지구단위계획 도시건축위원회 심의 , 교통영향평가 통보 - 3/4분기 (70%) : 건축심의 및 각종영향평가 접수 협의 - 4/4분기 (80%) : 건축허가 접수 및 부서협의
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적		50%
	2016년(Y) 목표		80%
	2017년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거		시정4개년계획, 16년 핵심과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	60%				80%

8. 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 타당성조사 및 기본계획 수립률

(1) 연 번	도시재생본부-8
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권계획반	담당자		우인식		전화번호	2133-8236
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성			상위 KPI		잠실종합운동장 주경기장 리모델링 타당성조사 및 기본계획 수립률
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2016년 목표값	90	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	○ 잠실종합운동장 주경기장 타당성조사 및 기본계획 수립 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 잠실종합운동장내 주, 보조경기장 - 총 사업기간 : 2015.11 ~ 2017. 2 - 기간 : 타당성조사 및 기본계획 ‘16. 1 ~ ’17. 2 - 진행 : 타당성조사 착수→ 타당성조사 완료 → 기본계획 → 지역 주민, 이해 관계자 등 사업추진 자문단 구성‧운영 → 기본계획 수립 완료 ○ 시업추진계획 - 타당성 조사용역 중간 보고(20%) - 리모델링 기본계획 착수 (30%) - 리모델링 기본계획 중간보고(60%) - 리모델링 기본계획 수립 (90%)
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적
	2016년(Y) 목표		90%
	2017년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( ) ※ 반기 측정주기 지표 부서별 1개이상 포함
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	40 %				90 %

9. 창동·상계 신경제중심지 조성 계획 추진율

(1) 연 번	도시재생본부 - 9
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동북4구추진반		담당자		강대양		전화번호		2133-8284
(4) 상위 전략목표	지속가능한 도시계획 체계를 확립 하여 사람중심의 도시조성				상위 KPI		창동·상계신경제중심지조성계획 수립율
(5) 전략/성과목표	지역발전을 위한 기반조성
(6) 2016년 목표값	100		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	창동·상계 신경제중심지조성 계획 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 마스터플랜 수립 및 경제기반형 도시재생활성화계획 수립 - 전략시설 도입 용도, 사업방식, 기업유치 및 재원조달방안 - 경제기반형 도시재생 활성화계획 - 창동 복합문화공연시설 기본계획 용역을 통한 구체화 - 플랫폼 창동61‘ 조성에 따른 계획 수립 및 설계공모 등 ○ 추진방법 : 학술 + 기술용역으로 계약 ○ 사업기간 : 2015. 9. ∼2017. 12. - 플랫폼 창동 61 조성 및 운영 (‘15. 9. ~ ’16.12.) - 동북권 체육공원 조성 (‘15.11. ~ ’17.12.) - 서울아레나 복합문화시설 민간제안 적격성 검토 (‘16. 1. ~ ’16. 7.) - 서울 아레나건립 문화예술거점 조성 (‘16. 4. ~ ’17. 2.) - 경제기반형 도시재생 활성화계획 수립 (‘15. 3 ~ ’16.12.) - 동북4구도시재생협력지원센터 운영 (‘15. 6. ~ ’16.12.) - 도봉면허시험장 이전 재배치계획 수립 (‘16. 3. ~ ’16. 8.) - 창동상계 동서간연결도로 기본계획(기본구상) 수립 (‘16. 3. ~ ’16.12) ○ 2015년 추진실적 : 80% - 1/4분기(35%) : 도시재생 활성화계획 및 플랫폼창동61’ 붐업 추진계획 - 2/4분기(50%) : 동북4구 도시재생협력지원센터 개소 - 3/4분기(65%) : 서울아레나 복합문화시설 건립 추진계획 수립 - 4/4분기(80%) : 동북4구 발전 컨퍼런스 개최 및 서울아레나 국제포럼 ○ 2016년 추진계획 : 100%, ※ 국토부의 활성화계획 결정절차 추가(변경) - 1/4분기(85%) : 활성화계획 작성 및 1차관문심사, 관계기관 협의 - 2/4분기(90%) : 2차관문심사 및 의회 의견청취 - 3/4분기(95%) : 지방재생위원회 자문 및 도시재생특별위원회 심의 - 4/4분기(100%) : 국비지원 및 창동‧상계 도시재생활성화계획 확정 고시
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 실적			10%
	2015년(Y) 목표			80%
	2016년(Y+1) 목표			100%
	목표값 설정근거			마스터플랜 및 계획수립 공정율
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 반 기( ○) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기(상반기)				3/4분기		4/4분기(하반기)
	80	85				90		100

10. 도시재생 희망지 선정 개소 수

(1) 연 번	도시재생본부 - 10
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		박범진		전화번호		2133-7165
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		희망지 선정 개소
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2016년 목표값	15		(7) 단 위		개소		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	창신숭인 도시재생사업 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 희망지 선정 : 최대 20곳 □ 도시재생활성화사업 희망지 15곳, 주거환경관리사업 희망지 5곳 - 희망지 규모 □ 도시재생활성화사업 : 10만㎡ 이상(1~3개 행정동 범위), □ 주거환경관리사업 : 10만㎡ 미만(1개 행정동 범위) - 선정일정 : ‘16. 1 ~ 5월 □ 1~3월 : 설명회 및 주민컨설팅, 4월말 : 공모접수, 5월 : 희망지선정 ⇒ 선정된 희망지는“주민역량강화사업”시행 ○ 사업진도 [2016년] - 희망지사업 설명회 개최 : 10% - 희망지 선정 : 20% - 주민역량강화사업 추진 : 70% [2017년] - 희망지사업 설명회 개최 : 10% - 희망지 선정 : 20% - 주민역량강화사업 추진 : 70%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표
	2015년(Y-1) 실적
	2016년(Y) 목표			15
	2017년(Y+1) 목표			8
	목표값 설정근거			도시재생 희망지사업 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기(○) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기(○) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		15						15

11. 창신·숭인 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	도시재생본부 - 11
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		소석영 이수진		전화번호		2133-7171
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		창신숭인 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2015년 목표값	40		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	창신숭인 도시재생사업 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 주거환경개선 : 안전안심골목길조성, 주민공동이용시설조성 등 - 지역경제활성화 : 봉제박물관, 공공작업장 조성, 채석장부지 명소화 등 - 역사문화자원화 : 백남준기념공간, 마을탐방로 조성 등 - 주민역량강화 : 주민공모사업, 주제공모사업, 마을배움터(교육) ○ 사업진도 [2014년] - 주민공동이용시설 부지매입 등 : 8% - 봉제공동작업장 및 봉제박물관 부지 매입 등 : 1% - 주민역량강화사업 추진 : 1% [2015년] - 주민공동이용시설 부지매입, 안전안심골목길 조성 : 10% - 봉제박물관, 봉제공공작업장 부지 매입, 봉제일자리지원 등 : 14% - 백남준기념공간 조성, 마을탐방로기반조성 등 : 5% - 주민역량강화사업 추진 : 1% [2016년] - 주민공동이용시설 조성, 안전안심골목길, 자투리땅쉼터조성 : 20% - 봉제박물관, 봉제공공작업장 조성 등 : 9% - 백남준기념공간, 마을탐방로 조성 추진 등 : 9% - 주민역량강화사업 추진 : 2% [2017년] - 주민공동이용시설 조성, 안전안심골목길, 자투리땅쉼터조성 : 4% - 봉제박물관, 봉제공공작업장 조성 등 : 10% - 백남준기념공간, 마을탐방로 조성 추진 등 : 5% - 주민역량강화사업 추진 : 1%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표			10
	2015년(Y-1) 실적			30
	2016년(Y) 목표			40
	2017년(Y+1) 목표			20
	목표값 설정근거			창신숭인 도시재생사업 추진율에 따른 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년(
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		12						40

12. 해방촌 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	도시재생본부 - 12
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		전동수		전화번호		2133-7170
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		해방촌 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2015년 목표값	15		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	자족형 도시재생 성장기반 확충
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 공동체 활성화를 통한 도시재생사업 추진으로 자생적 성장기반 확충 ○ 사업진도 〔2015년〕 - 도시재생 활성화계획 구상안 마련 : 5% - 사업추진 조직 구성 운영(주민협의체, 사업추진협의회 등) : 2% - 지원센터 설치운영 : 3% 〔2016년〕 - 도시재생 활성화계획 마련 : 5% - 주민역량강화사업(주민공모, 주민교육 등) 추진 : 3% - 공동체활성화 사업 추진 : 2% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 5% 〔2017년〕 - 공동체 활성화, 주민역량강화 사업 추진 : 5% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 15%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표
	2015년(Y-1) 실적			10
	2016년(Y) 목표			15
	2017년(Y+1) 목표			20
	목표값 설정근거			해방촌 도시재생사업 추진율에 따른 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년(
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		5						15

13. 가리봉 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	도시재생본부 - 13
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		최명국		전화번호		2133-7177
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		최명국 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2016년 목표값	15		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	자족형 도시재생 성장기반 확충
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 주거환경 : 노후불량주택 집수리, 소규모 행복주택 도입 등 추진 - 생활환경 : 기반시설정비, 안심길조성, 녹색주차장, 가리봉시장 환경개선 등 - 앵커시설 : 가족통합지원센터, 가리봉루트 등 추진 - 공동체육성 : 현장소통마당, 마을학교, 마을활동가 역량강화 등 추진 ○ 사업진도 〔2015년〕 - 도시재생 활성화계획 수립 : 5% - 사업추진 조직 구성 운영(주민협의체, 사업추진협의회 등) : 2% - 앵커시설 부지매입 및 조성(지원센터 설치운영) : 3% 〔2016년〕 - 도시재생 활성화계획 고시 : 5% - 주민역량강화사업(주민공모, 재생학교 운영) : 3% - 공동체활성화 사업 추진 : 2% - 우마길 특화거리 조성 등 도시재생사업 추진 : 5% 〔2017년〕 - 주민역량강화사업(주민공모, 재생학교 운영, 공동체 활성화 등) : 5% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 15%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표
	2015년(Y-1) 실적			10
	2016년(Y) 목표			15
	2017년(Y+1) 목표			20
	목표값 설정근거			가리봉 도시재생사업 추진율에 따른 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		5						15

14. 『5개 도시재생 시범사업』추진율

(1) 연 번	도시재생본부 - 14
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		이재훈		전화번호		2133-7174
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		5개 도시재생 시범사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2015년 목표값	20		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	5개 도시재생 시범사업 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 시범사업 선정 - 활성화 계획수립 - 도시재생사업 추진 ○ 사업진도 [2014년] - 시범사업선정 : 5% [2015년] - 도시재생 활성화계획 수립 : 5% - 사업추진 조직 구성 운영(주민협의체, 사업추진협의회 등) : 4% - 주민역량강화사업 추진(재생대학, 마을학교 운영, 공동체활성화 등) : 3% - 앵커시설 부지매입 : 3% [2016년] - 도시재생 활성화계획 고시 : 3% - 주민역량강화사업 추진(재생대학, 마을학교 운영, 공동체활성화 등) : 3% - 앵커시설 건립 착수 : 7% - 단위사업별 도시재생사업 착수 : 7% [2017년] - 주민역량강화사업 추진(재생대학, 마을학교 운영, 공동체활성화 등) : 10% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 30%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표			5
	2015년(Y-1) 실적			15
	2016년(Y) 목표			20
	2017년(Y+1) 목표			40
	목표값 설정근거			5개 시범사업 추진계획에 따른 진도율
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		8						20

15. 성곽마을 재생사업 추진율

(1) 연    번

도시재생본부 - 15

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

주거환경개선과

담당자

이정식

전화번호

2133-7248

(4) 상위 전략목표

공동체 활성화를 위한 노후주거지

재생추진

상위 KPI

성곽마을 재생사업 추진 율

(5) 전략/성과목표

쾌적한 주거환경조성

(6) 2016년 목표값

65.0

(7) 단 위

%

(8) 가 중 치

(9) 지 표 산 식

성곽마을 8개권역 추진단계에 따른 이행달성도 계량화

(10) 정의 및 설명

∘정    의 : 8개권역 업무비중, 추진단계별 소요기간 등 고려하여 추진율 정함

- 성공모델 2개권역 : 이화‧충신, 행촌

- 기타     6개권역 : 부암, 삼선, 명륜‧혜화, 다산, 성북, 광희

∘추 진 율 : 착수시점 기준으로 함

- 성공모델 2개권역 (40%) :  각 20% = 재생계획(10%) + 설계(5%) + 공사(5%)

- 기타     6개권역 (50%) :  각  8% = 재생계획( 3%) + 설계(2%) + 공사(3%) + 2%

- 공동체활성화사업 (10%) :  4년 × 2.5%/년 = 가치공유프로그램 (1.5%)+ 성곽마을주민네트워크 (1.0%)

① 재생계획 (40%)

- 성공모델 (20%) : 2개권역 × 10%        - 주민설명회 5%,   주민워크숍 5%

- 기타권역 (20%) : 6개권역 ×  3%  + 2% - 주민설명회 1.5%, 주민워크숍 1.5%

② 공공부문 설계 (22%)

- 성공모델 (10%) : 2개권역 × 5%   - 기타권역 (12%) : 6개권역 × 2%

③ 공공부문 공사 (28%)

- 성공모델 (10%) : 2개권역 × 5%   - 기타권역 (18%) : 6개권역 × 3%

④ 공동체활성화사업(10%) : 4년 × 2.5%/년

- 가치공유프로그램 (1.5%) = 5회 × 0.3%   - 성곽마을주민네트워크 회의 : 5회 × 0.2%

【연도별 추진계획】

∘14년 :  5.0%  - 계획   5%  : 이화충신 주민설명회

∘15년 : 42.5%  - 계획  34%  : 성공모델 20% (2개×10%) + 기타 14% (4개×3% + 2%)

설계   5%  : 이화충신  5%,  공동체 활성화 : 2..5%

∘16년 : 65.0%  - 계획  40% + 설계 10%(행촌) + 공사 10%(이화충신, 행촌) + 공동체

활성화 5%

- 2/4분기 (53.5%) : 계획 6% (기타2개), 설계 5%(행촌), 공동체활성화 1.0%

- 3/4분기 (54.0%) : 공동체활성화 0.5%

- 4/4분기 (65.0%) : 공사 10% (이화충신, 행촌), 공동체활성화 1.0%

∘17년 : 85.5%  - 계획 40% + 설계 22%(6개) + 공사 16%(2개) + 공동체활성화 7.5%

(11) 실적 및 계획

2013년(Y-3) 실적

2014년(Y-2) 실적

5%

2015년(Y-1) 실적

42.5%

2016년(Y)   목표

65.0%

2017년(Y+1) 목표

85.5%

목표값 설정근거

(12) 실적입력방식 및 주기별 목표

실적입력주기 : 반  기

실적집계방법 : 시점값

2/4분기

(상반기)

4/4분기

(하반기)

53.5%

65.0%

16. 조합(추진위)운영실태 점검 및 조치 구역 수

(1) 연 번	도시재생본부 - 16
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	재생협력과	담당자		허 동		전화번호	2133-7232
(4) 상위 전략목표	옛것을 보존하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울			상위 KPI		조합운영 실태점검 구역수
(5) 전략/성과목표	사람 중심의 주택정비 사업의 안정적 추진
(6) 2016년 목표값	30	(7) 단 위		개		(8) 가 중 치		5
(9) 지 표 산 식	조합운영 실태점검 실시 구역 수
(10) 정의 및 설명	○ 바른조합 운영기반 구축을 위한 조합(추진위원회)운영 실태점검 실시 - 뉴타운, 재개발, 재건축 정비사업조합(추진위원회) 운영실태 점검 및 조치 - 바른조합 운영을 위한 사례전파 및 홍보로 바른조합 운영 유도
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		4
	2014년(Y-2) 실적		24
	2015년(Y-1) 실적		38
	2016년(Y) 목표		30
	2017년(Y+1) 목표		30
	목표값 설정근거		점검시행 및 조치 구역 수
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	15				30

.

			재생정책기획관

1. 서울형 도시재생 모니터링・평가 체계 구축 및 운영

(1) 연 번	재생정책기획관 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	재생정책과		담당자		홍건표 조민선		전화번호		2133-8633 2133-8628
(4) 상위 전략목표	도시재생사업 지원체계 구축				상위 KPI		서울형 도시재생 모니터링・평가 체계 구축 및 운영 추진 추진율
(5) 전략/성과목표	서울형 도시재생 모니터링•평가 체계 구축 및 운영
(6) 2016년 목표값	80		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	서울형 도시재생 모니터링・평가 체계 구축 및 운영 추진 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 서울형 도시재생 모니터링•평가 체계 구축 및 운영 - 사업 추진현황 모니터링 - 공유 워크숍을 통한 정성적 분석 및 사례 확산 - 패널(포커스 그룹) 인터뷰를 통한 지역과의 소통 강화 - 도시재생 지표 마련을 통한 활성화 계획 수립 및 조정 지원 - 도시재생사업 평가를 통한 활성화 계획 진단 및 환류 ○ 추진방법 : 학술용역(도시재생지원기관인 서울연구원에서 수행) ○ 사업기간 : ’16. 3. ~ ’17. 3. - ’16. 3.~’16. 12. : 서울형 모티터링 체계 마련 및 운영 - ’17. 1.~’17. 3. : 서울형 도시활성화계획 평가 ○ 2016년 추진계획 : 60% (누적 100%) - 1/4분기(10%) : 용역 발주 및 계약, 방안 수립 - 2/4분기(35%) : 사업추진현황 모니터링 및 공유 워크숍 - 3/4분기(60%) : 패널(포커스 그룹) 인터뷰 - 4/4분기(80%) : 도시재생 활성화 지표 마련
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 실적			-
	2016년(Y) 목표			80%
	2017년(Y+1) 목표			100%
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반 기(○) 년( )
	실적입력주기 : 반 기(○) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값(○) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	10%	35%				60%		80%

2. 한강협력계획 4대 핵심사업 추진율

(1) 연 번	재생정책기획관-2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공개발센터	담당자		장승권		전화번호	2133-8368
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성			상위 KPI		한강협력계획 4대 핵심사업 추진율
(5) 전략/성과목표	한강협력계획 4대 핵심사업의 안정적 추진
(6) 2016년 목표값	20	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	한강협력계획 4대 핵심사업 추진율 (공정율)
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 위 치 : 여의도 한강공원 일대 (여의나루역 인근 수변부 및 제방변) - 규 모 : 부지면적 35,000㎡, 건축물 연면적 28,100㎡ · 수상시설(통합선착장·피어데크) : 부유체 10,800㎡, 연면적 9,100㎡ · 육상시설(여의테라스·복합문화시설) : 토지면적 24,200㎡, 연면적 19,000㎡ ○ 용역개요 - 용 역 명 : 한강협력계획 4대 핵심사업 기본계획 수립 용역 - 용역내용 · 사업기획 : 개발컨셉, 마스터플랜, 콘텐츠, 사업수익구조, 사업추진방식 · 기본계획 : 비전 및 목표, 기본계획, 구조∙수리안정성, 실현화 방안 등 - 용 역 비 : 830백만원 (사업기획 컨설팅, 기본계획 수립) - 용역기간 : `16. 3 ~ `17. 5 (착수일로부터 15개월) ○ 추진계획 - 2015 (5%) : 한강 자연성 회복 및 관광자원화 종합계획 마련 - 2016. 1/4분기 (7%) : 기본계획 및 타당성 조사 추진 - 2016. 2/4분기 (10%) : 기본계획 및 타당성 조사 추진 - 2016. 3/4분기 (15%) : 육상시설 타당성 재조사 추진, 공모추진 - 2016. 4/4분기 (20%) : 수상시설 기본 및 실시설계 추진 - 2017. (40%) : 육상시설 공모 / 수상 및 육상시설 기본 및 실시설계 - 2018. (60%) : 수상시설 착공 및 준공 - 2019. (80%) : 육상시설 착공 및 준공 - 2020. (100%) : 사업자 선정 및 운영
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		-
	2014년(Y-2) 실적		-
	2015년(Y-1) 실적		5
	2016년(Y) 목표		20
	2017년(Y+1) 목표		40
	목표값 설정근거		연차별 공정대비
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기(○), 년( )
	실적집계방법 : 시점값(○), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	10%				20%

3. 세종대로 일대 역사문화특화공간조성 공정률

(1) 연 번	재생정책기획관-3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공재생과		담당자		천주영		전화번호		2133-8653
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성				상위 KPI		세종대로 일대 역사문화특화공간 조성 공정률
(5) 전략/성과목표	지역거점형 특화공간 조성
(6) 2016년 목표값	50		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	총 사업부지 면적을 근거로 조성 비율을 공정률로 산정
(10) 정의 및 설명	2015년부터 2017년도까지 지속적으로 추진해나가야 하는 사업으로서, ‘15년도에는 철거와 광장설계, ‘16년도 문화재 발굴조사 및 지하공간 공사착공, ‘17년 지하공간 조성완료까지 공정을 나누어 산정
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 목표			20
	2016년(Y) 목표			50
	2017년(Y+1) 목표			100
	목표값 설정근거			예정공정표를 근거로 하여 2015년 목표 ‘국세청별관 철거 및 임시광장조성’ 달성완료 2016년 목표 문화재 발굴조사 및 지하공간 공사착수 달성 시 50 2017년 목표 특화공간 조성공사 완료 달성 시 100
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	25	30				40		50

4. 남산 예장자락 재생사업 설계 및 사업 추진율

(1) 연 번	재생정책기획관 - 4
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공재생과		담당자		현학범		전화번호		2133-8648
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성				상위 KPI		남산 예장자락 재생사업 설계 및 사업 추진율
(5) 전략/성과목표	지역거점형 특화공간 조성
(6) 2016년 목표값	50		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	○ 남산 예장자락 설계 및 사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 위치 : 남산 예장자락, 남산 정상부 - 기간 : 2015.1 ~ 2018.2 (38개월간) - 진행 : 기본구상 → 기본계획 → 현상공모 → 기본 및 실시설계 → 공사 ○ 추진계획 - 2016 1/4분기 (10%) : 타당성조사 용역 및 설계공모 완료 - 2016 2/4분기 (25%) : 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2016 3/4분기 (40%) : 문화재 조사 및 철거 완료 - 2016 4/4분기 (50%) : 공사 착수 - 2017 (80%) : 공사시행 - 2018 (100%) : 공사 및 준공
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적			20
	2016년(Y) 목표			50
	2017년(Y+1) 목표			80
	목표값 설정근거			전체 사업 추진목표 달성을 위한 계획수립 및 사업완료시점을 기준으로 목표값 설정
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 년
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	10	25				40		50

5. 장안평 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	재생정책기획관-5
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	도시활성화과		담당자		이시우		전화번호		2133-4633
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성				상위 KPI		장안평 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자동차 복합산업 집적지 육성
(6) 2016년 목표값	100		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	○ 도시재생활성화계획 수립 공정
(10) 정의 및 설명	○ 추진근거 - 행정2부시장 방침 제104호(시설계획과-3396, 2013.3.28.) ○ 추진방향 - 장안평 일대의 자생적 지역산업재생 기반 마련을 위해 물리적‧비물리적 개선방안을 고려한 종합적 재생계획 마련 ○ 추진내용 -‘도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법’에 따른 도시재생활성화계획 수립 ○ 추진계획(분기별) - 1/4분기 : 공청회 공고 - 2/4분기 : 활성화계획 승인·고시 - 3/4분기 : 장안평 자동차산업 종합정보센터 공사 착공 - 4/4분기 : 도시관리계획 승인·고시
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 실적			- 총괄계획가 선정, 도시재생지원센터 설치·운영
	2016년(Y) 목표			1건(100%)
	2017년(Y+1) 목표			-
	목표값 설정근거			도시재생활성화계획 수립여부
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기 (상반기)	2/4분기 (상반기)				3/4분기 (하반기)		3/4분기 (하반기)
	30%	80%				90		100

6. 세운상가군 재생사업 추진율

(1) 연 번	재생정책기획관-6
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	역사도심재생과	담당자			오승제, 한철민, 박학균			전화번호	2133-8498
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성					상위 KPI		역사도심관리 실현기반 구축 추진율
(5) 전략/성과목표	세운상가군 활성화
(6) 2016년 목표값	75		(7) 단 위			%		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	○ 세운상가군 재생사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 보행재생(광폭횡단보도, 다시세운광장 정비, 세운보행교 설치, 데크 정비 등) - 산업재생(거점공간 운영계획, 운영자 선정, 세운리빙랩 운영 등) - 공동체재생(다시세운시민협의회 운영, 주민역량강화, 주민공모사업, 상생협약 등) ○ 사업 추진율 - 1/4분기(20%) : 착수 발표, 공공선도사업 착공 - 2/4분기(50%) : 주민역량강화, 주민공모사업 시행 - 3/4분기(60%) : 거점공간 운영자 공모, 세운 리빙랩 시범운영 - 4/4분기(75%) : 다시세운광장 준공, 수리협동조합 설립
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적			5
	2015년(Y-1) 실적			30
	2016년(Y) 목표			75
	2017년(Y+1) 목표			100
	목표값 설정근거			연차별 공정 대비
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기
	실적집계방법 : 시점값
	2/4분기 (상반기)						4/4분기 (하반기)
	50%						75%

			재생정책과

1. 서울형 도시재생 모니터링・평가 체계 구축 및 운영

(1) 연 번	재생정책과 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	재생정책과		담당자		홍건표 조민선		전화번호		2133-8633 2133-8628
(4) 상위 전략목표	도시재생사업 지원체계 구축				상위 KPI		서울형 도시재생 모니터링・평가 체계 구축 및 운영 추진 추진율
(5) 전략/성과목표	서울형 도시재생 모니터링•평가 체계 구축 및 운영
(6) 2016년 목표값	80		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	서울형 도시재생 모니터링・평가 체계 구축 및 운영 추진 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 서울형 도시재생 모니터링•평가 체계 구축 및 운영 - 사업 추진현황 모니터링 - 공유 워크숍을 통한 정성적 분석 및 사례 확산 - 패널(포커스 그룹) 인터뷰를 통한 지역과의 소통 강화 - 도시재생 지표 마련을 통한 활성화 계획 수립 및 조정 지원 - 도시재생사업 평가를 통한 활성화 계획 진단 및 환류 ○ 추진방법 : 학술용역(도시재생지원기관인 서울연구원에서 수행) ○ 사업기간 : ’16. 3. ~ ’17. 3. - ’16. 3.~’16. 12. : 서울형 모티터링 체계 마련 및 운영 - ’17. 1.~’17. 3. : 서울형 도시활성화계획 평가 ○ 2016년 추진계획 : 60% (누적 100%) - 1/4분기(10%) : 용역 발주 및 계약, 방안 수립 - 2/4분기(35%) : 사업추진현황 모니터링 및 공유 워크숍 - 3/4분기(60%) : 패널(포커스 그룹) 인터뷰 - 4/4분기(80%) : 도시재생 활성화 지표 마련
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 실적			-
	2016년(Y) 목표			80%
	2017년(Y+1) 목표			100%
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기(○) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값(○) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	10%	35%				60%		80%

2. 도시재생 종합정보 포털 구축률

(1) 연 번	재생정책과 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	재생정책과	담당자		김보경		전화번호	2133-8625
(4) 상위 전략목표	서울형 도시재생의 기반 확충			상위 KPI		도시재생 정보포털 구축률
(5) 전략/성과목표	도시재생종합정보 포털 구축
(6) 2016년 목표값	100	(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치		30
(9) 지 표 산 식	도시재생 정보포털 구축사업 진행에 따른 진척률 기준
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 서울 도시재생 종합정보 시스템 구축 - 도시재생 정보의 통합 제공을 위한「도시재생 종합정보시스템」구축 - 사업별 관계자의 원활한 참여와 의사소통 지원을 위한 커뮤니티 서비스 제공 - 사업별 현황관리 DB 구축 - 사용자의 접근성과 편의성 향상을 위한 기능 개발 등 ○ 사업기간 : ’16. 3. ~ ’16.12. ○ 총사업비 : 364백만원
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		-
	2014년(Y-2) 실적		-
	2015년(Y-1) 실적		-
	2016년(Y) 목표		100%
	2017년(Y+1) 목표		-
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	30%				100%

			공공개발센터

1. 한강협력계획 4대 핵심사업 추진율

(1) 연 번	공공개발센터-1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공개발센터	담당자		장승권		전화번호	2133-8368
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성			상위 KPI		한강협력계획 4대 핵심사업 추진율
(5) 전략/성과목표	한강협력계획 4대 핵심사업의 안정적 추진
(6) 2016년 목표값	20	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		40
(9) 지 표 산 식	한강협력계획 4대 핵심사업 추진율 (공정율)
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 위 치 : 여의도 한강공원 일대 (여의나루역 인근 수변부 및 제방변) - 규 모 : 부지면적 35,000㎡, 건축물 연면적 28,100㎡ · 수상시설(통합선착장·피어데크) : 부유체 10,800㎡, 연면적 9,100㎡ · 육상시설(여의테라스·복합문화시설) : 토지면적 24,200㎡, 연면적 19,000㎡ ○ 용역개요 - 용 역 명 : 한강협력계획 4대 핵심사업 기본계획 수립 용역 - 용역내용 · 사업기획 : 개발컨셉, 마스터플랜, 콘텐츠, 사업수익구조, 사업추진방식 · 기본계획 : 비전 및 목표, 기본계획, 구조∙수리안정성, 실현화 방안 등 - 용 역 비 : 830백만원 (사업기획 컨설팅, 기본계획 수립) - 용역기간 : `16. 3 ~ `17. 5 (착수일로부터 15개월) ○ 추진계획 - 2015 (5%) : 한강 자연성 회복 및 관광자원화 종합계획 마련 - 2016. 1/4분기 (7%) : 기본계획 및 타당성 조사 추진 - 2016. 2/4분기 (10%) : 기본계획 및 타당성 조사 추진 - 2016. 3/4분기 (15%) : 육상시설 타당성 재조사 추진, 공모추진 - 2016. 4/4분기 (20%) : 수상시설 기본 및 실시설계 추진 - 2017. (40%) : 육상시설 공모 / 수상 및 육상시설 기본 및 실시설계 - 2018. (60%) : 수상시설 착공 및 준공 - 2019. (80%) : 육상시설 착공 및 준공 - 2020. (100%) : 사업자 선정 및 운영
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		-
	2014년(Y-2) 실적		-
	2015년(Y-1) 실적		5
	2016년(Y) 목표		20
	2017년(Y+1) 목표		40
	목표값 설정근거		연차별 공정대비
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기(○), 년( )
	실적집계방법 : 시점값(○), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	10%				20%

2.노들섬 문화‧생태공간 조성 추진율

(1) 연 번	공공재생과-2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공개발센터		담당자		강전남		전화번호		2133-8362
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성				상위 KPI		현상공모, 시설계 및 조성공사 등 노들섬 문화명소화 조성사업 추진율
(5) 전략/성과목표	노들섬 문화‧생태공간 조성
(6) 2016년 목표값	75		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			25
(9) 지 표 산 식	○ 현상공모, 시설계 및 조성공사 등 노들섬 문화명소화 조성사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 노들섬 - 기간 : 2014.10 ~ 2018. - 진행 : 기본구상 마련 → 현상공모 → 기본 및 실시설계 → 공사 ○ 추진계획 - 2014 4/4분기 (10%) : 기본구상 마련 - 2015 1/4분기 (20%) : 기본구상 마련 및 현상공모 추진계획 수립 - 2015 2/4분기 (30%) : 1단계 현상공모 추진 - 2015 3/4분기 (40%) : 1단계 현상공모 평가 및 2단계 현상공모 추진 - 2015 4/4분기 (50%) : 2단계 현상공모 평가 - 2016 상반기 (65%) : 3단계 현상공모 추진 및 평가 - 2016 하반기 (75%) : 기본 및 실시설계 추진 - 2017 (95%) : 조성공사 - 2018 (100%) : 준공 및 시설운영
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014 (Y-2) 실적			10
	2015년(Y-1) 실적			50
	2016년(Y) 목표			75
	2017년(Y+1) 목표			95
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	-				-		-

3.공공토지자원 활용시스템 구축

(1) 연 번	공공개발센터-3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공개발센터	담당자		최희영 김영일		전화번호	2133-8353
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성			상위 KPI		공공토지자원 활용 사업화 방안 수립 추진율
(5) 전략/성과목표	도시개발의 공공성 강화
(6) 2016년 목표값	70	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		15
(9) 지 표 산 식	○ 공공토지자원 활용시스템 구축 수립율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 서울시 소재 시유지 전체 - 기간 : 2014.5 ~ 2018.5 - 진행 : 공공토지자원 활용시스템 구축 → 전략사업지 선정 → 활용구상 검토 ○ 추진계획 - 1/4분기 (55%) : 시범사업 후보지 선정 및 활용구상 - 2/4분기 (60%) : 소규모․대규모 시유지 기초조사 및 공간정보화 - 3/4분기 (65%) : 유형화(활용가능시유지, 중점활용시유지) - 4/4분기 (70%) : 빅데이터 연계 구축
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		10
	2014년(Y-2) 실적		25
	2015년(Y-1) 실적		50
	2016년(Y) 목표		70
	2017년(Y+1) 목표		85
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	60				70

.

			공공재생과

1. 세종대로 일대 역사문화특화공간조성 공정률

(1) 연 번	공공재생과-1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공재생과		담당자		천주영		전화번호		2133-8653
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성				상위 KPI		세종대로 일대 역사문화특화공간 조성 공정률
(5) 전략/성과목표	지역거점형 특화공간 조성
(6) 2016년 목표값	50		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			40
(9) 지 표 산 식	총 사업부지 면적을 근거로 조성 비율을 공정률로 산정
(10) 정의 및 설명	2015년부터 2017년도까지 지속적으로 추진해나가야 하는 사업으로서, ‘15년도에는 철거와 광장설계, ‘16년도 문화재 발굴조사 및 지하공간 공사착공, ‘17년 지하공간 조성완료까지 공정을 나누어 산정
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 목표			20
	2016년(Y) 목표			50
	2017년(Y+1) 목표			100
	목표값 설정근거			예정공정표를 근거로 하여 2015년 목표 ‘국세청별관 철거 및 임시광장조성’ 달성완료 2016년 목표 문화재 발굴조사 및 지하공간 공사착수 달성 시 50 2017년 목표 특화공간 조성공사 완료 달성 시 100
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	25	30				40		50

2. 남산 예장자락 재생사업 설계 및 사업 추진율

(1) 연 번	도시재생본부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	공공재생과		담당자		현학범		전화번호		2133-8648
(4) 상위 전략목표	서울의 새로운 명소 조성				상위 KPI		남산 예장자락 재생사업 설계 및 사업 추진율
(5) 전략/성과목표	지역거점형 특화공간 조성
(6) 2016년 목표값	50		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			40
(9) 지 표 산 식	○ 남산 예장자락 설계 및 사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 위치 : 남산 예장자락, 남산 정상부 - 기간 : 2015.1 ~ 2018.2 (38개월간) - 진행 : 기본구상 → 기본계획 → 현상공모 → 기본 및 실시설계 → 공사 ○ 추진계획 - 2016 1/4분기 (10%) : 타당성조사 용역 및 설계공모 완료 - 2016 2/4분기 (25%) : 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2016 3/4분기 (40%) : 문화재 조사 및 철거 완료 - 2016 4/4분기 (50%) : 공사 착수 - 2017 (80%) : 공사시행 - 2018 (100%) : 공사 및 준공
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적			20
	2016년(Y) 목표			50
	2017년(Y+1) 목표			80
	목표값 설정근거			전체 사업 추진목표 달성을 위한 계획수립 및 사업완료시점을 기준으로 목표값 설정
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 년
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	10	25				40		50

			도시활성화과

1. 장안평 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	도시활성화과-1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	도시활성화과		담당자		이시우		전화번호		2133-4633
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성				상위 KPI		장안평 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자동차 복합산업 집적지 육성
(6) 2016년 목표값	100		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	○ 도시재생활성화계획 수립 공정
(10) 정의 및 설명	○ 추진근거 - 행정2부시장 방침 제104호(시설계획과-3396, 2013.3.28.) ○ 추진방향 - 장안평 일대의 자생적 지역산업재생 기반 마련을 위해 물리적‧비물리적 개선방안을 고려한 종합적 재생계획 마련 ○ 추진내용 -‘도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법’에 따른 도시재생활성화계획 수립 ○ 추진계획(분기별) - 1/4분기 : 공청회 공고 - 2/4분기 : 활성화계획 승인·고시 - 3/4분기 : 장안평 자동차산업 종합정보센터 공사 착공 - 4/4분기 : 도시관리계획 승인·고시
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 실적			- 총괄계획가 선정, 도시재생지원센터 설치·운영
	2016년(Y) 목표			1건(100%)
	2017년(Y+1) 목표			-
	목표값 설정근거			도시재생활성화계획 수립여부
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기 (상반기)	2/4분기 (상반기)				3/4분기 (하반기)		3/4분기 (하반기)
	30%	80%				90		100

2.정비사업 공사장 안전점검

(1) 연 번	도시활성화과-2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	도시활성화과	담당자		유우린		전화번호	2133-4638
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성			상위 KPI		정비사업공사장안전점검(개소)
(5) 전략/성과목표	정비사업공사장 안전관리 강화
(6) 2016년 목표값	240	(7) 단 위		개소		(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식	○ 도시재생본부 정비사업공사장 현황 (60개소x4회=240개소)
(10) 정의 및 설명	○ 점검대상 : 정비사업(도시환경정비, 주택재개발, 주택재건축 등) 공사장 ○ 점검내용 : 연중취약시기 안전점검 및 특별안전점검 또는 자문 - 취약시기별 안전점검 실시(해빙기, 우기, 추석, 겨울철대비) - 특별안전점검 또는 자문 실시(수시) ○ 공사장현황 - 철거·굴토 공사장 : 30개소(중점관리대상) - 골조·마감 공사장 : 30개소(일반관리대상) ○ 시·구·외부안전점검 - 중점관리대상 공사장의 안전관리 강화를 위하여 2015년부터 외부 전문가와 공무원으로 구성하여 안전점검 실시(전문성강화)
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		-
	2014년(Y-2) 실적		-
	2015년(Y-1) 실적		-
	2016년(Y) 목표		240개소
	2017년(Y+1) 목표		-
	목표값 설정근거		`16년 정비사업공사장 안전점검계획 - 점검대상현장 : 240개소
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기
	실적집계방법 : 시점값
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	50%				100%

.

			역사도심재생과

1. 세운상가군 재생사업 추진율

(1) 연 번	역사도심재생과-1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	역사도심재생과	담당자			오승제, 한철민, 박학균			전화번호	2133-8498
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성					상위 KPI		역사도심관리 실현기반 구축 추진율
(5) 전략/성과목표	세운상가군 활성화
(6) 2016년 목표값	75		(7) 단 위			%		(8) 가 중 치		50
(9) 지 표 산 식	○ 세운상가군 재생사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 보행재생(광폭횡단보도, 다시세운광장 정비, 세운보행교 설치, 데크 정비 등) - 산업재생(거점공간 운영계획, 운영자 선정, 세운리빙랩 운영 등) - 공동체재생(다시세운시민협의회 운영, 주민역량강화, 주민공모사업, 상생협약 등) ○ 사업 추진율 - 1/4분기(20%) : 착수 발표, 공공선도사업 착공 - 2/4분기(50%) : 주민역량강화, 주민공모사업 시행 - 3/4분기(60%) : 거점공간 운영자 공모, 세운 리빙랩 시범운영 - 4/4분기(75%) : 다시세운광장 준공, 수리협동조합 설립
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적			5
	2015년(Y-1) 실적			30
	2016년(Y) 목표			75
	2017년(Y+1) 목표			100
	목표값 설정근거			연차별 공정 대비
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기
	실적집계방법 : 시점값
	2/4분기 (상반기)						4/4분기 (하반기)
	50%						75%

2. 역사도심관리 기본계획 수립 및 실현기반 구축 추진율

(1) 연 번	역사도심재생과 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	역사도심재생과	담당자		정미창		전화번호	2133-8489
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성			상위 KPI		역사도심관리 기본계획 수립 및 실현 기반 구축 추진율
(5) 전략/성과목표	역사 문화유산의 보존 및 활용을 통한 도심부 재생
(6) 2016년 목표값	75	(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치		30
(9) 지 표 산 식	역사도심관리 기본계획 수립 및 실현기반 구축 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 4대문안 관리지역 + 한양도성 - 기간 : 2011 ～ 2018년 - 진행 : 기본계획 수립 → 실현기반 구축 → 사업시행 ○ 추진계획 - 기본계획 수립 (’11년～’15년) ․ ’11년 -기초현황 및 관련계획 분석(15%), 요소 도출 및 기본 구상(35%), ․ ’12년 -보전/관리 재생의 기본원칙 제시(45%), 현황조사 및 분석보완(50%) ․ ’13년 -변화 전망 및 미래상 제시(58%), 관리방안 구상(67%),부문별 계획수립(85%) ․ ’14년 -부문별 정비지침 및 실현화 방안마련(93%) ․ ’15년 -도심부관리 기본계획안 확정(100%) - 실현기반 구축('15년 이후) ․ 옛길 영상기록화 및 특성보존계획 수립 ․ 도시관리계획 미수립지역 지구단위계획 수립 등
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		45
	2014년(Y-2) 실적		55
	2015년(Y-1) 실적		65
	2016년(Y) 목표		75
	2017년(Y+1) 목표		85
	목표값 설정근거		시정운영 중장기 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ) 년( ○ )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	70				75

.

			주거사업기획관

1. 도시재생 희망지 선정 개소 수

(1) 연 번	주거사업기획관 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		박범진		전화번호		2133-7165
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		희망지 선정 개소
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2016년 목표값	15		(7) 단 위		개소		(8) 가 중 치			20
(9) 지 표 산 식	창신숭인 도시재생사업 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 희망지 선정 : 최대 20곳 □ 도시재생활성화사업 희망지 15곳, 주거환경관리사업 희망지 5곳 - 희망지 규모 □ 도시재생활성화사업 : 10만㎡ 이상(1~3개 행정동 범위), □ 주거환경관리사업 : 10만㎡ 미만(1개 행정동 범위) - 선정일정 : ‘16. 1 ~ 5월 □ 1~3월 : 설명회 및 주민컨설팅, 4월말 : 공모접수, 5월 : 희망지선정 ⇒ 선정된 희망지는“주민역량강화사업”시행 ○ 사업진도 [2016년] - 희망지사업 설명회 개최 : 10% - 희망지 선정 : 20% - 주민역량강화사업 추진 : 70% [2017년] - 희망지사업 설명회 개최 : 10% - 희망지 선정 : 20% - 주민역량강화사업 추진 : 70%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표
	2015년(Y-1) 실적
	2016년(Y) 목표			15
	2017년(Y+1) 목표			8
	목표값 설정근거			도시재생 희망지사업 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		-						15

2. 창신·숭인 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	주거사업기획관 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		소석영 이수진		전화번호		2133-7171
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		창신숭인 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2015년 목표값	40		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			12
(9) 지 표 산 식	창신숭인 도시재생사업 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 주거환경개선 : 안전안심골목길조성, 주민공동이용시설조성 등 - 지역경제활성화 : 봉제박물관, 공공작업장 조성, 채석장부지 명소화 등 - 역사문화자원화 : 백남준기념공간, 마을탐방로 조성 등 - 주민역량강화 : 주민공모사업, 주제공모사업, 마을배움터(교육) ○ 사업진도 [2014년] - 주민공동이용시설 부지매입 등 : 8% - 봉제공동작업장 및 봉제박물관 부지 매입 등 : 1% - 주민역량강화사업 추진 : 1% [2015년] - 주민공동이용시설 부지매입, 안전안심골목길 조성 : 10% - 봉제박물관, 봉제공공작업장 부지 매입, 봉제일자리지원 등 : 14% - 백남준기념공간 조성, 마을탐방로기반조성 등 : 5% - 주민역량강화사업 추진 : 1% [2016년] - 주민공동이용시설 조성, 안전안심골목길, 자투리땅쉼터조성 : 20% - 봉제박물관, 봉제공공작업장 조성 등 : 9% - 백남준기념공간, 마을탐방로 조성 추진 등 : 9% - 주민역량강화사업 추진 : 2% [2017년] - 주민공동이용시설 조성, 안전안심골목길, 자투리땅쉼터조성 : 4% - 봉제박물관, 봉제공공작업장 조성 등 : 10% - 백남준기념공간, 마을탐방로 조성 추진 등 : 5% - 주민역량강화사업 추진 : 1%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표			10
	2015년(Y-1) 실적			30
	2016년(Y) 목표			40
	2017년(Y+1) 목표			20
	목표값 설정근거			창신숭인 도시재생사업 추진율에 따른 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년(
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		12						40

3. 해방촌 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	주거사업기획관 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		전동수		전화번호		2133-7170
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		해방촌 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2015년 목표값	15		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			9
(9) 지 표 산 식	자족형 도시재생 성장기반 확충
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 공동체 활성화를 통한 도시재생사업 추진으로 자생적 성장기반 확충 ○ 사업진도 〔2015년〕 - 도시재생 활성화계획 구상안 마련 : 5% - 사업추진 조직 구성 운영(주민협의체, 사업추진협의회 등) : 2% - 지원센터 설치운영 : 3% 〔2016년〕 - 도시재생 활성화계획 마련 : 5% - 주민역량강화사업(주민공모, 주민교육 등) 추진 : 3% - 공동체활성화 사업 추진 : 2% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 5% 〔2017년〕 - 공동체 활성화, 주민역량강화 사업 추진 : 5% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 15%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표
	2015년(Y-1) 실적			10
	2016년(Y) 목표			15
	2017년(Y+1) 목표			20
	목표값 설정근거			해방촌 도시재생사업 추진율에 따른 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년(
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		5						15

4. 가리봉 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	주거사업기획관 - 4
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		최명국		전화번호		2133-7177
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		최명국 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2016년 목표값	15		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			9
(9) 지 표 산 식	자족형 도시재생 성장기반 확충
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 주거환경 : 노후불량주택 집수리, 소규모 행복주택 도입 등 추진 - 생활환경 : 기반시설정비, 안심길조성, 녹색주차장, 가리봉시장 환경개선 등 - 앵커시설 : 가족통합지원센터, 가리봉루트 등 추진 - 공동체육성 : 현장소통마당, 마을학교, 마을활동가 역량강화 등 추진 ○ 사업진도 〔2015년〕 - 도시재생 활성화계획 수립 : 5% - 사업추진 조직 구성 운영(주민협의체, 사업추진협의회 등) : 2% - 앵커시설 부지매입 및 조성(지원센터 설치운영) : 3% 〔2016년〕 - 도시재생 활성화계획 고시 : 5% - 주민역량강화사업(주민공모, 재생학교 운영) : 3% - 공동체활성화 사업 추진 : 2% - 우마길 특화거리 조성 등 도시재생사업 추진 : 5% 〔2017년〕 - 주민역량강화사업(주민공모, 재생학교 운영, 공동체 활성화 등) : 5% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 15%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표
	2015년(Y-1) 실적			10
	2016년(Y) 목표			15
	2017년(Y+1) 목표			20
	목표값 설정근거			가리봉 도시재생사업 추진율에 따른 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		5						15

5. 『5개 도시재생 시범사업』추진율

(1) 연 번	주거사업기획관 - 5
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		이재훈		전화번호		2133-7174
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		5개 도시재생 시범사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2015년 목표값	20		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	5개 도시재생 시범사업 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 시범사업 선정 - 활성화 계획수립 - 도시재생사업 추진 ○ 사업진도 [2014년] - 시범사업선정 : 5% [2015년] - 도시재생 활성화계획 수립 : 5% - 사업추진 조직 구성 운영(주민협의체, 사업추진협의회 등) : 4% - 주민역량강화사업 추진(재생대학, 마을학교 운영, 공동체활성화 등) : 3% - 앵커시설 부지매입 : 3% [2016년] - 도시재생 활성화계획 고시 : 3% - 주민역량강화사업 추진(재생대학, 마을학교 운영, 공동체활성화 등) : 3% - 앵커시설 건립 착수 : 7% - 단위사업별 도시재생사업 착수 : 7% [2017년] - 주민역량강화사업 추진(재생대학, 마을학교 운영, 공동체활성화 등) : 10% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 30%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표			5
	2015년(Y-1) 실적			15
	2016년(Y) 목표			20
	2017년(Y+1) 목표			40
	목표값 설정근거			5개 시범사업 추진계획에 따른 진도율
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		8						20

6. 성곽마을 재생사업 추진율

(1) 연    번

주거사업기획관 -  6

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

주거환경개선과

담당자

이정식

전화번호

2133-7248

(4) 상위 전략목표

공동체 활성화를 위한 노후주거지

재생추진

상위 KPI

성곽마을 재생사업 추진 율

(5) 전략/성과목표

쾌적한 주거환경조성

(6) 2016년 목표값

65.0

(7) 단 위

%

(8) 가 중 치

10

(9) 지 표 산 식

성곽마을 8개권역 추진단계에 따른 이행달성도 계량화

(10) 정의 및 설명

∘정    의 : 8개권역 업무비중, 추진단계별 소요기간 등 고려하여 추진율 정함

- 성공모델 2개권역 : 이화‧충신, 행촌

- 기타     6개권역 : 부암, 삼선, 명륜‧혜화, 다산, 성북, 광희

∘추 진 율 : 착수시점 기준으로 함

- 성공모델 2개권역 (40%) :  각 20% = 재생계획(10%) + 설계(5%) + 공사(5%)

- 기타     6개권역 (50%) :  각  8% = 재생계획( 3%) + 설계(2%) + 공사(3%) + 2%

- 공동체활성화사업 (10%) :  4년 × 2.5%/년 = 가치공유프로그램 (1.5%)+ 성곽마을주민네트워크 (1.0%)

① 재생계획 (40%)

- 성공모델 (20%) : 2개권역 × 10%        - 주민설명회 5%,   주민워크숍 5%

- 기타권역 (20%) : 6개권역 ×  3%  + 2% - 주민설명회 1.5%, 주민워크숍 1.5%

② 공공부문 설계 (22%)

- 성공모델 (10%) : 2개권역 × 5%   - 기타권역 (12%) : 6개권역 × 2%

③ 공공부문 공사 (28%)

- 성공모델 (10%) : 2개권역 × 5%   - 기타권역 (18%) : 6개권역 × 3%

④ 공동체활성화사업(10%) : 4년 × 2.5%/년

- 가치공유프로그램 (1.5%) = 5회 × 0.3%   - 성곽마을주민네트워크 회의 : 5회 × 0.2%

【연도별 추진계획】

∘14년 :  5.0%  - 계획   5%  : 이화충신 주민설명회

∘15년 : 42.5%  - 계획  34%  : 성공모델 20% (2개×10%) + 기타 14% (4개×3% + 2%)

설계   5%  : 이화충신  5%,  공동체 활성화 : 2..5%

∘16년 : 65.0%  - 계획  40% + 설계 10%(행촌) + 공사 10%(이화충신, 행촌) + 공동체

활성화 5%

- 2/4분기 (53.5%) : 계획 6% (기타2개), 설계 5%(행촌), 공동체활성화 1.0%

- 3/4분기 (54.0%) : 공동체활성화 0.5%

- 4/4분기 (65.0%) : 공사 10% (이화충신, 행촌), 공동체활성화 1.0%

∘17년 : 85.5%  - 계획 40% + 설계 22%(6개) + 공사 16%(2개) + 공동체활성화 7.5%

(11) 실적 및 계획

2013년(Y-3) 실적

2014년(Y-2) 실적

5%

2015년(Y-1) 실적

42.5%

2016년(Y)   목표

65.0%

2017년(Y+1) 목표

85.5%

목표값 설정근거

(12) 실적입력방식 및 주기별 목표

실적입력주기 : 반  기

실적집계방법 : 시점값

2/4분기

(상반기)

4/4분기

(하반기)

53.5%

65.0%

7. 조합(추진위)운영실태 점검 및 조치 구역 수

(1) 연 번	주거사업기획관 - 7
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	재생협력과	담당자		허 동		전화번호	2133-7232
(4) 상위 전략목표	옛것을 보존하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울			상위 KPI		조합운영 실태점검 구역수
(5) 전략/성과목표	사람 중심의 주택정비 사업의 안정적 추진
(6) 2016년 목표값	30	(7) 단 위		개		(8) 가 중 치		5
(9) 지 표 산 식	조합운영 실태점검 실시 구역 수
(10) 정의 및 설명	○ 바른조합 운영기반 구축을 위한 조합(추진위원회)운영 실태점검 실시 - 뉴타운, 재개발, 재건축 정비사업조합(추진위원회) 운영실태 점검 및 조치 - 바른조합 운영을 위한 사례전파 및 홍보로 바른조합 운영 유도
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		4
	2014년(Y-2) 실적		24
	2015년(Y-1) 실적		38
	2016년(Y) 목표		30
	2017년(Y+1) 목표		30
	목표값 설정근거		점검시행 및 조치 구역 수
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	15				30

8. 코디네이터(갈등조정) 파견 구역수

(1) 연 번	주거사업기획관 - 8
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	재생협력과		담당자		서민수 박진일		전화번호		7236 7237
(4) 상위 전략목표	사람 중심의 주택정비사업의 안정적 추진				상위 KPI		코디네이터(갈등조정) 파견 구역수
(5) 전략/성과목표	정비사업 분석진단을 통한 코디네이터 제도 정착
(6) 2015년 목표값	30		(7) 지표단위		개		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	코디네이터(갈등조정) 파견 구역수
(10) 정의 및 설명	○ 정비(예정)구역(재개발, 재건축, 뉴타운등)에 대한 사업정상화 추진 - 재개발․재건축 정비예정구역 및 존치정비(관리)구역 - 재개발․재건축, 촉진구역 및 공동주택재건축
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 실적			25
	2016년(Y) 목표			30
	2017년(Y+1) 목표			30
	목표값 설정근거			‘16년 정비구역 코디네이터(갈등조정) 파견 계획 건수
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		20						30

.

			주거재생과

1. 도시재생 희망지 선정 개소 수

(1) 연 번	주거재생과 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		박범진		전화번호		2133-7165
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		희망지 선정 개소
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2016년 목표값	10		(7) 단 위		개소		(8) 가 중 치			20
(9) 지 표 산 식	창신숭인 도시재생사업 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 희망지 선정 : 최대 20곳 □ 도시재생활성화사업 희망지 15곳, 주거환경관리사업 희망지 5곳 - 희망지 규모 □ 도시재생활성화사업 : 10만㎡ 이상(1~3개 행정동 범위), □ 주거환경관리사업 : 10만㎡ 미만(1개 행정동 범위) - 선정일정 : ‘16. 1 ~ 5월 □ 1~3월 : 설명회 및 주민컨설팅, 4월말 : 공모접수, 5월 : 희망지선정 ⇒ 선정된 희망지는“주민역량강화사업”시행 ○ 사업진도 [2016년] - 희망지사업 설명회 개최 : 10% - 희망지 선정 : 20% - 주민역량강화사업 추진 : 70% [2017년] - 희망지사업 설명회 개최 : 10% - 희망지 선정 : 20% - 주민역량강화사업 추진 : 70%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표
	2015년(Y-1) 실적
	2016년(Y) 목표			10
	2017년(Y+1) 목표			8
	목표값 설정근거			도시재생 희망지사업 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반 기( ) 년(○ )
	실적입력주기 : 반 기( ) 년( ○ )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		-						10

2. 창신·숭인 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	주거재생과 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		소석영 이수진		전화번호		2133-7171
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		창신숭인 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2015년 목표값	40		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			20
(9) 지 표 산 식	창신숭인 도시재생사업 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 주거환경개선 : 안전안심골목길조성, 주민공동이용시설조성 등 - 지역경제활성화 : 봉제박물관, 공공작업장 조성, 채석장부지 명소화 등 - 역사문화자원화 : 백남준기념공간, 마을탐방로 조성 등 - 주민역량강화 : 주민공모사업, 주제공모사업, 마을배움터(교육) ○ 사업진도 [2014년] - 주민공동이용시설 부지매입 등 : 8% - 봉제공동작업장 및 봉제박물관 부지 매입 등 : 1% - 주민역량강화사업 추진 : 1% [2015년] - 주민공동이용시설 부지매입, 안전안심골목길 조성 : 10% - 봉제박물관, 봉제공공작업장 부지 매입, 봉제일자리지원 등 : 14% - 백남준기념공간 조성, 마을탐방로기반조성 등 : 5% - 주민역량강화사업 추진 : 1% [2016년] - 주민공동이용시설 조성, 안전안심골목길, 자투리땅쉼터조성 : 20% - 봉제박물관, 봉제공공작업장 조성 등 : 9% - 백남준기념공간, 마을탐방로 조성 추진 등 : 9% - 주민역량강화사업 추진 : 2% [2017년] - 주민공동이용시설 조성, 안전안심골목길, 자투리땅쉼터조성 : 4% - 봉제박물관, 봉제공공작업장 조성 등 : 10% - 백남준기념공간, 마을탐방로 조성 추진 등 : 5% - 주민역량강화사업 추진 : 1%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표			10
	2015년(Y-1) 실적			30
	2016년(Y) 목표			40
	2017년(Y+1) 목표			20
	목표값 설정근거			창신숭인 도시재생사업 추진율에 따른 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		12						40

3. 해방촌 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	주거재생과 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		전동수		전화번호		2133-7170
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		해방촌 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2015년 목표값	15		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			12
(9) 지 표 산 식	자족형 도시재생 성장기반 확충
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 공동체 활성화를 통한 도시재생사업 추진으로 자생적 성장기반 확충 ○ 사업진도 〔2015년〕 - 도시재생 활성화계획 구상안 마련 : 5% - 사업추진 조직 구성 운영(주민협의체, 사업추진협의회 등) : 2% - 지원센터 설치운영 : 3% 〔2016년〕 - 도시재생 활성화계획 마련 : 5% - 주민역량강화사업(주민공모, 주민교육 등) 추진 : 3% - 공동체활성화 사업 추진 : 2% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 5% 〔2017년〕 - 공동체 활성화, 주민역량강화 사업 추진 : 5% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 15%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표
	2015년(Y-1) 실적			10
	2016년(Y) 목표			15
	2017년(Y+1) 목표			20
	목표값 설정근거			해방촌 도시재생사업 추진율에 따른 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		5						15

4. 가리봉 도시재생사업 추진율

(1) 연 번	주거재생과 - 4
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		최명국		전화번호		2133-7177
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		가리봉 도시재생사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2016년 목표값	15		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			12
(9) 지 표 산 식	자족형 도시재생 성장기반 확충
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 주거환경 : 노후불량주택 집수리, 소규모 행복주택 도입 등 추진 - 생활환경 : 기반시설정비, 안심길조성, 녹색주차장, 가리봉시장 환경개선 등 - 앵커시설 : 가족통합지원센터, 가리봉루트 등 추진 - 공동체육성 : 현장소통마당, 마을학교, 마을활동가 역량강화 등 추진 ○ 사업진도 〔2015년〕 - 도시재생 활성화계획 수립 : 5% - 사업추진 조직 구성 운영(주민협의체, 사업추진협의회 등) : 2% - 앵커시설 부지매입 및 조성(지원센터 설치운영) : 3% 〔2016년〕 - 도시재생 활성화계획 고시 : 5% - 주민역량강화사업(주민공모, 재생학교 운영) : 3% - 공동체활성화 사업 추진 : 2% - 우마길 특화거리 조성 등 도시재생사업 추진 : 5% 〔2017년〕 - 주민역량강화사업(주민공모, 재생학교 운영, 공동체 활성화 등) : 5% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 15%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표
	2015년(Y-1) 실적			10
	2016년(Y) 목표			15
	2017년(Y+1) 목표			20
	목표값 설정근거			가리봉 도시재생사업 추진율에 따른 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		5						15

5. 『5개 도시재생 시범사업』추진율

(1) 연 번	주거재생과 - 5
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거재생과		담당자		이재훈		전화번호		2133-7174
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화 및 노후주거지 재생 추진				상위 KPI		5개 도시재생 시범사업 추진율
(5) 전략/성과목표	자족형 도시재생 성장기반 확충
(6) 2015년 목표값	20		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			16
(9) 지 표 산 식	5개 도시재생 시범사업 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 시범사업 선정 - 활성화 계획수립 - 도시재생사업 추진 ○ 사업진도 [2014년] - 시범사업선정 : 5% [2015년] - 도시재생 활성화계획 수립 : 5% - 사업추진 조직 구성 운영(주민협의체, 사업추진협의회 등) : 4% - 주민역량강화사업 추진(재생대학, 마을학교 운영, 공동체활성화 등) : 3% - 앵커시설 부지매입 : 3% [2016년] - 도시재생 활성화계획 고시 : 3% - 주민역량강화사업 추진(재생대학, 마을학교 운영, 공동체활성화 등) : 3% - 앵커시설 건립 착수 : 7% - 단위사업별 도시재생사업 착수 : 7% [2017년] - 주민역량강화사업 추진(재생대학, 마을학교 운영, 공동체활성화 등) : 10% - 단위사업별 도시재생사업 추진 : 30%
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 목표			5
	2015년(Y-1) 실적			15
	2016년(Y) 목표			20
	2017년(Y+1) 목표			40
	목표값 설정근거			5개 시범사업 추진계획에 따른 진도율
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		8						20

.

			재생협력과

1. 조합(추진위)운영실태 점검 및 조치 구역 수

(1) 연 번	재생협력과 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	재생협력과	담당자		허 동		전화번호	2133-7232
(4) 상위 전략목표	사람중심 주택정비사업의 안정적 추진			상위 KPI		조합운영 실태점검 구역수
(5) 전략/성과목표	조합(추진위원회) 투명성 강화
(6) 2016년 목표값	점검구역 : 30 조치구역 : 15	(7) 단 위		개		(8) 가 중 치		40
(9) 지 표 산 식	조합운영 실태점검 실시 구역 및 조치구역 수
(10) 정의 및 설명	○ 바른조합 운영기반 구축을 위한 조합(추진위원회)운영 실태점검 실시 - 뉴타운, 재개발, 재건축 정비사업조합(추진위원회) 운영실태 점검 및 조치 - 바른조합 운영을 위한 사례전파 및 홍보로 바른조합 운영 유도
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		4
	2014년(Y-2) 실적		24
	2015년(Y-1) 실적		38
	2016년(Y) 목표		점검 30, 조치 15
	2017년(Y+1) 목표		점검 30, 조치 30
	목표값 설정근거		점검시행 및 조치 구역 수
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	15				15

2. 코디네이터(갈등조정) 파견 구역수

(1) 연 번	재생협력과 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	재생협력과		담당자		서민수 박진일		전화번호		7236 7237
(4) 상위 전략목표	사람 중심의 주택정비사업의 안정적 추진				상위 KPI		코디네이터(갈등조정) 파견 구역수
(5) 전략/성과목표	정비사업 분석진단을 통한 코디네이터 제도 정착
(6) 2016년 목표값	30		(7) 지표단위		개		(8) 가 중 치			40
(9) 지 표 산 식	코디네이터(갈등조정) 파견 구역수
(10) 정의 및 설명	○ 정비(예정)구역(재개발, 재건축, 뉴타운등)에 대한 사업정상화 추진 - 재개발․재건축 정비예정구역 및 존치정비(관리)구역 - 재개발․재건축, 촉진구역 및 공동주택재건축
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			-
	2014년(Y-2) 실적			-
	2015년(Y-1) 실적			25
	2016년(Y) 목표			30
	2017년(Y+1) 목표			30
	목표값 설정근거			‘16년 정비구역 코디네이터(갈등조정) 파견 계획 건수
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ) 합산값( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	10	20				30		-

.

			주거사업과

1. 재정비사업의 안정적 추진

(1) 연 번	주거사업과 - 1
(2) 관 점	사업추진율
(3) 부 서 명	주거사업과		담당자		조중환		전화번호		2133-7220
(4) 상위 전략목표	사람 중심 주택정비사업의 안정적 추진				상위 KPI		재정비사업 단계적 추진율
(5) 전략/성과목표	재정비사업의 안정적 추진
(6) 2016년 목표값	75		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			40
(9) 지 표 산 식	정비사업 행정절차 이행 달성도 등을 개량화한 추진율
(10) 정의 및 설명	정의 : 사업추진 단계별 소요기간과 업무비중 등을 고려하여 추진율을 정함 추진단계별 추진율 : 조합설립인가(20%) → 사업시행인가(25%) → 관리처분인가(40%) → 착공(20%) → 준공(15%)
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적			59
	2014년(Y-2) 실적			64
	2015년(Y-1) 실적			69
	2016년(Y) 목표			75
	2017년(Y+1) 목표
	목표값 설정근거			시정운영중장기 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	70	71				73		75

2.단독주택재건축사업의 안정적 추진

(1) 연 번	주거사업과 - 2
(2) 관 점	사업추진율
(3) 부 서 명	주거사업과	담당자		장재영		전화번호	2133-7229
(4) 상위 전략목표	사람 중심 주택정비사업의 안정적 추진			상위 KPI		단독주택재건축사업 단계적 추진율
(5) 전략/성과목표	단독주택 재건축 추진
(6) 2016년 목표값	66	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		40
(9) 지 표 산 식	정비사업 행정절차 이행 달성도 등을 개량화한 추진율
(10) 정의 및 설명	정의 : 사업추진 단계별 소요기간과 업무비중 등을 고려하여 추진율을 정함 추진단계별 추진율 : 조합설립인가(20%) → 사업시행인가(25%) → 관리처분인가(40%) → 착공(20%) → 준공(15%)
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		28
	2014년(Y-2) 실적		38
	2015년(Y-1) 실적		56
	2016년(Y) 목표		66
	2017년(Y+1) 목표		70
	목표값 설정근거		시정운영중장기 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	61				66

.

			주거환경개선과

1. 주거환경관리사업 추진 구역수

(1) 연 번	주거환경개선과 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	주거환경개선과	담당자		박용구외 10인			전화번호	2133-7251
(4) 상위 전략목표	공동체 활성화를 위한 노후주거지 재생추진			상위 KPI		주거환경관리사업 추진 구역 수
(5) 전략/성과목표	쾌적한 주거환경조성
(6) 2015년 목표값	70	(7) 지표단위		구역수		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	○ 주거환경관리사업 추진 총 구역수(대상지 선정 + 사업추진 + 사업완료 )
(10) 정의 및 설명	○ 주거환경관리사업 정의 - 단독주택 및 다세대주택 등이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설의 확충을 통하여 주거환경을 보전·정비·개량하기 위하여 시행하는 사업 (‘12.8 도정법 개정 시행) ○ 추진 실적 : 총 65개 구역 - 2013년 이전 : 43개구역 - 2014년 : 12개구역 - 2015년 : 10개구역 ○ 추진목표 : 2016년도 5개구역 선정 추진
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적		43
	2014년(Y-2) 실적		55
	2015년(Y-1) 실적		65
	2016년(Y) 목표		70
	2016년(Y+1) 목표		75
	목표값 설정근거		- ‘16년 핵심과제(희망지사업) 선정을 지원코자 상반기 주거환경관리구역 선정 완전 보류(자치구 공문 시달/2016.2.3.) 구역의 양적인 증가보다는 주민역량 강화의 질적 향상에 치중
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ), 년( ◯ )
	실적집계방법 : 시작점( ), 평균값( ), 합산값( ◯ )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	-				70

2. 성곽마을 재생사업 추진율

(1) 연    번

주거환경개선과 -  2

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

주거환경개선과

담당자

이정식

전화번호

2133-7248

(4) 상위 전략목표

공동체 활성화를 위한 노후주거지

재생추진

상위 KPI

성곽마을 재생사업 추진 율

(5) 전략/성과목표

쾌적한 주거환경조성

(6) 2016년 목표값

65.0

(7) 단 위

%

(8) 가 중 치

(9) 지 표 산 식

성곽마을 8개권역 추진단계에 따른 이행달성도 계량화

(10) 정의 및 설명

∘정    의 : 8개권역 업무비중, 추진단계별 소요기간 등 고려하여 추진율 정함

- 성공모델 2개권역 : 이화‧충신, 행촌

- 기타     6개권역 : 부암, 삼선, 명륜‧혜화, 다산, 성북, 광희

∘추 진 율 : 착수시점 기준으로 함

- 성공모델 2개권역 (40%) :  각 20% = 재생계획(10%) + 설계(5%) + 공사(5%)

- 기타     6개권역 (50%) :  각  8% = 재생계획( 3%) + 설계(2%) + 공사(3%) + 2%

- 공동체활성화사업 (10%) :  4년 × 2.5%/년 = 가치공유프로그램 (1.5%)+ 성곽마을주민네트워크 (1.0%)

① 재생계획 (40%)

- 성공모델 (20%) : 2개권역 × 10%        - 주민설명회 5%,   주민워크숍 5%

- 기타권역 (20%) : 6개권역 ×  3%  + 2% - 주민설명회 1.5%, 주민워크숍 1.5%

② 공공부문 설계 (22%)

- 성공모델 (10%) : 2개권역 × 5%   - 기타권역 (12%) : 6개권역 × 2%

③ 공공부문 공사 (28%)

- 성공모델 (10%) : 2개권역 × 5%   - 기타권역 (18%) : 6개권역 × 3%

④ 공동체활성화사업(10%) : 4년 × 2.5%/년

- 가치공유프로그램 (1.5%) = 5회 × 0.3%   - 성곽마을주민네트워크 회의 : 5회 × 0.2%

【연도별 추진계획】

∘14년 :  5.0%  - 계획   5%  : 이화충신 주민설명회

∘15년 : 42.5%  - 계획  34%  : 성공모델 20% (2개×10%) + 기타 14% (4개×3% + 2%)

설계   5%  : 이화충신  5%,  공동체 활성화 : 2..5%

∘16년 : 65.0%  - 계획  40% + 설계 10%(행촌) + 공사 10%(이화충신, 행촌) + 공동체

활성화 5%

- 2/4분기 (53.5%) : 계획 6% (기타2개), 설계 5%(행촌), 공동체활성화 1.0%

- 3/4분기 (54.0%) : 공동체활성화 0.5%

- 4/4분기 (65.0%) : 공사 10% (이화충신, 행촌), 공동체활성화 1.0%

∘17년 : 85.5%  - 계획 40% + 설계 22%(6개) + 공사 16%(2개) + 공동체활성화 7.5%

(11) 실적 및 계획

2013년(Y-3) 실적

2014년(Y-2) 실적

5%

2015년(Y-1) 실적

42.5%

2016년(Y)   목표

65.0%

2017년(Y+1) 목표

85.5%

목표값 설정근거

(12) 실적입력방식 및 주기별 목표

실적입력주기 : 반  기

실적집계방법 : 시점값

2/4분기

(상반기)

4/4분기

(하반기)

53.5%

65.0%

.

			동남권공공개발추진단

1.현대자동차부지 개발사업 추진율

(1) 연 번	동남권공공개발추진단 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권조성반	담당자		김남식 최나영 설성혜		전화번호	2133-8266 2133-8263 2133-8273
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성			상위 KPI
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2016년 목표값	80	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		50
(9) 지 표 산 식	○ 현대자동차부지 개발사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 현대자동차부지 개발사업 - 기간 : 2014.5 ~ 2016.4 (2년간) - 진행 : 도시계획변경 사전협상 발표(16.3월) → 세부개발계획 입안(16.3) → 주민공람, 부서협의(16.3~4) → 도시․건축위원회 심의(16.5) → 건축심의, 각종영향평가(16.7~12) → 건축허가,착공(17.1~6) ○ 추진계획 - 1/4분기 (40%) : 협상결과 발표 및 지구단위계획 주민제안서 입안,주민공람 - 2/4분기 (60%) : 지구단위계획 도시건축위원회 심의 , 교통영향평가 통보 - 3/4분기 (70%) : 건축심의 및 각종영향평가 접수 협의 - 4/4분기 (80%) : 건축허가 접수 및 부서협의
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적		50%
	2016년(Y) 목표		80%
	2017년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거		시정4개년계획, 16년 핵심과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	60%				80%

2.올림픽주경기장 리모델링 타당성조사 및 기본계획 수립률

(1) 연 번	동남권공공개발추진단 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권계획반	담당자		우인식		전화번호	2133-8236
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성			상위 KPI
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2016년 목표값	90	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		30
(9) 지 표 산 식	○ 잠실종합운동장 주경기장 타당성조사 및 기본계획 수립 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 잠실종합운동장내 주, 보조경기장 - 총 사업기간 : 2015.11 ~ 2017. 2 - 기간 : 타당성조사 및 기본계획 ‘16. 1 ~ ’17. 2 - 진행 : 타당성조사 착수→ 타당성조사 완료 → 기본계획 → 지역 주민, 이해 관계자 등 사업추진 자문단 구성‧운영 → 기본계획 수립 완료 ○ 시업추진계획 - 타당성 조사용역 중간 보고(20%) - 리모델링 기본계획 착수 (30%) - 리모델링 기본계획 중간보고(60%) - 리모델링 기본계획 수립 (90%)
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적
	2016년(Y) 목표		90%
	2017년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	40 %				90 %

.

			동남권조성반

1.현대자동차부지 개발사업 추진율

(1) 연 번	동남권조성반 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권조성반	담당자		김남식 최나영 설성혜		전화번호	2133-8266 2133-8263 2133-8273
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성			상위 KPI		현대자동차부지 개발사업 추진율
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2016년 목표값	80	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		50
(9) 지 표 산 식	○ 현대자동차부지 개발사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 현대자동차부지 개발사업 - 기간 : 2014.5 ~ 2016.4 (2년간) - 진행 : 도시계획변경 사전협상 발표(16.3월) → 세부개발계획 입안(16.3) → 주민공람, 부서협의(16.3~4) → 도시․건축위원회 심의(16.5) → 건축심의, 각종영향평가(16.7~12) → 건축허가,착공(17.1~6) ○ 추진계획 - 1/4분기 (40%) : 협상결과 발표 및 지구단위계획 주민제안서 입안,주민공람 - 2/4분기 (60%) : 지구단위계획 도시건축위원회 심의 , 교통영향평가 통보 - 3/4분기 (70%) : 건축심의 및 각종영향평가 접수 협의 - 4/4분기 (80%) : 건축허가 접수 및 부서협의
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적		50%
	2016년(Y) 목표		80%
	2017년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거		시정4개년계획, 16년 핵심과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	60%				80%

2.지구단위계획 재정비 사업 추진율

(1) 연 번	동남권조성반 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권조성반	담당자		이은중		전화번호	2133-8268
(4) 상위 전략목표	동남권 국제교류복합지구 조성			상위 KPI		지구단위계획 재정비사업 추진율
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2016년 목표값	100	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		30
(9) 지 표 산 식	○ 지구단위계획 재정비 사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 국제교류복합지구의 안정적 실현 및 체계적인 관리를 위한 지구단위계획 재정비 사업 추진 ○ 대규모 전략부지 개발과 연계 주변 중소규모 필지 개발방향 제시 ○ 추진계획 - 2/4분기 (98%) : 마스터플랜 수립 - 3/4분기 (100%) : 지구단위계획 세부 재정비
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적		90%
	2016년(Y) 목표		100%
	2017년(Y+1) 목표
	목표값 설정근거		시정4개년계획, 16년 핵심과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	98%				100%

.

			동남권계획반

1. 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 타당성조사 및 기본계획 수립률

(1) 연 번	동남권계획반 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권계획반	담당자		우인식		전화번호	2133-8236
(4) 상위 전략목표	균형발전 신경제거점 조성			상위 KPI		잠실종합운동장 주경기장 리모델링 타당성조사 및 기본계획 수립률
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2016년 목표값	90	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		50
(9) 지 표 산 식	○ 잠실종합운동장 주경기장 타당성조사 및 기본계획 수립 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 잠실종합운동장내 주, 보조경기장 - 총 사업기간 : 2015.11 ~ 2017. 2 - 기간 : 타당성조사 및 기본계획 ‘16. 1 ~ ’17. 2 - 진행 : 타당성조사 착수→ 타당성조사 완료 → 기본계획 → 지역 주민, 이해 관계자 등 사업추진 자문단 구성‧운영 → 기본계획 수립 완료 ○ 시업추진계획 - 타당성 조사용역 중간 보고(20%) - 리모델링 기본계획 착수 (30%) - 리모델링 기본계획 중간보고(60%) - 리모델링 기본계획 수립 (90%)
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적
	2016년(Y) 목표		90%
	2017년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( ) ※ 반기 측정주기 지표 부서별 1개이상 포함
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	40 %				90 %

2. 잠실종합운동장 민간사업자 RFC 공모 추진율

(1) 연 번	동남권계획반 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권계획반	담당자		류인종		전화번호	2133-8227
(4) 상위 전략목표	동남권 국제교류복합지구 조성			상위 KPI		잠실종합운동장 민간사업자 RFC 공모 추진율
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2016년 목표값	80	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		30
(9) 지 표 산 식	잠실종합운동장 민간사업자 RFC 공모 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 총 사업기간 : 2014년 ~ 2025년 - 민간투자사업(RFC) 공모 : ‘16.4~12월 ○ 사업방식 : 2단계(RFC+RFP)공모에 의한 정부고시방식 - 콘셉트 제안 요청서 : Request for Concepts, ‘이하RFC’ - 투자계획서 제출요청 : Request for Proposals, ‘이하 RFP’ ※ 민간투자법 [BTO(Build-Transfer-Operate)] 에 의거 추진 ○ 추진 계획 - 민간투자사업 추진계획 수립 : (20%) - 민간투자사업(RFC) 공고 : (40%) - RFC 사업제안서 심사.평가 계획 수립 : (65%) - 민간투자사업(RFC) 제안서 접수 및 평가 : (80%)
(11) 실적 및 계획	2013년(Y-3) 실적
	2014년(Y-2) 실적
	2015년(Y-1) 실적
	2016년(Y) 목표		80
	2017년(Y+1) 목표		100
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ○ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ○ ), 평균값( ), 합산값( )
	2/4분기 (상반기)				4/4분기 (하반기)
	40%				80%

.

			동북4구사업단

1. 창동·상계 신경제중심지 조성 계획 추진율

(1) 연 번	동북4구사업단 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동북4구추진반		담당자		강대양		전화번호		2133-8284
(4) 상위 전략목표	지속가능한 도시계획 체계를 확립 하여 사람중심의 도시조성				상위 KPI		창동·상계신경제중심지조성계획 수립율
(5) 전략/성과목표	지역발전을 위한 기반조성
(6) 2016년 목표값	100		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	창동·상계 신경제중심지조성 계획 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 마스터플랜 수립 및 경제기반형 도시재생활성화계획 수립 - 전략시설 도입 용도, 사업방식, 기업유치 및 재원조달방안 - 경제기반형 도시재생 활성화계획 - 창동 복합문화공연시설 기본계획 용역을 통한 구체화 - 플랫폼 창동61‘ 조성에 따른 계획 수립 및 설계공모 등 ○ 추진방법 : 학술 + 기술용역으로 계약 ○ 사업기간 : 2015. 9. ∼2017. 12. - 플랫폼 창동 61 조성 및 운영 (‘15. 9. ~ ’16.12.) - 동북권 체육공원 조성 (‘15.11. ~ ’17.12.) - 서울아레나 복합문화시설 민간제안 적격성 검토 (‘16. 1. ~ ’16. 7.) - 서울 아레나건립 문화예술거점 조성 (‘16. 4. ~ ’17. 2.) - 경제기반형 도시재생 활성화계획 수립 (‘15. 3 ~ ’16.12.) - 동북4구도시재생협력지원센터 운영 (‘15. 6. ~ ’16.12.) - 도봉면허시험장 이전 재배치계획 수립 (‘16. 3. ~ ’16. 8.) - 창동상계 동서간연결도로 기본계획(기본구상) 수립 (‘16. 3. ~ ’16.12) ○ 2015년 추진실적 : 80% - 1/4분기(35%) : 도시재생 활성화계획 및 플랫폼창동61’ 붐업 추진계획 - 2/4분기(50%) : 동북4구 도시재생협력지원센터 개소 - 3/4분기(65%) : 서울아레나 복합문화시설 건립 추진계획 수립 - 4/4분기(80%) : 동북4구 발전 컨퍼런스 개최 및 서울아레나 국제포럼 ○ 2016년 추진계획 : 100%, ※ 국토부의 활성화계획 결정절차 추가(변경) - 1/4분기(85%) : 활성화계획 작성 및 1차관문심사, 관계기관 협의 - 2/4분기(90%) : 2차관문심사 및 의회 의견청취 - 3/4분기(95%) : 지방재생위원회 자문 및 도시재생특별위원회 심의 - 4/4분기(100%) : 국비지원 및 창동‧상계 도시재생활성화계획 확정 고시
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 실적			10%
	2015년(Y) 목표			80%
	2016년(Y+1) 목표			100%
	목표값 설정근거			마스터플랜 및 계획수립 공정율
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 반 기( ○) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기(상반기)				3/4분기		4/4분기(하반기)
	80	85				90		100

2. 동북4구플랜 실행과제 추진율

(1) 연    번

동북4구사업단 - 2

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

동북4구추진반

담당자

노재원

전화번호

2133-8282

(4) 상위 전략목표

지속가능한 도시계획 체계를 확립

하여 사람중심의 도시조성

상위 KPI

동북4구플랜 실행과제 추진율

(5) 전략/성과목표

지역발전을 위한 기반조성

(6) 2016년 목표값

60

(7) 지표단위

%

(8) 가 중 치

20

(9) 지 표 산 식

동북4구플랜 실행과제 추진율

(10) 정의 및 설명

○ 사업내용 : 7개 핵심과제, 72개 실행과제 관리

정책방향	7개 핵심과제	실행과제
계		72
지역발전기반조성	➊ 창동·상계 新경제중심지 조성	4
	➋ 도시계획 제도적 지원	3
	➌ 중랑천 중심의 녹색생활 환경 기반 강화	7
지역 자원활용	➍ 지식·교육특성화	17
	➎ 자연역사문화 관광벨트 조성	20
지역현안해소	➏ 문화·복지·체육시설 확충	11
	➐ 생활기반시설 개선	10

○ 2016년 추진계획 : 60%

- 1/4분기(10%) : 동북4구 플랜 실행계획 통보 및 1분기 추진상황보고회

- 2/4분기(20%) : 과제 관리 및 T/F운영, 2분기 추진상황 보고회

- 3/4분기(33%) : 과제 관리 및 T/F운영, 3분기 추진상황 보고회

- 4/4분기(60%) : 2015 추진상황보고회 및 2016 동북4구플랜 실행계획 수립

(11) 실적 및 계획

2012년(Y-3) 실적

-

2013년(Y-2) 실적

-

2014년(Y-1) 실적

-

2015년(Y)   목표

47%

2016년(Y+1) 목표

60%

목표값 설정근거

실행과제 추진율

(12) 실적입력방식

및 주기별 목표

평 가  주 기 : 분  기( ○ )   반  기(  )   년(  )

실적입력주기 : 분  기( ○ )   반  기(  )   년(  )

실적집계방법 : 평균값(  )   시점값( ○ )   합산값 (  )

1/4분기

2/4분기

(상반기)

3/4분기

4/4분기

(하반기)

10%

20%

33%

60%

3. 서울아레나 건립 착공 및 문화예술거점 조성계획 추진율

(1) 연 번	동북4구사업단 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동북4구사업추진반		담당자		최승렬		전화번호		2133-8439
(4) 상위 전략목표	지속가능한 도시계획 체계를 확립 하여 사람중심의 도시조성				상위 KPI		서울아레나 건립 착공 및 문화예술거점 조성계획 수립율
(5) 전략/성과목표	선도사업 추진으로 성공적인 창동․상계 신경제중심지 조성
(6) 2016년 목표값	100		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	서울아레나 건립착공 및 문화예술거점 조성계획 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 서울아레나 건립 및 문화예술거점 조성 - 문화예술거점 조성 계획 수립 - 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업(민간제안) 추진 - 플랫폼 창동61‘ 조성에 따른 계획 수립 및 설계공모 등 ○ 추진방법 : 학술 + 기술용역으로 계 - 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업: 민간제안 방식 추진 - 문화예술거점 조성 계획 수립: 일반 용역 수행 ○ 사업기간 : 2015. ∼2017. 12. - 창동․상계 신경제중심지 조성 1단계로 서울아레나 건립 추진 발표 (’15. 2.) - 서울아레나 복합문화시설 건립계획 수립(시장방침) (’15. 9.) - 플랫폼 창동 61 조성 및 운영 (‘15. 9. ~ ’16.12.) - 서울아레나 민간제안서 접수 및 검토 (’15.11. ~ ’16.1.) - 서울아레나 복합문화시설 민간제안 적격성 검토 (‘16. 1. ~ 7.) - 문화예술거점 조성 계획 수립 (‘16. 5. ~ ’17. 3.) - 각종심의 및 기획재정부 민간투자사업심의 (‘16. 8. ~ ’16.11.) - 시의회 동의 및 제3자제안공고 (‘16.11 ~ ’17. 3.) - 문화예술거점 조성 세부 실행 계획 수립 (‘17. 5. ~ ’18. 3.) - 기획재정부 민간투자사업심의(2차) (‘17. 8 ~ ’17. 9.) - 시의회 보고 및 실시협약 체결 (‘17. 9.) - 착공 (‘17.12.) ○ 2015년 추진실적 : 25% - 1/4분기(5%) : 서울아레나 건립 계획 발표 - 3/4분기(15%) : 서울아레나 복합문화시설 건립 추진계획 수립 - 4/4분기(25%) : 민간투자사업 설명회 개최 및 서울아레나 국제포럼 ○ 2016년 추진계획 : 75% - 1/4분기(30%) : 서울아레나 복합문화시설 민간제안 적격성검토 의뢰, 현장방문 - 2/4분기(40%) : 문화예술거접 조성 계획 수립 착수보고 등 - 3/4분기(60%) : 적격성검토 완료, 재정계획심의, 공유재산심의 - 4/4분기(75%) : 기재부 민투심의, 시의회 동의
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 실적			-
	2015년(Y) 실적			-
	2016년(Y+1) 목표			60%
	목표값 설정근거			서울아레나 복합문화시설 건립 절차 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기(상반기)				3/4분기		4/4분기(하반기)
	10	25				45		60