문서번호	교통운영과-4438
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	신호운영팀장	교통운영과장
김상범	고광섭	03/11 강진동

네트워크 신호운영체계 시험운영 계획

2016. 3

교통운영과

(신호운영팀)

네트워크 신호운영체계 시험운영 계획

그동안 지속적으로 논의되던 네트워크 신호운영체계에 대하여 일부 지역에 대한 현장적용 시범운영 등 선제적으로 대응하고 향후 확대계획 수립 시 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□  추진경위

○ 차세대 신호운영체계 구축 시범사업 추진계획(교통운영과-473(‘16.1.11.)호)

○ 차세대 신호운영체계 시범사업 추진 자문회의 개최 계획(교통운영과-655(‘16.1.12.)호)

○ 차세대 신호운영체계 시범사업 추진 자문회의(1차) 결과(교통운영과-1190(‘16.1.21.)호)

○ 차세대 신호운영체계 시범사업 추진 자문회의(2차) 개최 계획(교통운영과-1900(‘16.1.29.)호)

○ 차세대 신호운영체계 시범사업 추진 자문회의(2차) 개최 계획 변경(교통운영과-2079(‘16.2.2.)호)

- 자문위원 1명 추가 (5명 → 6명)

○ 차세대 신호운영체계 시범사업 추진 자문회의(2차) 결과(교통운영과-2340(‘16.2.4.)호)

- 네트워크 신호운영체계 검토 필요성 제기(고◯◯, 김□□, 이△△ 위원)

□ 개  요

○ 목  적

-「서울시 차세대 신호운영체계 구축 사업」에 앞서 시의회, 도로교통공단, 관련 학회 등으로부터 지속적으로 논의되고 있는 네트워크 신호운영체계에 대하여 일부 지역에 대한 시험운영을 실시함으로서,

- 네트워크 신호운영 전략수립 및 현장적용 시범운영 등 선제적으로 대응하고 향후 확대계획 수립 등 사전준비에 만전을 기하고자 함.

○  규  모 : 7개 검토요청 지역 중 강남권 1개 지역

- 도로 연장 : 20.8㎞

- 4지교차로 44개소, 3지교차로 7개소, 단일로 횡단보도 54개소

□ 지역특성

○  도로 특성

- 주도로와 부도로의 구분이 어려울 만큼 전 방향의 교통량이 많은 도로로 교차로가 과포화 상태인 지역

- 신호운영 시 신호에 의한 대기차량 발생은 부도로 유입교통량과 합류되어 급격히 교차로 정체로 이어지는 도로

- 네트워크로 되어 있는 현재 도로축을 감안할 때, 현재 운영중인 SA (Sub Area) 제어로는 한계가 있는 지역

○ 지역특성에 맞는 신호제어 전략

- 신호에 의한 대기차량 발생을 최소화 하는 신호전략

- 네트워크 제어에 의한 주도로와 부도로의 신호연계 제어 전략

- 야간에 과속 차량을 제어할 수 있는 제어 신호제어 전략

□ 추진계획

○ 운영기간 : ’16. 3 ~ 6월

○ 세부 추진일정

기간	추진내용	비고
	시험운영계획 수립 및 사전 자료 조사
3~4월	변경(안) DB 검토	교통개선기획실, 신호운영실, 현장팀
	현황 / 계획(안) 시뮬레이션 분석	Vissim 등
	시뮬레이션 효과분석 결과 검토	필요시 서면자문
5월	시험운영을 위한 기관 협의	서울경찰청
	시험운영 시행 전 효과분석 지표자료 조사	통행속도(TOPIS)
	현장제어기 DB 변경
6월	시험운영 시행 및 효과분석 지표자료 조사	통행속도(TOPIS)
	시험운영 효과분석

○ 세부 내용

- 네트워크 맞춤형 제어전략 설계 사업은 서울시의 교차로 각각을 신호 제어하는 기존 제어방식에서 벗어나 네트워크 단위로 제어하는 것으로, 비슷한 교통류 특성을 보이고 주기가 같은 인접 교차로들을 그룹으로 묶어 Network Area를 구성하여 신호제어 하는 기법임

- 객관적이고 정량적인 신호제어 효과척도(MOE) 선정, 서울시 주요 교차로의 네트워크 제어전략 수립과 새로운 전략에 따라 기존 SA 재구성

- 이를 통해 요일별 시간대별 신호시간계획을 새롭게 수립하고 기존의 신호시간계획을 개선

□  기대효과

○ ’15년 추진한 서울시 교통신호 발전 기본계획 수립 시 제기되었던 네트워크 신호운영체계에 대한 효과 검증

○ 차세대 신호운영체계 구축을 통한 교통신호운영 고도화 사업추진 전 신호운영 효과 검증

붙임 : 1. 교차로 신호 운영자료 1부(따로붙임).

2. 대상지역 교차로 방향별 회전교통량 자료 1부(따로붙임). 끝.