문서번호	방재시설부-4357
결재일자	2016.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		신용우	03/29 임춘근
협조	터널건설과장		권혁대
	주무관		홍상필

- 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 -

동대문구 접속램프 조경식재 실정보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 -

동대문구 접속램프 실정보고 검토보고

『겸재교 건설 및 연결도로 건설공사』추진 중 동대문구 중랑천 제방부 식재   계획에 대하여 관련구청(동대문구)과 업무 협의한 사항을 공사에 반영한 실정    검토 보고임.

※ 관련공문 : 실정보고(동대문구 접속램프 조경식재 ) 검토 보고(동일(겸재)감 제16-63호/2016.3.23)

공사개요

○ 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사(조경)

○ 사업기간 : 2008.10.23. ~ 2016.12.31.

○ 규    모 : 본교량 B=18.24m, L=235m, 접속교량 B=9m, L=160m

육교설치 : 2개소, 도로확장 B=20→30m, L=750m

○ 공 사 비 : 300억원(조경 593백만원)

○ 시 공 사 : ㈜한진중공업, ㈜서우건영

○ 감 리 사 : ㈜동일기술공사, ㈜건화

동대문구청 요구사항 및 감리단 실정보고 내용

○ 동대문구 요구사항

구 분	요 구 사 항	검 토 사 항	비고
요구사항 및 검토사항	공사시행전과 같이 경사로에 수목이 식재되어 주변 경관과 조화를 이룰 수 있도록 옹벽 상부 녹지대의 유해식물 제거와 조경복구	☞ 접속램프구간 교목 및 관목 식재 - 왕벚나무 74주(램프A 34주, 램프B 40주) - 화살나무 790주(램프A 360주, 램프B 430주) - 회양목 920주(램프A 320주, 램프B 600주) - 산철쭉 430주(램프B 430주) - 잔디(평떼) 63m2(램프A 45m2, 램프B 18m2) - 식생토낭 15m(램프A 15m) - 줄사철식생매트 17m2(램프B 17m2) - 론생볏짚 40m2(램프B 40m2)

○ 감리단 실정보고 내용

- 중랑천 제방부 램프공사로 인하여 저촉되어 수목이식 및 제거한 지장수목          구간에 대하여 동대문구청으로부터 주변 경관과 조화를 이룰 수 있도록 램프          옹벽상부 조경식재 복구 요청에 따라 관할 구청과 협의 결과에 의거 조정          하고자 함.

- 물량 내역

구 분	수 목 명	규 격	단위	수 량		증감	비 고
				당 초	변 경
교 목	왕벚나무	H4.0xB10	주	11	85	증 74
관 목	산 철 쭉	H0.4xW0.4	주	1,910	2,340	증 430
	화살나무	H0.8xW0.4	주	1,490	2,280	증 790
	회 양 목	H0.3xW0.3	주	4,700	5,620	증 920
식 생 매 트		340*500*40T	㎡	113	130	증 17
기 타	식생토낭쌓기		m	-	15	증 15
	잔디(평떼)		㎡	-	63	증 63
	론생볏짚		m	-	40	증 40

- 본선제방부 식재계획 평면도

램프A

램프B

○ 감리단 의견

- 상기와 같이 동대문구 제방부 램프공사로 인한 수목이식 및 제거 구간에          대하여 동대문구청으로부터 주변 경관과 조화를 이룰 수 있도록 옹벽상부          조경식재 복구 요청건에 대한 관할구청과 협의 결과에 의거 “제방부 조경          식재 복구 요청”건에 대한 검토결과 적정한 것으로 판단되므로,

- 조경 식재시기를 감안하여 우선 선시공 조치하고 추후 설계 변경시 반영          조치함이 타당하다고 사료됨.

공사비 증․감내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감	비 고
총공사비		106,200,000	163,200,000	증 57,000,000
도급비	공급가액	96,545,000	148,364,000	증 51,818,000
	부 가 세	9,6555,000	14,836,000	증 5,182,000
	소 계	106,200,000	163,200,000	증 57,000,000

검토결과

○ 동대문구청 제방상부 수목이 없고 잡초, 환삼덩굴 등 유해식물로 주변        경관을 저해하고 있어 정비 요구하는 구청의견 사항 및 램프하부         미식재된 지역에 대하여 업무 협의한 사항을 공사에 반영하여 주변        경관을 향상하고자 함.

※ 수목식재 계획 협의회신(공원녹지과-3678/2016.3.16.)

○ 우선 시공토록 감리단 실정보고 사항을 승인처리 하며 추후 설계변경        소위원회 심의 결과에 의거 설계변경시 정산․반영할 수 있도록 감리단에        통보하고자 함.

붙임 : 1. 실정보고 검토보고 1부.

2. 협의공문 각1부.  끝.