서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(신기하고 재미있는 공원등 제작 설치)

우리 부서에서 시행중인『신기하고 재미있는 공원등 제작 설치』사업에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 신기하고 재미있는 공원등 제작 설치

나. 계 약 자 : ***********

다. 계약금액 : 금95,400,000원(금구천오백사십만원정)

라. 준공기한 연기

- 당   초 : 2015. 08. 27. ~ 2016. 03. 31.

- 변   경 : 2015. 08. 27. ~ 2016. 06. 30.

마. 예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비

첨부 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부(원본 별송) . 끝.

	공원녹지정책과장
주무관	안규문		공원관리팀장	문길동		공원녹지정책과장	03/30 최윤종
협조자
시행	공원녹지정책과-4748	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21, 9층	/
전화	2133-2029	/전송	2133-1080	/	gyumoon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)