문서번호	건축부-4146
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김현지		代남궁환	04/01 안재혁
협 조

북한산성 대성문 및 육축 해체보수공사

설계용역 시행 계획

2016. 4.

도시기반시설본부

건   축   부

북한산성 대성문 및 육축 해체보수공사

설계용역 시행 계획

국가문화재인 북한산성(사적 제162호) 대성문의 문루 및 육축부를 전면 해체․보수를 위한 설계용역을 실시하여 문화재보호 및 시민안전을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 북한산성 대성문 및 육축 해체보수공사

○ 위    치 : 서울시 성북구 정릉동 대성문

○ 해체보수범위

- 문  루 : 바닥면적 35.24㎡, 높이 약5.7m(육축상단~용마루상단)

- 육축부 : 높이 약5.5m(육축하단지면~육축상단), 폭 12m, 너비 8m

	문 루 육축부
대성문 전경사진	해체보수범위

○ 총사업비 : 900백만원(시설비)

○ 사업기간 : 2016.02~2018.07

□ 추진경위

○ `14.10~`15.8 : 북한산성 대남문, 대성문 정밀안전진단 실시

○ `16.2.16 : 북한산성 대성문 해체보수(복원) 추진계획

○ `16.2.16 : 실시설계 및 공사발주 의뢰(한양도성도감→건축부)

□ 용역발주계획

○ 용 역 명 : 북한산성 대성문 및 육축 해체보수공사 설계용역

○ 용 역 비 : 70,327천원(부가세포함)
※ 기술용역 타당성 심사결과에 따라 변경될 수 있음

○ 용역기간 : 착수일로부터 90일(공휴일포함)

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 사 유 : 지방계약법 시행령 제20조 및 동법시행규칙 제24조 규정에 의거 입찰참여업체의 지역을 “서울특별시”로 제한하여 설계용역을 원활히 관리할 수 있도록 사업추진 하고자 함

○ 입찰참가자격

- 문화재수리등에 관한 법률 제14조 규정에 의한 “문화재실측설계업”으로 등록된 자로서 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소가 “서울특별시”에 소재한하여야 한다.

○ 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존관리활용, 한양도성보존정비, 북한산성 보수보존, 시설비(401-01)

□ 향후 계획

○ 2016. 4월 : 기술용역타당성심사결과, 용역발주

○ 2016. 4월 ~ 7월 : 설계용역 시행

○ 2016. 7월 : 문화재청 설계승인

○ 2016. 8월 : 계약심사 의뢰 및 공사발주

○ 2018. 7월 : 공사준공

붙 임  1. 설계용역비 산출서 1부
2. 과업내용서 1부.
3. 사업시행 방침(공사의뢰부서) 1부.  끝.