서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	마포자원회수시설 운영소장
(경유)
제목	2016년 마포자원회수시설 대정비 계획 승인 통보

1. 마자운영 16- 131(2016.3.17.)호와 관련입니다.

2. 마포자원회수시설 2016년 대정비 계획을 아래와 같이 승인하오니 정비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2016년 마포자원회수시설 대정비 계획 승인

나. 대정비기간 : 2016.5.2.~ 6.4.

구 분	일 정	비 고
1호기 정비 2호기 정비 3호기 정비	5.02 ~ 6.03(34일) 5.07 ~ 6.04(29일) 5.08 ~ 6.05(29일)	1,2,3호기 [화격자 교체, 컨베어 보수, 회전기기류 정비, 소각로 내화물 보수 등]
폐기물 반입정지	5.02 ~ 5.31(30일)	폐기물 수도권 매립지 처리
수열중지	5.06 ~ 6.04(30일)	한국지역난방공사 통보
소각로 가동	6.03 #1-14:00 6.05 #2-14:00 6.07 #3-14:00	승온(보조버너 점화) 〃 〃

다. 소요예산 :3,409,241천원

라. 정비내역 : 소각로 내화물  교체등 105건(외주 12건, 자체93건)

마. 승인조건

- 공사(안전, 품질, 공정 등) 및 폐기물 관리 철저

특히 대정비 작업 중 안전관리에 만전

- 정비 사업에 대한 승인 조건 이행 철저

- 대정비 종료 후 20일 이내 실적 보고

첨부 : 2016년 마포자원회수시설 대정비 계획 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	명석용		자원회수시설팀장	代안종호		자원순환과장	04/04 이인근
협조자
시행	자원순환과-5165	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3686	/전송	2133-1026	/	msy7266@seoul.go.kr	/	대시민공개