문서번호	녹지관리과-1410
결재일자	2016.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장	공원부장
장창수	문경재	04/15 장상규

- 2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역 -

준공기한 연기 검토보고

2016. 4

녹지관리과

- 2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역 -

준공기한 연기 검토보고

한강공원의 경관을 향상시키고 자연성회복을 위하여 시행중인 2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역과 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기하여 사업시행에 만전을 기하고자 함.

▢ 용역현황

○ 용 역 명 : 2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역

○ 계약업체 : 에이스톤엔지니어링(주) 대표 장명학

○ 계약금액 : 금36,204,000원

○ 계약년월일 : 2016. 03. 09

○ 착수년월일 : 2016. 03. 09

○ 준공기한 : 2016. 04. 17

▢ 검토내용

○ 준공기한 연기사유

- 한강공원 고수호안 전체에 대한 현황분석 및 개선방향 검토

- 각 공원별(11개 공원) 특색(테마 부여)있는 녹화방안 검토

- 현장에 적용 가능한 식재기반 공법 및 관수시스템 추가 검토

- 수리검토, 점용허가 등 관련 법령 및 절차 검토

- 전문가 자문 및 시장단 보고 시행 등

○ 준공기한 연기

┏ 당  초 : 2016. 03. 09 ~ 04. 17

┗ 변  경 : 2016. 03. 09 ~ 06. 17

○ 연기사유 귀책소재 : 발주처

○ 배상지연금 부과여부 : 미부과

▢ 검토의견

○ 한강공원 고수호안 전체에 대한 현황분석 및 개선방향 검토, 각 공원별 테마부여, 식재기반 공법 및 관수시스템 추가 검토 등에 상당한 시일이 소요되어 부득이하게 상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 준공기한 연기요청 공문 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.