문서번호	서북병원원무과-1670
결재일자	2014.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★시설팀장	원무과장
조선행	02/05 조기현
협 조
	서무팀장		한홍재

「서북병원 음압유지시설 공사」 준공기한 연기 검토보고

2014.  2.

서울특별시 서북병원(원무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

서북병원 음압유지시설 설치공사 준공기한 연기 검토보고

서북병원 음압유지시설 설치공사와 관련 공사감독부서인 시설관리 공단으로부터 추가공사 물량 발생 등으로 준공기한 연기요청 보고서가 접수되어 검토보고 함.

1	공사개요

○ 공 사 명 : 서북병원 음압유지시설 설치공사

○ 공사기간 : 2013. 11. 1 ~ 2014. 2. 8

○ 공사내용

- 15~17 병동 F.C.U철거 및 신설 ,15병동 덕트 철거 및 신설

- 15~17 병동용 공조기 철거 및 신설

- 15병동 각 실에 CAV , VAV를 설치하여 음압유지 환경조성

- 2층 진료실 확장 및 환기설비 설치 등

○ 시공업체 : 설비 - ㈜청봉건업 / 건축 - (주)윤경건설

○ 도급금액 : 597,457,350원

2	검토내용

○ 관련근거 : 시설관리공단 공사감독3처–940 (2014. 2. 4)

○ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2013.10.25 ～ 2014.2.8	2013.10.25 ～ 2014.2.20	계약금액 변동없음

○ 연기사유

- 추가공사 물량 발생에 따른 절대공기 부족으로 인한 준공기한 연기

- 추가공사 물량 : 2층 진료실 도어교체, 동관 2,3층 층별 제어밸브 설치 등

○ 귀책소재 : 서울특별시 서북병원

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

3	검토의견

○ 위와 같이 준공기한을 연기 조치하여 공사 추진에 만전을 기하고자 합니다.

첨    부 :  준공기한 연기조치 의뢰서 및 관련서류 각 1부. 끝.