준공기한 연기조치 의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 서북병원 음압유지시설 설치공사

나. 계약금액 : 금오억구천칠백사십오만칠천삼백오십원정(￦597,457,350)

다. 계 약 자

- 업체명 : (주)청봉건설   대표  문범석

(주소 : 서울시 구로구 오리로9길 44 청봉빌딩 2층 ☎02-899-8135)

- 업체명 : (주)윤경건설   대표  이태형

(주소 : 서울시 송파구 송이로 165-0 수일빌딩 4층 ☎070-8822-9177)

마. 계약년월일 : 2013. 10. 25

바. 착공일자  : 2013. 11. 01

바. 준 공기한 : 2014. 02. 08

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한 : 2014. 02. 20

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서북병원

다. 지체상금부과 여부 : 미부과

라. 연기사유

- 추가공사 물량 발생에 따른 절대공기 부족으로 인한 준공기한 연기

- 추가공사 물량 : 2층 진료실 도어교체, 동관 2,3층 층별 제어밸브 설치 등

2014.  2.   .

원무과장  조 기 현 (인)

서울특별시 서북병원 경리관 귀하