투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	조달 물품구매 납품기한 연기요청(음수기)

1. 공원운영과-5202(2016.3.25.)호와 관련입니다.

2. 남산 회현자락 한양도성 보존・정비 및 공원 조성공사와 관련, 조달 물품구매건에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 조달 물품구매 (음수기)

나. 납품기한 연기 요청내역

물품식별 번 호	품명	규격	단위	수량	단가	금액(원)	납품기한
							당 초	변 경
22780889	음수기	천일석재, na-ch307,1450*500*900	대	2	3,348,000	6,696,000	‘16.5.3	‘16.5.31

다. 변경사유 :  본 공사 추진일정에 맞쳐 납품기한 연기. 끝.

	시설과장
조경팀장	남상국		시설과장	05/09 김한준
협조자
시행	시설과-3359	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02) 3783-5966	/전송	02) 3783-5969	/	namsg8535@seoul.go.kr	/	대시민공개