문서번호	계약심사과-8512
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	토목심사팀장	계약심사과장
신정	김종호	05/16 김성규

계약심사 재심의 요청에 대한 조치계획

[한강대교 보수공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

계약심사과

[한강대교 보수공사]

계약심사 재심의 요청에 대한 조치계획

「한강대교 보수공사」에 대한 계약심사 재심의 요청 사항에 대하여검토하고 조치계획을 수립하여 계약심사 업무 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				관련 근거

□ 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제7조 제3항

발주부서의 장은 심사부서의 장이 통보한 계약 심사결과에 이의가 있거나 수용하기 곤란한 특별한 사유가 있으면 소명서를 첨부하여 심사부서의 장에게 재심사를 요청할 수 있다

Ⅱ				재심사 요청내용

□ 공 사 명 : 한강대교 보수공사

□ 추진경위

○ ‘16. 03.22 : 계약심사 요청(교량안전과 → 계약심사과)

○ ‘16. 04.12 : 계약심사 결과통보(계약심사과 → 교량안전과)

○ ‘16. 04.20 : 계약심사 보완 제출(교량안전과 → 계약심사과)

□ 재심사 요청내용

○ 공중비계 일위대가

- 재료비 단가 합계 오류(크레인 재료비 누락)

- 공중비계 설치 및 철거 기간 조정 요청 : 3개월 → 6개월

○ 교통시설 안전사고 우려

- 교통정리원 및 사인보도 등 교통사고 예방차원에서 반영

Ⅲ				재심사 요청사유별 검토의견

구 분	재심사 요청	검토의견	비고
공중비계설치 및 철거기간	공중비계설치 및 철거 기간은 3개월에서 6개월 조정	-공중비계설치 및 철거 기간은 3개월로 심사 요청하였으며, -계약심사에서는 조정 사실 없음 (참고로 비계는 해당공종 시공기간만 사용)	미 반영
재료의 합 계	재료비 단가 합계시 크레인 재료비 미 반영	-재료비 단가 합계시 오류(누락)부분 반영	반 영
안 전 사 고 우 려	차량 교통사고 예방차원에서 교통정리원, 사인보드 등 안전에 문제점이 없도록 설치 반영 필요	-계약심사는 심사요청시 제출된 설계서(설계도면,시방서 등)에 따라 심사하고 있으며, -교통정리원 등은 계약심사 요청시 설계도면과 공사시방서 없이 임의의 수량으로 심사요청하여, 수량과 시방(역할)확인이 곤란하여 제외하였음. ※참고로 추후 원가계상시 부대공에 반영되는 가시설, 별도 인건비 등도 설계도면, 공사시방서작성 후 원가산출필요(계약심사과-7321호, ‘16.4.21)	미 반영

Ⅳ				조치 계획

○ 공중비계 단가에서 재료비 합계 오류가 발생된「크레인 재료비 반영」하고

○ 기타사항은 해당부서에서 적의 판단 조치할 사항임을 통보코자 함.  끝.