문서번호	물재생계획과-6503
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈	김준형	05/18 하상문

「반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계」

유역 경계조정사업 3차 시행(안) 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

물순환안전국

(물재생계획과)

『반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계』

유역경계조정 사업 3차 시행(안) 검토

강남역 일대 침수 해소를 위해 단기대책으로 마련한 유역 경계조정 사업에 대하여, 3차 설계가 완료되어 예산 재배정 등 전반적 사항을 검토 후 추진계획을 보고 드림

☐ 추진근거

❍ 강남역 일대 침수 해소를 위한 배수개선대책 추진계획

(하천관리과-2158 2015.2.10.)

☐ 사업개요

❍ 반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계용역

- 용 역 명 : 반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2015.9.25. ~ 2016.9.23.

- 용 역 비 : 1.608백만원

- 과업내용

▸ 역경사 관로개선(▣1.5m×1.5m@3, L=36m→2.0m×3.0m, L=66m)

▸ 유역경계조정  13.2ha

▸ 유역분리터널(D=7.5m,  L=1.3km)

☐ 추진경위

❍ ‘13.3.4 ∼ ’15.2.20 :『강남역일대 배수개선대책 검토 기본 및 실시설계』용역추진

- 용역결과 : 하수도 배수구역 경계조정 등(단기) + 유역분리터널(중기)

※ 용역주관사 파산으로 기본계획 수립 후 용역준공

❍ ‘15. 9.25 : 반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계용역 계약

❍ ‘15.10. 7 : 용역 착수보고

❍ ‘15.10. 7 ∼ : 용역설계 진행중

【추진실적】

- 터널유입부 공사시행 의뢰(서초구청 ‘16.3.2)

· 총공사비 : 4,814백만원

· 사업규모 : □ 5.0×6.0(B×L), L=120m

- 유역경계구역 조정 사업 추진 : 총 8.33ha

· 1차분(우선시공분) 공사착공 : ‘16.1.27.일 (3.75ha)

· 2차분 예산배정 : ‘16.3.15일(4.58ha)

☐ 금회 설계개요 및 예산현황

❍ 금회(3차) 설계개요

- 유역경계조정 면적 : 13.47ha

- U형 플륨관 설치 등 3,067M

- 집수정, 10개소, 역지밸브 55개소, 포장 176a 등

- 설계금액 : 총 2,638백만원(도급비1,485. 관급비1,059. 이전비94 )

❍ 예산현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	기배정액		배정잔액	비고
		1차배정	2차배정
강남역일대 침수방지	4,000,000	1,456,012	643,000	1,900,988

☐ 검토의견

❍ 강남역 일대 침수피해 해소를 위하여 조속한 추진이 필요

❍ 사업추진 방법

- 공사추진 : 서초구청 시행

- 예산조치 : 금회 설계한 금액에 비하여 확보된 예산이 부족함

⇒ 유역경계조정 사업으로 서초구청에 배정된 예산중 낙찰잔액 및 불용이 예상되는 이전비 등과 금회 배정된 예산의 낙찰차액 활용

- 예산비교

단위 : 백만원

구 분	합 계	배정잔액	기 배정 낙찰차액 등	금회배정 낙찰차액
확보가능한 예산	2,650	1,900	560	190
금회설계금액	2,638

- 계약심사 : 1,2차 계약심사 단가를 반영(신규단가 일부포함)하여 계약 심사를 생략하고, 서초구청의 일상감사만 받고 입찰 추진

- 사업기간 : 착공일로부터 120일

- 예산배정 : 서초구 요청에 따라 예산 재배정

☐ 향후계획

❍ ‘16.5월 : 예산요청(서초구)

❍ ‘16.6월∼ 10월 : 공사착공 및 준공

☐ 행정사항

❍ 침수피해 예방 사업임을 감안 신속한 공사발주와 준공이 이루어질 수 있도록 전력을 기울여 주시기 바람

※ 예산과목 : 물순환안전국 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로신설개량(하수도사업특별회계), 강남역일대 침수방지(배수구역경계조정), 시설비 및 부대비