문서번호	도시철도사업부-4700
결재일자	2016.5.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
권순환		박용우	05/18 권영찬
협 조
	주무관			박노성
	주무관			신익현

『지하철 9호선 3단계 건설공사』

후속공정 관련 실무회의(2차) 결과 보고

2016. 5

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『지하철 9호선 3단계 건설공사』
후속공정 관련 실무회의(2차) 결과 보고

지하철 9호선 3단계 건설공사의 효율적인 관리와 원활한 사업추진을 위하여 후속공정 관련 실무회의(2차)를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘16. 5. 18.(수) 10:30 ~ 11:40

○ 장    소 : 도시철도국 10층 회의실

○ 참 석 자 : 13명

- 공정관리과장 외 분야별 공구 업무담당

□ 회의결과

○ 후속공정 추진에 따른 인수인계 일정 토의

○ 분야별 요구(협조)사항

<시스템분야>

- 전차선 매입전 본 볼트 설치를 조속 시행하고 인도 요함

⇒ 구조물 완료된 200m 이상 구간 ‘16년 6월까지 우선 인도하고 기타 구간도 조속 인도

⇒ 현재 구조물 시공 중인 나머지 구간은 ‘17년 2월까지 인도

- 정거장 기능실(변전실, 전기실, 통신실 등) 인계 조속 시행

⇒ 변전실은 ‘17년 4월까지 인도 요함(시건장치 포함)

⇒ 나머지 기능실은  ‘17년 6월까지 인도

<건축분야>

- 기능실 패드 등 장비기초 도면(샵 드로잉) 사전 제출

- 선행공정(토목)에서 작업장 적기 인도(기능실 건축공정 3개월 필요)

<토목분야>

- 관리공정에 대하여 분야별(토목, 건축, 전기, 설비 등) 공사관리관이  상호 검토하여 실현 가능한 공정표가 작성 되도록 적극 협조

□ 향후계획

○ 금회 실무회의시 협조요청 및 요구사항은 각 분야(공구)별로  시행될 수 있도록 적극 반영 조치

○ 차기 실무회의는 일정계획 수립 후 각 부서 및 공구에 통보

붙임  1. 시스템 후속공정 관련 추진일정(예정) 1부.

2. 참석자 명부 1부.

3. 실무회의 사진 1부.  끝.