문서번호	토목부-10150
결재일자	2016.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	05/20 김영수
협조
	주무관		이정원

용비교(시ㆍ종점부) 도로포장 및 공사손해보험 정산보고

(용비교-행당중간 도로개설공사)

2016.5.

도시기반시설본부

(토목부)

용비교(시ㆍ종점부) 도로포장 및 공사손해보험 정산보고

(용비교-행당중간 도로개설공사)

용비교 시ㆍ종점부 도로포장 시공 및 공사기간 연장(□12.12.31.→□16.5.31.)에 따른 공사손해 보험료 등 정산 검토 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 토목부-9228호(2016.5.11.) 업무지시전(중랑천 둔치 정비관련 회의결과 통보)

○ PH16-용행감-055호(2016.5.18.) 실정보고 승인 요청(포장공 및 공사손해보험 정산)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 용비교-행당중간 도로개설공사

○ 공사위치 : 성동구 금호동 용비교 북단 ~ 행당동 행당중

○ 공사규모 : 용비교 확장 및 도로개설공사(4차로→6차로 확장, 연장719[eqn: m])

○ 공사기간 : □07.3.22. ~ □16.5.31.

○ 도 급 비 : 27,988백만원

○ 감 리 단 : ㈜평화엔지니어링 외 1개사

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 공 정 률 : 97%

Ⅲ		보고내용

□ 용비교(시ㆍ종점부) 도로포장 시공 및 공사손해 보험료 반영

○ 용비교 시ㆍ종점부 차량의 주행성 확보 및 안전사고 예방을 위한 도로       포장 시공 후 물량(증) 반영

○ 공사기간 연장(□12.12.31.→□16.5.31.)에 따른 공사손해 보험료        반영

단면도

용비교 시점부

용비교 종점부

A2 포장면적

수량 증ㆍ감 현황

공 정	규 격	단 위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
1. 포장공
아스콘 표층	T=5[eqn: cm]	[eqn: m ^{2}]	5,017	6,579	1,562
아스콘 중간층	T=7[eqn: cm]	[eqn: m ^{2}]	1,755	988	767
아스콘 기층	T=13[eqn: cm]	[eqn: m ^{2}]	1,113	988	125
보도블럭		[eqn: m ^{2}]	467	157	310
투수콘크리트 포장		[eqn: m ^{2}]	1,370	-	1370
2. 부대공		인,월	180	150	30
3. 공사손해보험		식	1	1	-

공사비 증ㆍ감 현황

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
포장공	100,978	59,659	41,319
2. 부대공	261,863	218,219	43,644
순공사비	362,841	277,878	84,963
제 잡 비	94,915	85,866	9,049
공사손해보험	61,785	179,645	117,860
물가변동비	29,029	22,231	6,798
도급공사비	548,570	565,620	17,050
관급자재비	112,246	86,525	25,721
총 공사비	660,816	652,145	8,671

Ⅳ		조치계획

○ 용비교 시ㆍ종점부 도로포장 시공 및 공사기간 연장에 따른 공사손해        보험료 정산은 적정함으로 향후 설계 변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토 의견서 1부.  끝.