검 토 의 견 서

○ 검토건명 : 포장공 및 공사손해보험 정산

○ 공 사 명 : 용비교-행당중간 도로개설공사

1. 실정보고 사유

-.포장공 및 부대공, 공사손해보험에 대하여 현지여건 등에 맞추어 시공하고 정산처리

2. 검토내용

1)관련근거

가)2016.05.11. 도시기반시설본부-16-3628 : 중랑천 둔치 정비관련 회의 결과 통보

-.교량하부 자전거도로 한강사업본부에서 원상복구

나)공사손해보험 정산 관련

-.공사계약일반조건 제23조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

-.정부입찰,계약집행기준 제73조(공사이행기간의 변경에 따른 실비산정) 4항

-.조달청 질의회신 : 계약상대자의 책임없는 사유로 계약기간이 연장될 경우에는

위 규정에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위내에서 조정

2)현황

구 분	내 용	비고
포장공 정산	1.현장여건에 맞추어 조정 시공 2.한강사업본부 협의사항 반영 -.교량하부 자전거도로 한강사업본부에서 원상복구로 삭제
부대공 (교통관리인)	-.현장여건에 맞추어 조정
공사손해보험	-.공사기간 연장에 따른 추가 보험료 정산 가) 1회 공기연장(12.12.31→14.12.31) 따른 추가 납부 나) 2회 공기연장(14.12.31→15.12.31) 따른 추가 납부 다) 3회 공기연장 15.12.31→16.05.31) 따른 추가 납부

3)수량 증감 현황

공 종	규격	단위	당초	변경	증.감	비고
나. 포장공
-.아스콘표층	T=5cm	㎡	5,017	6,579	1,562
-.아스콘중간층	T=7cm	㎡	1,755	988	-767
-.아스콘기층	T=13cm	㎡	1,113	988	-125
-.보도블럭		㎡	467	157	-310
-.투수콘크리트포장		㎡	1,370	-	-1,370
나. 부대공(교통관리인)		인,월	180	150	-30
나. 공사손해보험		식	1	1	-

3. 공사비 검토

1)적용단가

-.기존 계약단가 적용

2)공사비 증감

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
가. 포장공	100,978	59,659	-41,319
나. 부대공	261,863	218,219	-43,644
순공사비	362,841	277,878	-84,963
제 잡 비	94,915	85866	-9,049
공사손해보험	61,785	179,645	117,860
물가변동비	29,029	22,231	-6,798
도급공사비	548,570	565,620	17,050
관급자재비	112,246	86,525	-25,721
페기물처리비	-	-	-
총 공사비	660,816	652,145	-8,671

4. 검토의견

-.상기 내용과 같이 중랑천 둔치 정비관련 한강사업본부 협의 결과에 따른 반영과 현지여건에 맞추어 시공한 포장공과 부대공, 공기연장에 따른 공사손해보험 추가 납부에 대하여 정산처리하는 것은 적정하다고 사료됩니다.

2016. 05.

검토자  책임감리원  장 현 종