서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약변경 의뢰

1. GK(엔)제16-067호(2016.5.9.), 도로관리과-7466호(2016.5.10.), GK(엔)제16-069호(2016.5.11.), 도로관리과-8191호(2016.5.24.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행하고 있는 “2015년 노면하부 동공탐사용역(1단계)”에 대하여 준공 정산에 따른 설계변경을 시행하고 아래와 같이 계약변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2015년 노면하부 동공탐사용역(1단계)

나. 계 약 자 : 지케이엔지니어링(주) 대표 고권녀

다. 계약금액 : 394,435,000원

라. 계약기간 : 2015.7.24. ~ 2016.5.31

마. 용역개요 : 노면하부탐사 250km, 목표동공 90개소, 추가과업 1식

바. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로시설물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비.(2015년도 명시이월 예산)

사. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	비고(증․감)
계약금액	394,435,000	392,185,000	감)2,250,000
계약기간	2015.7.24.~2016.5.31	변경없음

아. 설계변경 사유 : 준공 정산에 따른 설계변경

첨부 1. 2015년노면하부 동공탐사용역(1단계) 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 시행(내부방침) 1부.  끝.

	도로관리과장
주무관	최현		도로관리팀장	최연우		도로관리과장	05/24 배광환
협조자	주무관	김종민		도로포장연구센터장	백종은		계약1팀장	김점선
시행	도로관리과-8213	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(6층)	/
전화	2133-8169	/전송	2133-0765	/	chtry@seoul.go.kr	/	부분공개(5)