서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	「2030 하수도정비기본계획」 기술용역 과업중지 알림

1. 물재생계획과-6834(′16.5.25)호와 관련입니다.

2. 현재 진행중인 「2030 하수도정비기본계획」 기술용역과 관련하여 다음과 같이 과업중지를 알려드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

○ 과업중지내용

· 과업중지 기간 : 360일

구분	당초		변경(안)		비고
계약 기간	총차	′13.7.22~′16.5.31	총차	′13.7.22~′17.5.20
	2차	′14.7.19~′16.5.31	2차	′14.7.19~′17.5.20

※ 환경부 승인 완료시 과업정지를 해제하고 잔여 용역기간동안 지적사항 보완 조치

· 과업중지 사유

1) 환경부 변경 승인 등 필수 법적 절차 이행

2) 미편성 예산(잔여용역비 100백만원)의 ′17년 재편성 집행

3) 관로조사 관련 용역 결과 반영 등 내용 보완 등

○ 과업중지 개시일자 : 2016.5.25.

붙임 : 「2030하수도정비기본계획」 기술용역 일시정지 검토보고 방침서(물재생계획과-6834호) 1부. 끝.

	물재생계획과장
수신자	재무과장,예산담당관
주무관	윤혜선		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	05/25 하상문
협조자
시행	물재생계획과-6846	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3787	/전송	02-2133-1042	/	hsyun@seoul.go.kr	/	대시민공개