투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 책임감리원 귀하
(경유)
제목	협잡물야적장 탈취기 실정보고 승인 알림(서남분뇨처리시설)

1. 서분감 제2016-221(2016.5.25.)호와 관련입니다.

2.『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』과 관련 기존처리장 시설보수는 드럼스크린 설치기간 기존처리장으로 분뇨반입을 위하여 긴급 보수하는 공사로 발주기관 필요에 의하여 추가 사항으로 공사계약 일반조건 제19조의5 규정에 따라 계약금액 증액 설계변경 승인하오니,

3. 조속히 공사를 진행하여 주시고, 공사 완료후 공사금액에 대하여 정산토록 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 기존처리장 시설보수 검토 보고 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이호기		환경설비과장	05/26 여인웅
협조자
시행	설비부-8376	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개