문서번호	디자인정책과-5784
결재일자	2016.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		디자인개발팀장	디자인정책과장
류경애		강효진	전결 06/03 代최원규
협조

2016년 학교환경개선 컬러컨설팅

용역 착수 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

문 화 본 부

(디자인정책과)

2016년 학교환경개선 컬러컨설팅

용역 착수 보고

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 2016년 학교환경개선 컬러컨설팅

□ 사업기간 : 2016. 5. ~ 12.

□ 사 업 비 : 금99,000,000원

□ 사업내용

① 초 ․ 중 ․ 고 교육공간의 특성에 맞는 색채기본계획 개발 (10개 학교)

② 그래픽 전문가풀 구성하여 학교별 그래픽도안 도출·적용

③ 시범사업지 전․후 모니터링

④ 전문가 자문회의 구성․운영(회의개최 및 의견수렴)

⑤ 결과보고서 작성 및 가이드라인 도출

□ 추진실적

○ ‘16. 3. 28.         :  시범학교 선정 (19개 신청학교 중 10개 학교)

○ ‘16. 4. 20. ~ 5. 2.  :  입찰공고

○ ‘16. 5. 4.          :  제안서평가회 개최

○ ‘16. 5. 25.         :  계약체결

□ 용 역 사 : ㈜한국색채디자인개발원

대표자	업종	주요 사업실적
이 지 호	디자인교육, 출판디자인, 디자인용역	***************************** *******************************

□ 착 수 일 : ‘16. 5. 25(수)

Ⅱ		사업 추진체계

Ⅲ		추 진 일 정

단계	주요추진사항	세부내용	예상일정
1	대상학교 현장조사*	-학교별 학교 환경조사 -학교 문제점 분석 및 사용자의 욕구 분석	5월 3~4주
2	사업 킥오프미팅	-현장조사결과보고 -관련일정 및 작가풀 협의	5월 4주
3	사용자 니즈 점검	-학교별 교사 및 학생 대상 사전설문조사 시행 -학교별 50명 이상	6월 1주
4	디자인워크숍 개최	-학교별 담당 일러스트레이터 주최 -학생 및 관련 교사 참석	6월 1~3주
5	색채디자인 컨셉도출	-사용자니즈, 컬러테라피 적용한 색채디자인	6월 2~3주
	1차 자문위원회	-현황조사 및 컨셉에 대하여 자문시행	6월 3~4주
6	색채디자인 기본계획	-자문내용 반영한 학교별 디자인계획 완성	6월 5주
	일러스트 시안 완성	-학교별 일러스트 작가 시안 완성	7월 1주
	2차 자문위원회	-학교별 색채디자인계획 자문시행 -학교별 일러스트 시안 및 시공 장소 자문	7월 1-2주
7	색채디자인계획 완성	-자문내용 반영한 색채디자인계획 완성 -학교별 색채디자인 시안 설명 및 전달	7월 1-2주
	3차 자문위원회	-최종색채디자인계획 자문	7월 3-4주
8	시공도면 완성	-학교별 도장시공을 위한 색채디자인시공도면 작성 -학교별 일러스트시공을 위한 도면 작성	7월 3-4주 7월 4-5주
9	시공	-학교별 일정에 따라 색채디자인 도장시공 진행 (방학기간 시행되는 타공사완료 후 진행예정) -시공도면 완성학교 순차적 시공진행 -그래픽 전문회사 일러스트 시공	7월 4주- 8월 4주
			7월 4주- 8월 4주
10	색채디자인 감리	-시공 시 학교 방문 색채 및 일러스트 시공 감리	7월 4주- 9월 2주
11	만족도 조사	-학생들의 환경 사용 후 사용자 만족설문 진행	10월2-3주
12	가이드라인 및 결과보고서	-최종결과보고서 작성 -가이드라인 작성	11월-12월

Ⅳ		향 후 계 획

□ ‘16.  6. ~ 7. :  학교별 디자인워크숍 추진

□ ‘16. 7.      :  색채기본계획 및 그래픽디자인 개발

□ ‘16. 8.      :  도면시공

□ ‘16. 12.     :  사업결과 보고

끝.